문화체육관광과

					목 차

▢ 2020년 상반기 운영성과와 방향	… …	3
▢ 2020년 주요업무 추진현황
1. 문예회관 시설확충 및 기능강화	… …	4
2. 서부내륙권 및 충청유교문화권 광역관광 개발사업	… …	5
3. 성장촉진 지역개발사업	… …	7
4. 일반관광자원 개발사업	… …	8
5. 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	… …	10
6. 개방형 트레이닝 센터 건립	… …	12
7. 청양 생활체육 야구장 조성	… …	13
8. 지역특색에 맞는 문화예술 시책 추진	… …	14
9. 전통문화유산의 보존 및 계승 발전	… …	17
10. 청양군립예술단 창단 운영	… …	20
11. 문화향유 기회 확대로 군민 삶의 질 향상	… …	21
12. 군민체육대회 개최	… …	26
13. 엘리트체육 활성화	… …	27
14. 생활체육 및 장애인체육 활성화	… …	28
15. 문화재 보수정비사업 추진	… …	31
16. 문화유산 발굴 및 보존관리	… …	33
17. 백제문화체험박물관 운영 활성화	… …	35

2020년 상반기 운영성과와 방향

□ 상반기에는

○ 코로나 19 확산으로 문화예술체육분야 사업 축소 및 연기

- 축제·문화예술 행사 및 스포츠마케팅 사업 연기

- 청양시네마·박물관·도서관·모덕사 휴관 및 축소운영

○ 주변 관광자원과 연계하는 관광개발사업 추진

- 3대 권역(칠갑호, 천장호, 장곡사) 중심 관광 기반시설 확충

○ 체육시설 인프라 확충으로 생활체육 저변 확대 및      건강증진 도모

- 공공체육시설 확충 및 소규모 체육시설 체계적인 관리

○ 문화유산 발굴 보존을 통한 지역문화자원 가치증대

- 문화유적 발굴 지정 및 면암선생 정신 선양

- 역사문화자원 원형보존을 통한 선량 보존관리

□ 하반기에도

○ 코로나 팬데믹 상황을 고려하여 연기되고 계획된     문화예술체육 사업 추진

○ 관광개발사업 가시적 성과 거양으로 매력있는 관광     기반시설 조성

○ 역사문화자원의 체계적 관리 및 가치제고로 문화적 자긍심 고취

1		문예회관 시설확충 및 기능강화

◈ 시설의 보완 · 확충으로 지역 복합문화공간으로서의 기능 강화

◈ 연습실 등 문화커뮤니티 공간 조성으로 지역 문화발전에 기여

□ 개 요

❍ 사 업 비 : 6,698백만원(국비 800, 도비 2,349, 군비 3,549)

❍ 사업기간 : 2018 ∼ 2020년

❍ 사업내용

- 대·소공연장 리모델링 : 4,698백만원

· 옥상방수, 냉ㆍ난방 시설보완, 무대기계ㆍ조명ㆍ음향 교체보강 등

- 동아리 역량강화 등 소프트웨어사업 : 900백만원

- 나눔연습장 건립(야외공연장 부지활용) : 1,100백만원

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘18. 10. : 설계용역 착수

❍ ‘19. 06. : 설계용역 완료

❍ ‘19. 11. ~  : 공사착공

- 건축 및 무대기계ㆍ조명 철거완료, 방수공사 완료

❍ ‘20. 01. ~ 12. : S/W 사업계획 수립 및 추진

❍ ‘20. 03. : 나눔연습장 설계용역 발주 및 공유재산관리계획 변경

❍ ‘20. 04. : 나눔연습장 설계용역 관련 문화예술단체 의견수렴 간담회 실시

❍ ‘20. 06. : 나눔연습장 실시설계 용역 완료

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 07. : 야외공연장 철거

❍ ‘20. 08. : 나눔연습장 공사 착공

❍ ‘20. 11. : 리모델링사업 준공

❍ ‘20. 12. : 나눔연습장 준공

2		서부내륙권 및 충청유교문화권 광역관광개발사업

【1】 매운고추 체험나라 조성사업

◈ 자연경관과 지역특산물을 활용한 자연 친화적인 공간으로 개발

▸ 가족형 체험관광 시설 다변화(카페 및 스낵코너 등)

◈ 스카이워크 등 관광시설과 연계하여 시너지효과 창출

□ 개 요

사업명	위 치	총사업비 (백만원)	사 업 량	사업 기간	비고
매운고추 체험나라 조성사업	대치면 광대리	9,550 (국4,562, 군4,988)	·매운고추체험관 A=2,631㎡ ·농경체험 A=520㎡	΄17∼΄21 (5년)	실시 설계 중

□ 그 동안 추진실적

❍ ’20. 01. : 서부내륙 광역관광개발 사업계획변경 승인 완료(문체부)

❍ ’20. 01. : 실시설계 자문회의 개최

❍ ’20. 02. : 전략환경영향평가 및 지구단위 계획 수립

❍ ’20. 04. : 건물디자인 자문회의

□ 하반기 추진계획

❍ ’20. 09. : 건축인허가

❍ ’20. 10. : 실시설계용역 완료

❍ ’20. 12. : 공사 착공(준공 ’21. 12.)

【2】 선비충의 문화관 조성사업

◈ 우리군이 보존하고 있는 유교문화자원(모덕사)을 활용하여

교육적 가치를 제고하고 관광자원화 기반조성

□ 개 요

사업명	위 치	총사업비(백만원)	사 업 량	사업 기간	비고
선비충의 문화관 조성사업	목면 송암리	10,620 (국5,310/도1,062/군4,248)	· 선비충의 문화관조성 A=4,000㎡ - 선비문화의 집(교육관 500㎡ 관리휴게동 300㎡, 숙박동 600㎡) - 서화숲정원, 면암의 길 등(2,600㎡)	΄20∼΄23 (4년)

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘16. 06. : 충청유교문화권 광역관광개발 기본구상 및 계획(문체부) 확정

❍ ‘17. 12. : 선비충의 문화관 조성사업 기본계획 용역 착수(18.12완료)

❍ ‘18. 06. : 도 투자심사(2차) 완료

❍ ‘19. 12. : 국도비보조금 예산 확정 통지

❍ ‘20. 03. : 추경 예산 편성 및 공유재산 관리계획 승인

❍ ‘20. 03. : 사업추진 관련 분야별 전문가 자문위원회 개최

❍ ‘20. 05. : 선비충의 문화관 콘텐츠 개발용역 착수

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 07. : 군계획시설 결정용역 착수

❍ ‘20. 09. : 사업계획 사전검토(공공건축 지원센터)

❍ ‘20. 10. : 공공건축 기획심의(충청남도 건축도시과)

❍ ‘20. 11. : 설계용역 도 계약심사

❍ ‘20. 12. : 설계공모 발주

❍ ‘21. 05. : 설계용역 및 실시계획인가 용역 착수

❍ ‘22. 02. : 공사 도 계약심사

❍ ‘22. 03. : 착공(’23. 12. : 준공예정)

3		성장촉진지역 개발사업

◈ 주변 관광자원과 연계하는 기반시설 확충으로 지역균형발전 도모

◈ 성장 잠재력을 개발하여 지속적인 발전을 견인할 수 있는      성장 동력 창출

□ 개 요

사업명	위 치	총사업비 (백만원)	사 업 량	사업 기간	비고
계	3개 사업	17,965
천장알프스지구 관광인프라 확충사업	정산면 천장리	11,700 (국9,300, 군2,400)	·역사기념공원 8,336㎡ →10,770㎡(증 2,434㎡) ·연결도로 L=1.4km	΄18∼΄22 (5년)	실시설계 및 행정절차 이행
백제문화체험박물관 진입로 확포장	대치면 장곡리	3,800 (국3,200, 군600)	·주차장 6,000㎡→8,066㎡(증2,066㎡) ·진입도로 200m→170m(감30m)	΄19∼΄22 (4년)
알프스로 가는 하늘길 조성사업	정산면 천장리	2,465 (국1,575, 군890)	·하늘쉼터 600㎡→392㎡(감 208㎡) ·구름다리 50m → 80m(증 30m) ·연계탐방로 400m→370m(감 30m) ·주차장 6,807㎡ → 8,548㎡(증1,741㎡)	΄19∼΄21 (3년)

□ 추진실적 및 추진 계획

사업명	그동안 추진 실적	하반기 추진 계획	비고
천장알프스지구 관광인프라 확충사업	΄20. 01. 관련법 검토 및 전략 환경영향평가 평가항목 결정 공고 ΄20. 04. 보상계획 공고 및 지역개발 계획 변경 수요 신청 ΄20. 06. 일괄승인 신청(지역개발 계획 변경, 사업시행자 지정, 실시계획)	΄20. 09. 일괄승인 고시 (지역개발계획 변경, 사업 시행자 지정, 실시계획) ΄20. 10. 공사착수 후 사업기간 내 준공
백제문화체험 박물관 진입로 확포장
알프스로 가는 하늘길 조성사업

4		일반관광자원 개발사업

◈ 주요 관광지 인프라 확충 및 명소화 추진

◈ 흥미유발 체험시설 확충으로 관광객 유치를 통한 지역 활성화 도모

□ 개 요

사업명	위 치	총사업비 (백만원)	사 업 량	사업 기간	비고
계	5개 사업	22,600
장곡천 수변생태 체험 파크 조성사업	대치면 장곡리	5,400 (국1,100/도2,950/군1,350)	·생태체험놀이터 및 문화체험공간 A=10,036㎡ ·황금쉼터 A=1,303㎡	΄19∼΄21 (3년)	실시 설계중
천장호 생태관광 기반구축사업	정산면 천장리	3,800 (국900/도1,950/군950)	·에코워크 L=400m ·에코스터 L=50m ·산책로 L=800m ·생태공원 A=2,000㎡	΄19∼΄21 (3년)	실시 설계중
칠갑호 관광자원 조성사업	대치면 광대리	5,800 (도2,900/군2,900)	·스카이워크 1식	΄20∼΄22 (3년)	실시 설계중
다락골 관광 자원 정비사업	화성면 농암리	3,000 (도1,500/군1,500)	·공원 및 주차장 조성 A=12,396㎡	΄21∼΄23 (3년)	기본 계획완료
백제문화 체험박물관 콘텐츠강화사업	대치면 장곡리	4,600 (국1,500/도1,350/군1,750)	·백제예술체험관 A=1,150㎡ ·야외쉼터,쌈지공원	΄17∼΄21 (5년)	실시 설계중

□ 추진실적 및 추진 계획

사업명	그동안 추진 실적	하반기 추진 계획	비고
장곡천 수변생태 체험파크 조성사업	‧΄20. 01. 실시설계용역 착수 ‧΄20. 02. 기본계획변경 승인완료 (문체부) ‧΄20. 02. 착수보고 및 주민설명회 ‧΄20. 03. 보상계획 공고 및 보상추진 ‧΄20. 04. 환경영향평가용역 착수 ‧΄20. 06. 자문회의	‧΄20. 08. 실시설계용역 완료 ‧΄20. 10. 공사 착공(준공 ΄21. 12.)
천장호 생태관광 기반구축사업	‧΄20. 01. 실시설계용역 착수 ‧΄20. 02. 기본계획변경 승인 완료(문체부) ‧΄20. 03. 착수보고 및 주민설명회 ‧΄20. 04. 현장답사(군수, 농어촌 공사지사장 등) ‧΄20. 05. 환경영향평가용역 착수	‧΄20. 08. 실시설계용역 완료 ‧΄20. 10. 공사 착공 (준공 ΄21. 12.)
칠갑호 관광자원 조성사업	‧΄20. 04. 기본 및 실시설계 용역 착수 ‧΄20. 06. 착수보고 및 자문회의	‧΄20. 11. 기본 및 실시설계 용역 완료 ‧΄20. 12. 공사 착공 (준공 ΄21. 12.)
다락골 관광자원 정비사업	‧΄19. 10. ~ ΄20. 02. - 3차례 사업회의(다락골 성지 관계자 등) ‧΄20. 03. - 4차 면사무소 주민 회의 (면장, 이장, 신부, 천주교 대전교구 등) ‧΄20. 04. 기본계획용역 수립 완료	‧΄20. 07. 2단계 1기 도 균형발전 사업(2021년) 확정 ‧΄21. 01. 실시설계용역 착수
백제문화체험박물관 콘텐츠 강화사업	΄20. 1. 실시설계용역 재착수 ΄20. 2. 기본계획 변경수립 용역 완료 ΄20. 2. 문체부 사업계획 변경 승인 ΄20. 3. 토질조사용역 완료 ΄20. 4. BF예비인승 용역 착수 ΄20. 6. 기존 건축물 철거공사	΄20. 7. 道디자인심의 및 BF인증 ΄20. 8. 건축공사 착수 ΄20. 8. 전시설계 및 전시물 제작설치 착수

5		스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

◈ 전국 및 도 단위 유치ㆍ개최로 지역경제 활성화 기여

◈ 스포츠마케팅 부가가치 향상 연구용역 등 스포츠마케팅

효율성 제고 방안 모색

【1】 전국 및 도 단위 대회 유치

□ 개 요

❍ 사업기간 : ‘20. 01.∼12. (연중실시)

❍ 사 업 비 : 24억원(군비 100%)

❍ 유치종목 : 복싱 외 15종목(검도, 게이트볼, 복싱, 합기도 등)

❍ 대회규모 : 50건/ 170일/43,000여명

□ 그 동안 추진실적

❍ 개최실적 : 6건/27일/2,135명

대 회 명	기 간	인 원	장 소	비 고
계	27일	2,135
2020 복싱팀 동계합숙훈련	1.13∼22(10)	785	군민체육관	완료
전국대학교 및 고등부우수 선수 초청 탁구동계 전지훈련	1.29∼2.2(5)	300	다목적체육관	″
2020 청양고추ㆍ구기자배 전국중학교검도스토브리그	1.30∼2.2(4)	300	군민체육관	″
2020 대한합기도총협회 제1차 합기도지도자 연수교육(3급)	5.8∼10(3)	200	″	″
2020 대한합기도총협회 고단자 합기도지도자 연수교육(2급)	5.29∼31(3)	200	″	〃
2020 대한합기도총협회 최고단자합기도지도자 연수교육(1급)	6.6∼7(2)	350	〃	〃

□ 하반기 추진계획

❍ 개최계획 : 44건/ 143일/ 40,865명

☞ 코로나19 진행 상황 등을 고려 스포츠마케팅 적극 추진

【2】 스포츠마케팅 부가가치 향상 용역

□ 개 요

❍ 사업기간 : ‘20. 01.∼12.(12개월)

❍ 사 업 비 : 20백만원

❍ 내    용 : 스포츠마케팅 경제적 효과 및 부가가치향상 방안 모색

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘20. 03. : 스포츠마케팅을 통한 지역발전방안 모색 연구용역   발주

☞ 코로나19로 인해 스포츠마케팅 연기로 연구용역 미계약

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 07. : 코로나19 진행 상황 등을 고려 연구용역 계약

❍ ‘20. 07. : 연구용역 착수

❍ ‘20. 12. : 연구용역 완료

6		개방형 트레이닝 센터 건립

◈ 군민의 건강유지 및 질병예방을 위한 과학적 체력측정으로 맞춤형 관리 서비스 제공

◈ 개개인의 체력능력 측정 및 맞춤형 운동처방을 통해 체계적인 체력관리서비스 제공

□ 개 요

❍ 위    치 : 청양읍 송방리 104-1번지(구 청양 여자정보고)

❍ 사 업 비 : 5,800백만원(국 1,740, 군 3,060, 교600, 조400)

❍ 사업규모 : 연면적 2,400㎡내외, 지상 3층, 트레이닝센터 1식

체력증진실, 체력측정실, 사무실, 강당 등

❍ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.

□ 그 동안 추진실적

□ ‘20. 05.~ : 국민체력인증센터 등 타 시ㆍ군 벤치마킹

☞ 아산체력인증센터 외 3개소

※ 전국 58개소 운영 중 : 2020년 3월 현재(충남 3개소)

□ 하반기 추진계획

□ ‘20. 07. : 설계용역 발주(설계공모)

□ ‘20. 11. : 설계용역 완료 및 각종 인허가 협의

□ ‘20. 12. : 공사발주

□ ‘21. 12.  : 공사완료

7		청양 생활체육 야구장 조성

◈ 생활체육 야구장 조성으로 생활체육 저변확대 및 야구동호인      역량강화 기여 도모

□ 개 요

❍ 위    치 : 청양군 대치면 탄정리 423-4번지외 8필지 일원

❍ 사 업 비 : 3,180백만원(국 350, 군 2,430, 조 400)

❍ 사업규모 : 야구장(성인 3종) 1식, 주차장 32대(장애 5대) 등

❍ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2021. 06.

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘20. 02. 11. : 야구장 시설입지 선정 부적정 道감사 지적(최종)

❍ ‘20. 02.~03. : 대체 진입로 관련 도로관리청 협의

(논산국토관리사무소, 종합건설사업소 등)

❍ ‘20. 03. 05. : 대체진입로 관련 도로관리청 협의 결과 보고    ❍ ’20. 04. 01. : 대체진입로 편입토지 소유자 동의서 작성 완료                    (대체진입로 토지 측량 및 설계 동의)

❍ ‘20. 05. 18. : 대체 진입로 관련 기본설계 착수

❍ ‘20. 06. : 대체진입로 최종 방침 결정 및 도로관리청 협의

기본설계 완료

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 07.∼08. : 토지소유주 매입관련 협의

❍ ‘20. 08. : 추경 예산 반영

❍ ‘20. 09. : 공사 재착공

❍ ‘21. 06. : 공사 완료 및 개관식

8		지역특색에 맞는 문화예술 정책 추진

【1】문화예술 발전계획 수립

◈ 문화예술 발전계획 수립으로 지역의 특성에  맞는 문화예술      정책추진 및 발전방안 모색

□ 개 요

❍ 기    간 : 2020. 04. ~ 10.

❍ 사업내용 : 전반적인 지역 현황 및 문화예술 여건 분석,

현 문화예술정책 추진체계 검토, 청양군 문화예술                 발전계획 수립

❍ 사 업 비 : 50백만원

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 3. : 청양군 문화예술 발전계획 수립

❍ 2020. 4. : 용역 계약

❍ 2020. 5. : 착수 보고회

❍ 2020. 6. : 문화예술인 통합워크숍 개최

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 8. : 중간 보고회

❍ 2020. 10. : 최종 보고회

【2】특색있는 문화가 있는 날 행사 추진

◈ ‘충남의 알프스 청양’이미지 연계 ‘알프스 하이디가 온다!’ 사업추진

◈ 생활밀착형 문화행사 추진으로 지역주민 문화향유 기회확대

□ 개 요

❍ 사 업 명 : 알프스 하이디가 온다!

❍ 사업기간 : ‘20. 9. ~ 12.(총 5회)

❍ 장    소 : 청양읍 원도심

❍ 사 업 비 : 140백만원(국 70, 군 70)

❍ 사업내용 : 알프스 콘텐츠 이미지 구축을 위한 친환경 및                   힐링의 지역자원을 활용한 문화전시, 체험, 강습,                 공연, 커뮤니티 프로그램 운영

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 4. : 문화가 있는 날 ‘알프스 하이디가 온다!’ 계획 수립

❍ 2020. 5. : 문화가 있는 날 네트워크 협의체 회의 개최

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 9. ~ 12. : 행사 개최

※ 코로나 19로 인하여 문체부 지침에 따라 하반기 행사 개최

【3】모두모여 오케스트라 운영

◈ 전 연령대를 대상으로 한 눈높이 윈드오케스트라교실 운영

◈ 클래식의 대중화로 문화활동의 다양화와 질적 향상을 기대

□ 개 요

❍ 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 군비 100)

❍ 사업기간 : 2020. 6. ∼ 12.

❍ 사업대상 : 학생 및 청양군민

❍ 사업장소 : 중학교 교실, 중심지회당 등

❍ 사업내용

- 모두모여오케스트라 교실 등 운영 / 100백만원

<오케스트라교실(중학생반, 중급반), 합주회, 정기연주회 등>

- 악기구입 / 100백만원

< 19종 43대 (목관악기 6, 금관악기 5, 타악기 8) >

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘20. 03. 31. : 보조금 교부(어스뮤직커뮤니티)

❍ ‘20. 06. : 악기구입 완료

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20.  6. ∼ 12. : 모두모여오케스트라 교실 등 운영

9		전통문화유산의 보존 및 계승 발전

【1】 지정문화재 정비 및 영상기록화 사업

◈ 산재되어 있는 문화재 자료를 정비하고 데이터 구축으로

효율적이고 체계적인 관리와 보존방안 마련

□ 개 요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2021. 1.(예정)

❍ 사 업 비 : 100백만원

❍ 사업대상 : 국가 및 도지정문화재 41점

❍ 사업내용 : 지정문화재 현황조사(보존관리 실태점검) 및 기록화, 문화재관리대장 작성, 문화재 관리 및 행정 고도화 전략 수립 등

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘20. 1. ∼ 2. : 사업계획 수립 및 과업지시서 작성

❍ ‘20. 03. : 일상감사 및 계약심사 완료

❍ ‘20. 05. : 용역 착수

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 06. ∼ ’21. 1. : 용역 추진

❍ ‘20. 7. ∼ 12. : 관련 전문가 검토 및 자문회의 실시(3회 예정)

❍ ‘21. 1. : 용역 완료

【2】 청양군 전통민속마을제 기록화 사업

◈ 사라져가는 마을 전통자원을 발굴 및 기록화 하여, 마을 공동체 회복에 기여

◈ 새로운 관광자원으로 발전시킬 수 있는 콘텐츠 개발

□ 개 요

❍ 사 업 비 : 50백만원(군비 50)

❍ 사업기간 : 2020 ∼ 2021년

❍ 사업내용

- 마을별 민속 자원 기록

· 군내 마을 단위로 시행하는 마을제 등의 민속자원 촬영 및 기록을 통한 자료 전산화

· 백서 형태의 기록 자료집 발간

- 마을별 민속 자원 발굴 및 콘텐츠 개발 방향 제시

· 자연 경관형, 민속 체험형 등의 유형별 마을 자원 발굴

· 전문가 컨설팅을 통해, 각 마을별 민속 자원의 특징을 분석하여 콘텐츠 개발 방향 제시

□ 그 동안 추진실적

❍ ’20. 04. : 세부 추진계획 수립

❍ ’20. 04. : 용역 발주

❍ ’20. 05. ~ 06. : 용역 업체 계약 및 조사사업 착수

□ 하반기 추진계획

❍ ’20. 09. : 1차 중간보고회

❍ ’21. 01. : 2차 중간보고회

❍ ’21. 04. : 최종보고회

❍ ’21. 04. : 용역 완료, 책자(자료집) 발간 및 홍보

【3】 읍·면 풍물한마당 개최

◈ 읍 · 면 풍물대회 개최로 지역민의 풍물기량을 발휘하고

전통민속으로 화합할 수 있는 기회 제공

□ 개 요

❍ 사 업 비 : 15백만원

❍ 일    시 : 2020. 9월중(군민체육대회시 개최)

❍ 내    용 : 군민체육대회시 10개 읍‧면 풍물한마당 개최

□ 추진계획

❍ ΄20. 07. : 읍·면 풍물단 대표 사전 회의

❍ ΄20. 08. : 개최계획 수립 및 심사위원 위촉

❍ ΄20. 09. : 대회 개최

10		청양군립예술단 창단 운영

◈ 청양군립예술단 창단 운영으로 군민의 정서함양과 지역

문화예술 진흥 도모

□ 개 요

❍ 예산액 : 50백만원

구분	취타대	합창단	기타
단원구성	40명 이내 (총감독1, 일반단원 39)	40명 이내 (지휘자1, 반주자1, 일반단원 38)
선 발	‧ 공개모집전형에 의한 비상근 직원
활 동	‧ 주 1회 이상 역량강화 연습 ‧ 축제 및 군 행사 지원 ‧ 찾아가는 공연 및 연말 정기연주회

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 1. : 청양군립예술단 운영 및 지휘자‧총감독 모집 및

전형 선발계획 수립

❍ 2020. 2. ~ 3. : 지휘자, 총감독 전형심사 및 합격자 결정      ❍ 2020. 4. : 단원모집계획 수립

❍ 2020. 5. ~ 6. : 단원모집 및 단원 합격자 결정

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 7. : 군립예술단 창단

❍ 2020.7. ~ 12. : 역량강화를 위한 정기연습 및 공연

11		문화향유 기회 확대로 군민 삶의 질 향상

【1】 문화예술진흥 활성화 추진

◈ 다양한 문화예술 공연 및 행사 지원으로 군민의 문화

예술 향유기회 확대 및 관내 문화예술단체의 역량 강화

□ 개  요

❍ 지방문화원 각종 사업활동 지원 : 7개 사업, 396백만원

세부사업명	사업비 (천원)	사 업 내 용	비고
계	396,007	7건
문화원 운영비	139,797	문화원 인건비 및 운영비
청양 문화예술활동 진흥	100,000	문화원 동아리 운영지원
지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성	70,000	지방문화원 활동지원 (도서발간, 성년례, 향토사 연구답사 등)
근현대 구술채록사업	20,000	지역문화의 정체성 확립을 위한 전통문화 구술채록
문화학교운영	7,000	일반인 및 학생대상 문화강좌 운영
음향기기 구입	30,000	문화원 동아리 활동 음향기기 구입
문화원 방음공사 및 내부시설 보수	29,210	소회의실 방음시설 및 원장실 보수

❍ 지역예술단체 지원 및 문화전시회 지원 : 4개 사업, 158백만원

세부사업명	사업비 (천원)	사업내용(보조단체)	비고
계	158,000	4건
일반문화행사지원	20,000	석가탄신일기념행사(불자연합회), 성탄트리점등식(기독교연합회)
지역문화 예술단체 지원	120,000	지역문화예술단체 도·군 공모사업 추진
좋은 책 알리기 문화행사	3,000	어린이 책 시민연대 청양지회 어린이 책 읽기관련 사업지원
전시회유치	15,000	(사)한국미술협회 청양군지부 향토작가전 및 학생미술캠프운영지원

❍ 각종 대회 개최 및 출전 : 면암서화공모대전 개최 등 8건 132백만원

세부사업명	사업비 (천원)	사업내용	비고
계	132,000	8건
면암서화공모대전 개최	60,000	(사)대한민국면암서화협회 대한민국 면암서화공모대전 개최
전국청소년 기악경연대회개최	10,000	(사)한국음악협회 충남도지회 전국청소년기악경연대회 개최
충남도지사배 민속대제전	10,000	청양문화원 충남도지사배 민속대제전 출전비 지원
전국남녀 시조경창대회 개최	8,000	청양군 내포제 시조보존회 전국남녀 시조경창대회 개최
제61회 한국민속 예술제 출전	25,000	청신여자중학교 한국민속예술제 청소년부 출전
충청남도 일반남여 풍물대회 등 출전	10,000	(사)한국국악협회 청양군지부 道풍물대회 및 국악제 참가비 지원 2회
웃다리농악 전국경연대회 출전	6,000	충청웃다리농악 보존회 전국 경연대회 출전비 지원 2회
충청남도 합창경연대회 출전	3,000	부러우니합창단 충청남도 합창경연대회 출전지원

❍ 공공도서관 육성 : 청양교육지원청(청양도서관), 20백만원

❍ 문화누리카드 사업 추진 : 96백만원(1인당 90,000원 지원)

❍ 칠갑산 장승공원 유지관리 : 19.5백만원

❍ 전통문화예술 강습비 지원 : 28백만원

❍ 대한민국미술대전 청양출신 초대작가전 개최 : 12백만원

❍ 풍물예술단 활동 지원 : 9.5백만원

□ 그 동안 추진실적 및 하반기 추진계획

❍ 지방문화원 각종 사업활동 지원

세부사업명	추진실적	하반기 추진계획
문화원 운영비	❍ 상반기 문화원 직원(4인) 인건비 및 운영비, 신년인사회 개최	❍ 하반기 문화원 직원(4인) 인건비 및 운영비 지원
청양 문화예술 활동 진흥	❍ 문화예술학습동아리 9개강좌 개설(‘20. 5. ~ 12.)	❍ 문화예술 전시회(3회),공연(2회) 및 청양문화예술제 개최 등
지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성	❍ 칠갑문화발간 등 3개 향토문화사업 착수 및 전통문화예술 3개 강좌 개설	❍ 도서발간 3종 완료, 문화달력 제작, 전통성년례 및 문화유적 탐방 실시
근현대 구술 채록사업	❍ 2020. 6. 구술채록사업 착수 (청남면 인양리 갈대 후리는 소리)	❍ 2020. 12. 구술채록사업 완료
문화학교운영	❍ 동계 문화학교 4개 프로그램 완료	❍ 하계 문화학교 4개 프로그램 및 지역문화학교 1개 프로그램 운영
음향기기 구입	❍ 2020. 5. 이동식 음향기기 구입	❍ 문화원 3층 노후 음향기기 보완 구입
문화원 방음공사 및 내부시설 보수	-	❍ 공사 완료(2020. 7. ~ 8.)

❍ 지역예술단체 지원, 문화전시회, 각종 대회 개최 및 출전 등

세부사업명	추진실적	하반기 추진계획
지역예술 단체 지원 및 문화 전시회 지원	❍ 도·군 공모사업 : 사업 선정(도 2개 ·군13개 단체) 보조금 지원 ❍ ’20. 5. 16. : 부처님오신날 기념행사 ❍ ’20. 5.~12. : 좋은책 알리기 행사 추진 ❍ ’20. 5.20.~ 5.24. : 청양 향토작가전 및 학생미술캠프 운영 → 18건, 148백만원 보조금 지원	❍ ’20. 7.~12. : 도 · 군 공모사업 추진(‘춤, 흥, 멋, 가락’ 무용 공연 등 15개 사업) ❍ ’20. 7.~12. : 풍물예술단 지원사업 추진 (청양읍·정산면 풍물단, 충청웃다리농악회) ❍ ’20.12. : 성탄절 기념 행사 추진
각종 대회 개최 및 출전	❍ ’20. 4. : 제9회 대한민국면암서화 공모대전개최/(사)대한민국면암서화협회 → 1건, 60백만원 보조금 지원 ※ 전국아마추어 색소폰 경연대회 취소	❍ ’20. 9.~11. : 전국대회 2건 개최 (시조경창·기악경연대회) ❍ ’20. 9.~ 12. : 도 및 전국대회 6건 출전(풍물 2, 웃다리농악 2, 합창 1, 민속대전 1)
기타	❍ ’20. 2.~12.: 문화누리카드 사업 추진 → 2회, 91백만원 충남문화재단 보조금 지원 ❍ ’20. 5.~12.: 장승공원 유지관리 → 2회, 1.3백만원 집행 ❍ ’20. 1.~12.: 전통문화예술(서예, 서화, 웃다리농악 등) 강습비 지원 → 5.6백만원 집행(2.~ 5. 코로나 19 휴강)	❍ ’20. 7. : 공공도서관 육성 (자료구입 지원) 추진 ❍ ’20. 11. : 대한민국미술대전 청양출신 초대작가전 개최

【2】정산도서관 및 청양시네마 운영 활성화

◈ 주민의 문화향유 및 정보격차 해소를 위한 프로그램

운영 등 도서관 운영 내실화

◈ 전문업체 위탁 운영으로 가족중심의 여가문화 수요에

부응하고 청양시네마의 전문적ㆍ효율적 운영 도모

□ 정산도서관 운영 실적 및 계획

❶ 추진실적

❍ ’20. 1.29. : 문화가 있는 날 ‘도서 대출 2배로 Day’ 운영

❍ ’20. 2. 1. ~ 2. 25. : 문화가 있는 날 ‘도서 원화 전시’ 운영

❍ ’20. 2. ~ 3. : 신간도서 구입(4,487천원 / 351권)

※ 코로나19로 임시휴관(2. 28. ~ 5. 5.)

➋ 추진계획

❍ ’20. 9. : 독서의 달 운영(1백만원)

❍ ’20. 7. ~ 12. : 문화가 있는 날 공연 ㆍ 전시 등 운영(7백만원)

❍ ’20. 7. ~ 12. : 생애주기별 맞춤형 프로그램 운영(2백만원)

❍ ’20. 7. ~ 12. : 지속적인 장서 확충(22백만원)

□ 청양시네마 운영 실적 및 계획

❶ 추진실적

❍ ’20. 1. : 청양시네마 민간위탁금 지급(62백만원)

❍ ’20. 1. : 전입주민 영화상품권 구입‧배부(24백만원 / 4천매, 1인 2매)

❍ ’20. 1. ~ 5. : 군 소속 희망직원 급여 원천징수(월 32명, 93매)

※ 코로나19로 임시휴관(2. 28. ~ 6.11.)

➋ 추진계획

❍ ’20. 7. ~ 12. : 명사(영화감독 및 배우)초청 무비&토크콘서트 개최

(2회 / 24백만원)

❍ ’20. 7. ~ : 장애인초청 BF영화 무료상영회(월1회/ 12백만원)

❍ ’20. 7. ~ : 우수고객 감사이벤트(스탬프쿠폰 발급)

【3】제22회 칠갑산 장승문화축제 개최

◈ 전국 최다 장승문화 보존지역 위상에 맞는 축제 개최로        전국 최고의 향토민속축제로 도약

□ 개   요

❍ 일시/장소 : 2020. 9월 중 / 칠갑산 장승공원 일원

❍ 주최/주관 : 칠갑산 장승문화축제추진위원회/청양문화원

❍ 소요 예산 : 165백만원(도 35, 군 130) (컨설팅 10백만원 포함)

❍ 내     용 : 장승대제, 민속마을퍼레이드, 마을장승제, 장승혼례식 등

□ 그 동안 추진실적

❍‘20. 03. : 코로나19로 인한 축제 연기 결정 및 전국 시·군·구 공지

※ 2020. 7월중 축제추진위원회 의견 수렴하여 개최일시 등 결정

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 07. : 기본계획 수립 및 선양위원회 개최(2회)

❍ ‘20. 08. : 추진위원회의 및 군 실무회의 개최, 세부계획 수립

❍ ‘20. 09. : 축제 개최(2일간)

12		군민체육대회개최

◈ 군민과 함께 할 수 있는 종목 선정으로 군민 화합의 장 마련,

그동안 추진해 온 방식에 벗어나 군민 누구나 함께 참여할

수 있는 방안 등 모색

□ 개   요

❍ 대 회 명 : 제59회 군민의 날 체육대회

❍ 대회일시 : 2020. 9월 중(미정)

- 2020. 10. 01. 명절(추석)로 읍ㆍ면체육회 등과 협의 결정

❍ 장    소 : 공설운동장 외 보조경기장

❍ 사 업 비 : 350백만원(군 150, 읍ㆍ면 200)

❍ 주최주관 : 청양군체육회

❍ 경기종목 : 읍ㆍ면체육회 등과 협의 결정

- 2018년도 경기종목 : 육상, 축구, 여자 승부차기, 팔씨름, 게이트볼, 줄다리기, 한궁, 훌라후프, 오재미 넣기

□ 그 동안 추진실적

❍ 군민체육대회 개최 보조금 지급 : 청양군체육회 150,000천원

❍ 군민체육대회 출전 보조금 지급 : 읍ㆍ면체육회 200,000천원

□ 하반기 추진계획

❍ ‘20. 07. : 체육회 이사회의 개최 여부 협의 및 개최일 확정

기본계획 및 세부실행계획 수립(대회요강 등)

❍ ‘20. 08. : 읍ㆍ면체육회 대표자 회의 및 참가신청 접수

❍ ‘20. 09. : 군민의 날 체육대회 개최

- 코로나 19 진행 상황 등을 고려 청양군체육회와 협의 추진

13		엘리트체육 활성화

◈ 직장체육팀(복싱 및 육상팀) 운영으로 충남체육발전 기여

◈ 전국체전 및 도민체전 출전으로 청양군 대외 이미지 제고

【1】제72회 충청남도민 체육대회 출전

❍ 목표성적 : 종합 12위/13,000점(‘19년도 종합 13위/12,250점)

❍ 기간/장소 : 코로나 19로 무기한 연기/ 당진시

❍ 참가인원 : 650명(선수 500, 임원 150)

- 2020년부터 엘리트(19종목) + 생활체육(10종목) 통합 개최

【2】직장 체육팀 운영

❶ 복 싱

❍ 인    원 : 5명(감독 1, 선수 4)

❍ 예    산 : 524백만원(도 150, 군 374)

❍ 운영실적 : 전지훈련 2회 실시(45일간), 경북 영주, 대전대학교

❍ 전국체전 목표 : 금2, 은1, 동1.

❷ 육 상

❍ 인    원 : 7명(감독 1, 트레이너 1, 선수 5)

❍ 예    산 : 736백만원(도 236, 군 500)

❍ 운영실적 : 마라톤팀 해외 전지훈련실시(케냐 캅타캅 등)

일반팀 전지훈련 실시(제주특별자치도)

트레이너 신규 채용(마라톤팀 효율적 관리)

☞ 2020 도쿄올림픽은 코로나19로 2021년으로 연기

❍ 전국체전 목표 : 금2(5,000m, 10,000m)

14		생활체육 및 장애인체육 활성화

◈ 생활체육시설 확충으로 쾌적한 운동 환경 조성

◈ 생활체육, 장애인체육대회 개최 및 출전과 프로그램 운영으로

⇒ 생활체육 활성화 및 주민 건강증진 도모

【1】생활체육시설 확충사업

❶ 공설운동장 보조축구장 조성사업

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 백천리 183번지 일원

❍ 사 업 비 : 1,680백만원(국 360, 특교 500 특조 400 군 420)

❍ 사 업 량 : 보조 축구장(100X66m) 1식, 조명탑 설치(500lux)

❍ 사업기간 : ‘18. 01 ~ ’20. 10.

❍ 추진실적 : 공사착공(‘20. 03.) ※현공정 : 60%(맹암거 설치)

❍ 추진계획 : 공사완료(‘20. 8.)

❷ 화성면 게이트볼장 신축사업

❍ 위    치 : 청양군 화성면 구재리 232 일원

❍ 사 업 비 : 1,130백만원(국 250, 군 880)

❍ 사 업 량 : 전천후 게이트볼장 1식, 주차장 조성 등

❍ 사업기간 : ‘20. 01. ~ ‘20. 10.

❍ 추진실적 : 설계착수(‘20. 02.), 설계완료(‘20. 05.)

❍ 추진계획 : 공사착공(’20. 07.), 공사완료(‘20. 10.)

❸ 공설운동장 조명탑 설치사업

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 백천리 441-25번지 일원

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국 300, 군 700)

❍ 사 업 량 : 공설운동장 주경기장 조명탑 설치

❍ 사업기간 : ‘20. 01. ~ ‘20. 09.

❍ 추진계획 : 설계발주(‘20. 07.)/ 공사착공(’20. 07.)/ 공사완료(‘20. 09.)

❹ 체육물품 보관창고 설치사업

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 송방리 군민체육관

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 사 업 량 : 물품보관창고 330㎡

❍ 사업기간 : ‘20. 01. ~ ‘20. 10.

❍ 추진실적 : 설계착수(‘20. 03.)/설계완료(’20. 05.)

❍ 추진계획 : 공사착공(’20. 07.)/공사완료(‘20. 10.)

❺ 생활체육시설 설치 기본계획수립 용역

❍ 사업기간 : ‘20. 01. ∼ 12.(12개월)

❍ 사 업 비 : 20백만원

❍ 내    용 : 골프연습장 건립을 위한 기본계획 수립

❍ 추진계획 : 민간업체 골프장 건립 계획에 따른 보류

【2】대회개최 및 출전 등 지원

□ 개   요

❍ 군수기 체육대회 개최(축구, 배구 등 13종목) 52백만원

❍ 생활체육대회 개최 및 출전(2건) : 55백만원

- 2020 청양군 어머니생활체육대회 개최(11월 중) : 35백만원

- 제28회 충남어르신생활체육대회 출전(9월 중 태안군) : 20백만원

❍ 장애인 체육대회 출전(4건) : 96백만원

- 2020 충청남도장애인체육대회 출전(서천군) : 79백만원

- 전국 및 도 장애인체육대회 출전(6건) : 17백만원

□ 그 동안 추진실적 : 없음

※ 코로나19로 인한 각종 대회 연기

□ 하반기 추진계획

❍ 군수기 체육대회 13건 개최

- 축구, 게이트볼, 탁구, 볼링, 족구, 배구, 배드민턴, 그라운드골프, 파크골프, 골프 등.

☞ 코로나19 진행 상황 등을 고려 대회 추진

❍ 전국 및 도 단위 체육대회 출전

연번	대 회 명	출전시기	장 소	비고
1	충남 장애인체육대회	‘20. 09. 03.~05.	서천군
2	전국 장애학생체육대회	‘20. 09. 08.~11.	서울특별시
3	충남 어르신생활체육대회	‘20. 09. 17.~18.	태안군
4	충남 장애학생체육대회	‘20. 09. 25.	계룡시
5	전국 장애인체육대회	‘20. 10. 21.~26.	구미시

❍ ‘20. 11월중 : ‘20 청양군 어머니 생활체육대회 개최예정

❍ 그 외 도 장애인체육대회 출전 3건 미정

【3】스포츠강좌이용권(바우처) 사업

❍ 사 업 비 : 27백만원(기 19, 도 2, 군 6)

- 일반스포츠강좌(22백만원), 장애인스포츠강좌(5백만원)

❍ 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위 등 소외계층 월 8만원 지원

❍ 그 동안 추진실적 : 7,600천원(05. 31. 기준)

❍ 하반기 추진계획 : ‘20. 06.∼12. /14,480천원 전액 집행 예정

15		문화재 보수정비사업 추진

◈ 지역의 중요 문화재에 대한 선량한 보존관리를 통한 계승

◈ 문화유산의 원형 보존을 통한 문화재 가치 및 활용성 증대

□ 개 요

❍ 문화재 원형보존을 위한 보수정비 및 용역 시행

- 국가 및 도지정문화재 등 16건 696백만원

❍ 철저한 감독을 통한 완벽 시공 및 선량한 관리 유도

□ 그동안 추진실적 및 하반기 추진계획

(단위 : 백만원)

문화재명	소재지	사업내용	사업비	그동안 추진 실적	하반기 추진계획
합 계		16건	696
보부상유품(4) (국가민속문화재 제30-4호)	대치면 장곡길 43-24	원홍주육군상무사 유품 및 상무사에 대한 자료 연구 및 기록화	24	❍용역발주: 2. 27 ❍추진현황 : 3~5월 유물조사 및 기록화, 청양 상무사 관계자 인터뷰 등	❍8월까지 : 청양 지역 상무사 자료 지속 정비 및 연구, 발전 방안 마련 ❍완료예정 : 8.24
최익현 초상 (도 유형문화재 제248호)	대치면 장곡길 43-24	보존처리	30	❍설계 및 승인 완료: 5. 22 ❍사업 착공 : 6. 12	❍완료예정: 12.28
최익현 압송도 (도 유형문화재 제249호)	대치면 장곡길 43-24	보존처리	30	❍설계 및 승인 완료: 5. 22 ❍사업 착공 : 6. 12	❍완료예정: 12.28
도림사지 삼층석탑 (도 유형문화재 제 29호)	장평면 적곡리 669	해체 보수	50	❍설계 및 승인 완료 : 4. 8 ❍사업 착공 : 5. 14	❍완료예정: 8.11
정산향교 (도 기념물 제132호)	정산면 칠갑산로 1849-29	명륜당 방충처리	30	❍설계 완료 및 검토: 4. 30 ❍사업 착공 : 6. 1	❍완료예정: 8.29
윤남석가옥 (도민속문화재 제18호)	장평면 장수길 13-8	사랑채,행랑채 초가이엉잇기	18	시기미도래	❍착공예정 : 10월 ❍완료예정 : 11월
장곡사 (전통사찰 제30호)	대치면 장곡길 241	상수도 보수사업	40	❍보조금교부결정:2.26 ❍설계완료 : 5.8 ❍관련법협의 : 5.20 ❍설계승인요청 : 5.26	❍완료예정 : 7월
상의사 (충효열시설물)	화성면 무한로 226-120	삼문 및 영당 기단 보수 등	68	❍설계 및 승인 완료: 5.22 ❍사업 발주 : 6.18	❍완료예정 : 8월
김씨효자문 보수공사 (충효열시설물)	대치면 수석리 13-16	지붕 보수	44	❍설계 및 승인 완료: 5.18 ❍사업 착공 : 6.17	❍완료예정 : 7.31
최씨효자문 (충효열시설물)	대치면 농소리 655-1	전체 해체 보수	50	❍설계 및 승인 완료: 5.18 ❍사업 착공 : 6.19	❍완료예정 : 8.2
정혜사 목조석가여래삼불좌상 외 4건 (도 유형문화재 제241호)	장평면, 운곡면, 정산면	안내설명판 및 도로 표지판 설치	17	❍설계 완료 : 4.3 ❍안내문 감수 완료 (영문·국문) : 5. 22 ❍사업 발주 : 6월 초	❍완료예정 : 9월
두릉산성 (도 문화재자료 제156호)	정산면 백곡리, 목면 대평리	발굴 및 정비사업	100	❍토지사용 및 매입 관련 협의 중	❍지속적 협의 ❍시(발)굴 조사추진
정혜사 (도 문화재자료 제151호)	장평면 상지길 165-10	주변정비 등	40	❍설계 완료 및 검토: 3. 30 ❍사업 착공 : 4.22	❍완료 : 6.16
청양군 향토유적	관내 일원	안내설명판 설치	20	❍안내문 작성 완료: 3. 15 ❍안내문 감수 완료 (영문·국문) : 5. 22 ❍사업 발주 : 6.1	❍완료예정 : 7.30
청양 운장암 금동보살좌상 외 4건 (보물제986호)	남양면 정산면 운곡면 장평면	안내설명판 설치	35	❍설계 완료 : 4.3 ❍안내문 감수(영문·국문) : 5. 22 ❍사업 발주 : 6.22	❍완료예정 : 9월
국가 및 도지정문화재	관내 일원	지정문화재 기록화 및 고도화 전략 수립 등	100	❍사업계획 등 수립: 2월 ❍일상감사 및 계약 심사 완료: 3월 ❍용역 착수 : 5.13	❍완료예정:‘21.1.7

16		문화유산 발굴 및 보존관리

【1】 역사문화자원 발굴육성

◈ 지역 문화유산의 재조명 및 발굴을 통한 청양의 역사성

확립 및 역사문화 관광자원 활용

□ 그동안 추진실적

❍ 도 문화재 지정 연구 용역

- 내  용 : ‘대치 상갑리 산제당’ 道 문화재 지정조사용역

- 사업기간  :  2. 12 ∼ 7. 10

- 추진내용 : 3월 현지조사 완료, 자료 수집 및 데이터화 실시 중

❍ 청양군 향토유적 지정 연구 용역

- 내  용 : 관내 분포되어 있는 문화유산 발굴을 통한 향토유적 지정 추진

- 사업기간 : 3. 2 ∼ 8. 28

- 추진내용 : 3∼4월 현지조사 및 관계자 인터뷰, 자료 수집 및 분석

❍ 국가 및 도 지정문화재 지정 추진

- 청양 모덕사 최익현 초상(도 유형문화재 제231호)

⇒ ‘17. 7 문화재청 주관 문화재위원 현지조사 완료 후 보고서 작성 중

- 남양 봉암리 은행나무, 장평 정혜사 혜림암 목불좌상

⇒ ‘19. 12 지정조사 용역 완료,  ’20. 1 지정 자료 道 제출

❍ 전통향교 및 사당 등 지원(22백만원)

- 전통향교 : 청양, 정산향교 제향 및 제기구입비 20백만원 지원

- 사당 : 유의각, 이산사 2개소 제향비 2백만원 지원

□ 하반기 추진계획

❍ 도 문화재 및 청양군 향토유적 지정 연구 용역

- 대치 상갑리 산제당 및 향토유적 지정 조사 연구 용역 기한 내 완료 추진

❍ 국가 및 도 지정문화재 지정 추진

- 모덕사 최익현 초상(도유형문화재 제231호)

⇒ 국가지정(보물) 승격 문화재청 지정절차에 의해 지속 추진

- 남양 봉암리 은행나무, 장평 정혜사 혜림암 목불좌상

⇒ 도지정문화재 지정 연내 추진

❍ 전통향교 및 사당 등 지원(19.5백만원)

- 전통향교 : 문화기행, 기로연 행사 14백만원 지원

- 사당 : 두촌사, 상의사, 표절사 3개소 제향비 5.5백만원 지원

【2】 모덕사 운영 관리

□ 그 동안 추진실적

❍ 면암 최익현선생 항일거의 제114주년 기념 추모제향 완료

- 일시 및 장소 : ‘20. 4. 13.(월) 10:30, 모덕사 영당

- 참석인원 : 20여명(군수, 모덕회, 유족 등)

- 주관/내용: 청양군/ 대통령 헌화 및 제향

❍ 문화재 활용 사업

- 사업명 : 2020년 생생문화재 사업

- 사업자 및 사업비 : ㈜아키헤리스 / 27.5백만원(국11,도8.25,군8.25)

- 내용 : 모덕사, 최익현 초상을 주제로 학생 및 일반인 등 대상

체험프로그램 운영

- 실적 : 4개 프로그램 16회 중 3회 실시

※ 감염병 예방을 위해 제향 및 문화재 활용사업 최소화

□ 하반기 추진계획

❍ 면암 최익현선생 추모 추계 제향 봉행

- 일시 및 장소 : ‘20. 11. 1.(일) 11:00, 모덕사 사당

- 참석인원 : 200여명(지역 및 전국 유림 등)

- 주관/내용 : 모덕회(회장 유성현) / 제향 봉행

❍ 문화재 활용 사업 : 4개 프로그램 13회 운영

17		백제문화체험박물관 운영 활성화

【1】 백제문화체험박물관 운영

□ 그 동안 추진실적

❍ 체험프로그램 운영(8.1백만원) : 상설 및 절기별 특별체험프로그램 운영

❍ 박물관 시설보완(121백만원) : 수장고 보완공사, 시설보완공사 등

□ 하반기 추진계획

❍ 체험프로그램 운영(75.9백만원)

- 상설 및 특별체험프로그램, 백제문화체험한마당 운영

❍ 박물관 시설보완(126백만원) : 상설전시환경 개선공사 등

❍ 박물관 기획전시(20백만원)

【2】 백제문화체험박물관 증축공사

□ 개 요

❍ 위    치 : 청양군 대치면 장곡리 백제문화체험박물관

❍ 사 업 비 : 1,100백만원

❍ 사 업 량 : 2층 증축(A=406.35㎡)

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4년)

□ 그 동안 추진실적

❍ ‘19. 11. : 장애인 편의시설 등 착공(완료 ‘20. 01.)

❍ ‘20. 02. : 박물관 증축구간 정밀안전진단 용역착수(완료 ‘20. 04.)

❍ ‘20. 06. : 보강설계용역 착수(완료 ‘20. 07.)

□ 하반기 추진 계획

❍ ‘20. 08. : 보강공사 착공(완료 ‘20. 09.)

❍ ‘20. 11. : 전시물 제작설치 및 전기·통신·소방공사 완료

❍ ‘20. 12. : 증축 전시실 개관