환경보호과

					목 차

▢ 2020년 상반기 운영성과와 방향	… …	9
▢ 2020년 주요업무 추진현황	… …	10
1. 정산농공단지 환경기초시설 확충
2. 환경법령 법정계획 수립
3. 청정청양 희귀야생식물 보전사업
4. 생태놀이터 조성사업
5. 야생동물 피해 사전예방 및 지원
6. 환경오염원 관리 강화
7. 대기오염물질(미세먼지 등) 저감 및 관리
8. 재활용품 배출 및 수거환경 개선사업
9. 지방상수도 현대화사업
10. 농어촌생활용수 개발사업
11. 소규모수도시설 개량사업
12. 지방상수도 배수관로 확장사업
13. 하수도 정비기본계획(변경) 수립
14. 농촌마을 하수도 정비사업
15. 청양공공하수처리장 확충사업
16. 공공하수처리시설 기술진단
17. 청양군 생활폐기물 소각시설 설치사업

2020년 상반기 운영성과와 방향

□ 상반기에는

○ 환경법령 법정 세부시행 계획 수립 추진

- 환경보전계획·기후변화 적응대책 세부시행계획· 수질오염총량관리        4단계 시행계획·공공폐수시설 기술진단 용역 실시

○ 청정청양 희귀야생식물 보전사업 마무리

- 멸종·희귀야생식물 13종 14,680주 식재, 부대시설 설치 완료

○ ASF 조기종식 및 농작물 피햬 예방을 위한 멧돼지 포획 매진

- 야생동물 포획포상금제 연중 운영 및 피해방지단 증원, 피해예방시설 지원

○ 환경오염원 관리를 위한 환경지도 강화

- 배출사업장(155개소)지도 단속, 상습 악취 민원 사업장 자동 포집기 설치

○ 깨끗한 환경조성을 위한 환경개선사업 추진

- 클린하우스 확대 설치 및 페트병 별도 배출시범사업 실시

○ 안전하고 안정적 물 공급을 위한 상수도사업 지속 추진

- 상수도현대화 · 생활용수개발 · 소규모수도시설 개량사업 추진

○ 수질오염 예방과 주민생활여건 개선사업 추진

- 하수도정비 기본계획(변경), 하수도정비·공공하수처리장 확충 사업

□ 하반기에도

○ 기후변화 대응 및 생태환경 보존 활동 추진

○ 상하수도 각종 사업 추진을 통한 안정적 물공급 및        정주환경 개선

○ 폐기물 처리 제도개선 및 시설 확충을 통한 깨끗한        청양 만들기 지속 추진

1		정산농공단지 환경기초시설 확충

◈ 정산농공단지 생산량 증가에 따른 폐수량 및 오염농도 증가로 폐수처리 용량 증설과 시설개선

◈ 화재등 사고 시 유출되는 오염물질에 의한 2차 오염사고  예방을 위한 완충저류시설 확충

□ 개 요

구 분	정산공공폐수처리시설 증설 및 개량	정산농공단지 완충저류시설 설치
위 치	정산공공폐수처리장내	정산공공폐수처리장 부근
사 업 량	증설 400㎥/일(800⇒1,200)	800㎥
사 업 비	6,700백만원 (국비 5,700 원인자 1,000)	4,368백만원 (국비 3,058 군비 1,310)
사업기간	2017. 01. ~ 2021. 12.	2018. 01. ~ 2021. 12.

□ 그 동안 추진실적

[정산공공폐수처리시설 증설 및 개량]

❍ 2016. 05. 기본계획 변경승인

❍ 2017. 04. 기본 및 실시설계 착수

❍ 2018. 11. 기본 및 실시설계 검토요청

❍ 2019. 02. 기본 및 실시설계 보완 제출

❍ 2020. 04. 개량사업에 대한 국비 지원 건의(금강유역환경청)

❍ 2020. 05. 건의에 따른 회신(개량에 대한 국비지원 불가)

정산농공단지 개발 및 실시계획 변경 용역 착수

❍ 2020. 06. 제안서 변경 요청

[정산농공단지 완충저류시설 설치]

❍ 2017. 02. 설치운영계획 기술검토 및 승인

❍ 2018. 06. 기본 및 실시설계 착수

❍ 2019. 04. 기본 및 실시설계 검토요청

❍ 2019. 10. 보완에 따른 설계안정성 및 소규모 지하안전영향평가용역 착수

❍ 2020. 05. 보완 완료에 따른 검토의뢰

❍ 2020. 06. 2차 보완 요청 및 설치‧운영계획(변경) 협의

□ 하반기 추진계획

[정산공공폐수처리시설 증설 및 개량]

○ 2020. 07. 기본 및 실시설계 변경 추진

○ 2020. 12. 공사 발주

[정산농공단지 완충저류시설 설치]

○ 2020. 07. 기본 및 실시설계 보완 회신

○ 2020. 09. 공사 발주

2		환경법령 법정계획 수립

【1】환경보전종합계획

◈ 3차 환경보전종합계획 2020년 만료로 우리군 환경 정책에

대한 비젼과 방향제시를 위한 4차 기본계획 수립

□ 개요

❍ 근거법령 : 환경정책기본법

❍ 수립주기 : 5년

❍ 사 업 비 : 70백만원(군비)

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 03. 환경보전계획 용역 발주 의뢰

❍ 2020. 04. 환경보전계획 용역 착수

❍ 2020. 06. 환경보전 인식 설문조사 실시

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 12. 최종 보고회 및 용역완료

【2】기후변화적응대책 세부시행계획

◈ 기후변화에 대한 부문별 영향 및 취약성 평가 후 적응대책

세부시행계획을 수립

□ 개요

❍ 근거법령 : 저탄소 녹색성장 기본법

❍ 수립주기 : 5년

❍ 사 업 비 : 70백만원(군비)

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 02. 제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 연구

용역 착수

❍ 2020. 05. 기후변화 인식 설문조사 실시

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 09. 용역보고서 환경부 승인요청

❍ 2020. 10. 최종 보고회 및 용역완료

【3】금강수계 수질오염총량관리 4단계 시행계획

◈ 최근 3년 금강본류 I, J 단위유역 목표수질(BOD 2.9, T-P 0.084) 초과로 향후 10년간 오염물질총량을 관리하기 위한 시행계획 수립

□ 개요

❍ 근거법령 : 금강수계 물관리 및 주민지원에 관한 법률

❍ 수립주기 : 10년(3단계까지는 5년마다 수립)

❍ 사 업 비 : 65백만원(기금 55, 군비 10)

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 04. 제4단계 청양군 수질오염총량관리 시행계획 연구

용역 발주 의뢰

❍ 2020. 05. 제안서 평가

❍ 2020. 06. 시행계획 착수

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 09. 시행계획 승인 신청

❍ 2020. 12. 최종보고회 및 용역완료

3		청정청양 희귀야생식물 보전사업

◈ 멸종위기 및 희귀야생식물 서식지 조성으로 특색 있는        관광자원화 및 청정청양 친환경 이미지제고

□ 개 요

❍ 위    치 : 청양군 대치면 광대리 316-20 외 2필지 4,120㎡

❍ 사 업 비 : 820백만원(도비 400, 군비 420)

- 공 사 비 : 800백만원(도비 400, 군비 400)

- 사후관리 : 20백만원(군비)

❍ 사업량

- 식재공사 : 섬개야광나무 외 12종 14,680주, 식재기반조성 1,200㎡

- 시설물공사 : 평의자 9EA, 데크로드 130m, 시설안내판 등

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년)

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 03. 생육환경 기반조성 및 식재 공사 착공

❍ 2020. 05. 공원사업시행변경 허가(CCTV, 관람로 보완 등)

기반조성 공사 90%, 식재공사 100%

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 06. 보안시설 설치(CCTV) 6대, 시설 안내판 설치

❍ 2020. 06. 희귀야생식물 보전사업 준공

❍ 2020. 06. ~ 12. 서식지 관리 및 모니터링 실시

4		생태놀이터 조성사업

◈ 노후화 되고 획일화된 어린이 공원을 정비하여 도심 내      생태놀이터 공간 창출

□ 개 요

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 읍내리 184-11(제2어린이공원), 1,496㎡

❍ 사 업 비 : 233백만원(도비 151.5 군비 81.5)

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.(1년)

❍ 사업량

- 놀이시설 : 짚라인, 통나무평균대, 언덕미끄럼틀, 모래놀이장 등 9종

- 생태놀이터 환경 조성 : 포장(마사토, 모래, 판석 등), 초화류 식재, 우물펌프 등

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 02. 생태놀이터 조성사업 계획수립

❍ 2020. 03. 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 계약

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 07. 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 완료

❍ 2020. 08. 공사 계약

❍ 2020. 11. 생태놀이터 조성 공사 완료

❍ 2020. 12. 사후관리

5		야생동물 피해 사전예방 및 지원

◈ 야생동물 피해에 대한 다각적 예방 및 피해보상금 지원으로       안정적인 영농생활 보장 및 농가손실 최소화

□ 개   요

❍ 기    간 : 2020. 01. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 317백만원

❍ 내    용 : 야생동물에 의한 피해예방 및 사후지원(5개사업)

□ 그동안 추진현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	추 진 실 적
	예산액	집행액	실 적	비 고
계	317	184
피해예방시설설치 지원	80 (국 19, 도 9.5, 군 51.5)	15	-지원농가 : 37농가 (태양광울타리 7, 철망 울타리 22, 경광등 7, 조류 퇴치기1)	보 조 60% 자부담40% ※ 1차추경 45백만원
야생동물 폐사체처리	28 (군 28)	28	- 처리건수 296건 (고라니 143, 고양이 105, 기타 48)	야생생물 관리협회
농작물피해 보상금지원	24 (도 2, 군 22)	4	-피해보상 : 6농가 (남양 2, 비봉 1, 청양 1, 장평 1, 대치 1)
유해야생동물 피해방지단운영	35 (군 35)	35	- 영농시기, 피해특성, 구제실적 등 고려 탄력적 운영	출동 72건
유해야생동물 포획포상금지급	150 (군 150)	102	- 총4,246 (멧돼지 175, 고라니 2,593, 까치, 비둘기 1,478)

□ 하반기 추진계획

❍ 농작물 피해보상금 적기 지원으로 농가소득 안정화

❍ 유해야생동물 포획단 지속전개 및 포획포상금 제도 운영

6		환경오염원 관리 강화

【1】 환경오염물질 배출사업장 관리강화

◈ 주요 오염물질 발생사업장 지도·점검을 통한 환경오염

행위 사전예방 및 적법 조치로 반복행위 근절

□ 개 요

구 분	합 계	대기·폐수	가축분뇨
개소수	822	77	745

□ 그 동안 추진실적

❍ 상반기 코로나19로 정기점검 등 미실시, 민원발생업소 점검

(단위: 개소)

점검업소	위반업소	행 정 처 분				사법조치
		합계	경고 등	개선명령	조업정지
5	5	5	1	3	1	4

□ 하반기 추진계획

❍ 코로나19 발생 상황에 따라 정기점검 실시

❍ 환경오염사고 및 민원발생 사업장 위주 중점 점검실시

【2】 악취발생 사업장 관리강화

◈ 실시간 악취감시 및 포집 시스템 구축을 통한 악취배출 사업장 관리 강화

□ 개 요

❍ 악취 자동포집기 5개소 설치

❍ 사 업 비 : 100백만원(군비)

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 5. : 악취 자동포집기 5개소 설치완료

- 설치장소

구 분	소 재 지	비 고
정산농공단지	정산면 역촌리 675-6
청청(지렁이 농장)	운곡면 모곡리 823	폐기물재활용
장평 화산리 돈사	장평면 화산리 33
청심산업	화성면 화암리 82-8	폐기물재활용
비봉농공단지	비봉면 방한리 993

❍ 2020. 6. : 자동포집기 교정검사 실시

□ 하반기 추진계획

❍ 악취 자동포집기 상시 운영

❍ 기준초과 시 자동포집 후, 도 보건환경연구원 검사의뢰 및

결과에 따라 조치

7		대기오염물질(미세먼지 등) 저감 및 관리

◈ 자동차·사업장 대기오염물질 저감 및 미세먼지 알림판 설치 등을 통한 대기환경 개선

□ 개 요

❍ 미세먼지 등 대기오염물질 저감 및 관리를 위한 17개 사업 추진

❍ 총 사업비 : 2,139백만원(※ 보조비율은 사업별 상이)

□ 그 동안 추진실적

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비	집 행 액	비고
합 계	17개	2,139	531
자동차 배출가스 저감	노후경유차 조기폐차 지원 등 5개 사업 추진	572	275
친환경 자동차 보급	전기자동차 보급 등 4개 사업 추진	821	256
사업장 대기오염물질 저감	소규모 사업장 방지시설 설치지원 등 2개 사업 추진	572	-	소규모 사업장 방지시설 설치지원 추진중(4개소)
미세먼지 배출감시	미세먼지 불법 배출원 감시지원 등 2개 사업 추진	96	41	미세먼지 감시원 읍·면별 1명 배치운영
기타 미세먼지 저감 및 관리	미세먼지 알림판 설치 등 4개 사업 추진	78	-	미세먼지 신호등 2개 추가 확보 측정기 및 신호등 연동형으로 추진중

□ 하반기 추진계획

❍ 대기오염물질 저감사업 지속 추진

8		재활용품 배출 및 수거환경 개선사업

◈ 재활용품 분리배출·수거할 수 있는 클린하우스 설치로 재활용품의 처리효율 향상 및 청소근로자 근무환경 개선

◈  무색페트병을 별도 배출하여 재활용율 향상 도모

□ 개 요

❍ 클린하우스 확대 설치사업

- 사업대상지 : 대치면 등 7개 읍·면(9개소)

- 사업비 : 90,000천원

- 내  용 : 클린하우스, 분리수거함, 악취저감장치 등 설치

❍ 페트병 별도 배출 시범사업 실시

- 사업대상 : 공동주택(아파트) 약 15개소

- 사업비 : 23,000천원

- 내  용 : 무색페트병 별도 배출·수거를 위한 시범사업 추진

□ 그 동안 추진실적

❍ 클린하우스 확대 설치사업

- 2020. 2.  설치 대상지 선정(9개소) 및 읍·면 예산배정

- 2020. 5.  비봉면 등 4개소 설치 완료

- 2020. 6.  클린하우스 설시사업 완료(9개소)

❍ 페트병 별도 배출 시범사업 실시

- 2020. 2.  무색페트병 별도배출 홍보

- 2020. 6.  전용수거봉투 제작 및 배부

□ 하반기 추진계획

❍ 클린하우스, 아파트 내 수거함 설치

❍ 재활용품 분리배출 홍보 및 클린하우스 유지관리

❍ ‘21년 무색페트병 분리배출 의무화에 따른 수거 및 배출 체계 구축

9		지방상수도 현대화사업

◈ 노후상수도 개량을 통한 관망정비 및 유수율 제고로

안정적 수돗물 공급 및 수질관리

□ 개 요

❍ 위    치 : 지방상수도 현대화사업

❍ 사 업 량 : 노후관로 34.53㎞ 교체, 블록구축(소블럭) 15개소,

유지관리 시스템 및 원격검침 시스템 1식

❍ 사 업 비 : 16,700백만원 (2020년 사업비 1,958백만원)

❍ 사업기간 : 2020. 01. ∼ 2024. 12.

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 03. : 사업 착수 및 보조금 1,958백만원 교부(현대화사업단)
❍ 2020. 04. :  사업구역 등 시설물 현황조사 착수

❍ 2020. 06. : 기본 및 실시설계 및 누수탐사용역 발주

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 07. : 실시설계 및 정산지역 누수탐사용역 착수

❍ 2020. 12. : 사전기술 검토 협의(환경부)

- 사전기술 협의를 통해 총사업비 확정

10		농어촌생활용수 개발사업

◈ 면단위 농촌지역에 양질의 광역상수도 공급을 위한

기반시설 확충으로 안전하고 깨끗한 생활환경 도모

□ 개 요

❍ 전체분

사업명	위치	사업량	사 업 비(백만원)				사 업 기 간	비 고
			계	기확보	‘20년	‘20이후
계		2 지구	60,579	23,871	8,089	28,619
남 양 지 구	남양일원	배수관로 L= 88.2㎞ 1,261가구	37,563	13,719	2,142	21,702	2012.01. ∼ 2022.12.	공정률 35.4%
정 산 지 구	정산일원	배수관로 L=28.7㎞ 459가구	23,016	10,152	5,947	6,917	2015.01. ∼ 2022.12.	공정률 43.3%

❍ 2020년도분

사업명	위치	사 업 량	사업구역	사업비 (백만원)	사 업 기 간
계		2 지구		8,089
남 양 지 구	남양일원	관로매설(D20~150) L= 9.29km 급수 302가구	온직2,3리,금정2리 대봉2리	2,142	2020. 02.∼ 12.
정 산 지 구	정산일원	소 계	송학리,해남리, 용두리,천장리	5,947	2020. 03 .∼ 12.
		관로매설(D20~300) L= 24.46km 급수 216가구		4,576
		공주 신풍지구 원인자 부담금		1,371

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 02. : 남양지구 및 정산지구 사업(20년분) 착공

❍ 2020. 06.

- 남양지구 : (공정율 39%) 남양면 금정2리,대봉2리,온직2,3리 추진 중

- 정산지구 : (공정율 48% ) 정산면 송학리,해남리,용두리 추진 중

신풍-청양 간 광역상수도 통수

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 11. : 남양,정산지구 20년도분 사업준공 및 급수

- 급수가구 : 528가구(남양 312가구, 정산 216가구)

11		소규모수도시설 개량사업

◈ 노후화 된 소규모 수도시설개량을 통한 양질의 상수도        공급으로 주민생활여건 개선

□ 개 요

❍ 위    치 : 청남면 천내1리, 장평면 도림리

❍ 공 사 량 : 관로(D20~90) L= 8.3㎞ 매설, 급수가구 70가구

- 천내1리 56가구, 도림리 14가구

❍ 공 사 비 : 총596백만원 (도비 417, 군비 179)

❍ 공사기간 : 2020.  3. ∼ 2020. 11.

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 03. : 청남면 천내1리 공사 착공

❍ 2020. 06. : 천내1리 공정률 80%, 도림리 공정률 10%

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 07. : 천내1리 공사 완료

❍ 2020. 10. : 도림리 공사 완료

12		지방상수도 배수관로 확장사업

◈ 면단위 농촌지역에 양질의 광역상수도 공급을 위한

기반시설 확충으로 안전하고 깨끗한 생활환경 도모

□ 개 요

❍ 위    치 : 청양읍 학당리(안부동, 곱두실), 백천리, 대치면 주정리

❍ 공 사 량 : 관로매설(D20~90) L= 14.39km, 가정급수 145가구

❍ 공 사 비 : 1,335백만원 (도비 800, 군비 535)

❍ 공사기간 : 2020.  1. ∼ 2020. 11.

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 03. : 청양읍 백천리 광역상수도 확장공사 착공

❍ 2020. 06.

- 청양읍 백천리 : 공정률 80%

- 청양읍 학당리(안부동, 곱두실) : 공정률 20%

- 대치면 주정1리 : 공정률 5%

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 06. : 주정리 상수도확장공사 착공

❍ 2020. 09. : 청양읍 백천리, 학당리(안부동, 곱두실)공사 완료

❍ 2020. 11. : 대치면 주정리 공사 완료

13		하수도 정비기본계획(변경) 수립

◈ 상위 계획상의 지표, 시가화 지역 확장 등에 의한 기존 하수도      정비 기본계획(변경 2015.06.)의 재검토 및 보완

◈ 하수도정비 기본계획과 연계하여 물 재이용 관리계획 수립

□ 개 요

❍ 용 역 량 : 배수구역 479.22㎢

처리구역 12.893㎢(공공 4,793㎢ 소규모 8,100㎢)

❍ 용 역 비 : 1,195백만원(군비)

❍ 용역기간 : 2019. 08. ~ 2020. 08.(1년간)

❍ 내    용 : 관로, 하수처리시설, 하수 처리수 재이용, 재정계획

등에 대한 검토

□ 그 동안 추진실적

❍ 2019. 08. : 용역착수

❍ 2020. 02. : 공정보고

❍ 2020. 06. : 중간보고회

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 07. : 하수처리구역 및 용량 협의(환경부)

❍ 2020. 08. : 하수도정비 기본계획승인 신청(환경부)

14		농촌마을 하수도 정비사업

◈ 집단거주지역 하수처리시설 및 하수관로 정비로 수질오      염 방지 및 주민 생활환경 개선

□ 개 요

사업명	위치	사 업 량	사 업 비 (백만원)				사 업 기 간	비고
			계	기확보	‘20	‘21이후
계		4개소	15,916	1,428	794	13,672
녹평 지구	비봉	처리시설 55㎥/일 하수관로 L=2.8km	2,488	-	314	2,174	2020~2022	신규 국70,지30
광암 지구	운곡	처리시설 75㎥/일 하수관로 L=4.1km	5,180	-	314	4,844	2020~2022	신규 국70,지30
영양 지구	운곡	처리시설 25㎥/일 하수관로 L=0.7km	2,700	1,000	-	1,700	2019~2021	계속 도50,군50
천장 지구	정산	처리시설 80㎥/일 하수관로 L=2.9km	5,548	428	166	4,954	2019~2021	계속 국70,지30

□ 그 동안 추진실적

[계속지구] - 영양 및 천장지구

❍ 2019. 11. : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2020. 03. : 천장지구 재원협의( 3,740→5,548 증1,808백만원)

❍ 2020. 05. : 영양지구 일상감사 및 계약심사 완료

❍ 2020. 06. : 천장지구 사업발주

[신규지구] - 녹평1 및 광암지구

❍ 2020. 03. : 녹평1지구 설계용역 일상감사, 계약심사

❍ 2020. 06. : 광암지구 실시설계 용역 착수

□ 하반기 추진계획

[신규지구] - 녹평1 및 광암지구

❍ 2020. 08. :  녹평1지구 실시설계용역 착수

[계속지구] - 영양 및 천장지구

❍ 2020. 07. : 천장지구 사업착공

❍ 2020. 08. : 영양지구 사업착공

15		청양공공하수처리장 확충사업

◈ 하수처리시설 증설 및 총인처리시설 설치로 처리장 운영

효율 개선 및 수질보전으로 주민생활여건 개선

□ 개 요

사업명	위치	사 업 량	사 업 비 (백만원)				사 업 기 간	비고
			계	기확보	‘20	‘21이후
계		2개소	8,040	6,040	0	2,000
증설 및 총인처리 시설	청 양 하 수 처리장	600㎥/일 (3,200 ⇒ 3,800)	5,040	5,040	-	-	2016 ∼2020 (완료)	국50% 도25% 군25%
증설	청 양 하 수 처리장	300㎥/일 (3,800 ⇒ 4,100)	3,000	1,000	-	2,000	2019 ∼2021	군100% 공공임대주택연계

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 04. : 600톤 증설 완료 및 가동개시 공고

❍ 2020. 05. : 300톤 증설사업 일상감사 및 계약심사

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 07. : 300톤 증설사업 인가

❍ 2020. 07. : 사업 착공

❍ 2021. 12. : 사업 준공

16		공공하수처리시설 기술진단

◈ 시설의 수명연장 및 처리효율 증대를 위한 운영방법 개선과

관로 정밀조사를 통한 노후관로정비 토대 마련

□ 개 요

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비 (백만원)	사업기간	비고
계		3개소	692.5
하수처리 기술진단	대치면 작천리	처리장 기술진단 60㎥/일	10.5	2020 (완료)	군100%
기술진단 개선사업	청양군 일원	청양처리장외 5개소	538	2020	군100%
노후관 정밀조사	청양읍 일원	노후관 정밀조사 30.0km	144	2020	균50% 군50%

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 04. : 기술진단개선사업 실시설계 완료

❍ 2020. 05. : 기술진단 개선사업 일상감사 및 계약심사

❍ 2020. 06 : 작천지구 기술진단용역 완료

❍ 2020. 06. : 기술진단개선사업 착공

❍ 2020. 06 : 노후관로 정밀조사용역 일상감사 및 계약심사

□ 하반기 추진계획

❍ 2020. 10 : 기술진단개선사업 완료

❍ 2021. 02 : 노후관로 정밀조사용역 완료

17		청양군 생활폐기물 소각시설 설치사업

◈ 現 소각시설(15톤/일) 내구연한 도래 및 처리용량 부족에

따른 신규시설 설치 필요

□ 개   요

❍ 총사업비 : 12,159백만원(국비3,648, 도비851, 군비7,660)

- 사업비(’20년) : 1,000백만원(국비300, 도비70, 군비630)

❍ 사 업 량 : 25톤/일 (現 15톤/일)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

❍ 사업방식 : 한국환경공단 위·수탁 추진(협약일 : ’19.12.23.)

□ 그 동안 추진실적

❍ 2020. 02. : 소각시설 설치사업 위탁사업비(1차) 지급

- 사업비(’20년) : 1,000백만원(한국환경공단)

❍ 2020. 03. : 기본 및 실시설계 통합 발주 심의(“적격” 판정)

- 한국환경공단 기술자문위원회, 6개월 단축(예상)

❍ 2020. 03. : 국고지원 예산 신청(2차)【사업비 : 22억원】

❍ 2020. 04. : 기본 및 실시설계 발주계획(안) 검토

❍ 2020. 05. : 친환경 에너지타운 조성사업 공모 신청

❍ 2020. 06. : 기본 및 실시설계 발주 공고

□ 하반기 추진계획

❍ 기본· 실시설계용역 착수 및 인·허가 수행

❍ 친환경 에너지타운 조성사업 등 주민지원 사업 추진