건설도시과

					목 차

□ 일반현황
□ 2022년 건설도시과 운영방향
□ 2022년 주요업무 추진계획
1. 지역안전 확보를 위한 가로등 및 보안등 관리
2. 도로확·포장 및 유지관리사업
3. 금강수원 활용 시설하우스 정화공급사업
4. 농업기반조성사업
5. 도시개발사업
6. 도시재생사업
7. 지역균형개발사업
8. 청양군 간판개선사업
9. 농촌주거환경개선사업
10. 공공임대주택 건립 추진
11. 맞춤형 주거급여 지원사업
12. 공공건축사업 추진
❖ 타 기관 사업 추진 현황

일 반 현 황

□ 조직현황

							건설도시과장
							시설사무관 한성희
건설행정 팀장			도로 팀장			농촌기반팀장			도시재생팀장			지역개발팀장			주택 팀장			공공건축팀장
행6 김성수			시6 양용규			시6 이순형			시6 강정모			시6 조성환			시6 김원겸			시6 이재연
운6 한일희 시7 최유정 행7 윤미영 공8 김요섭 공무 박채은			운6 서광모 기6 최성필 시7 최수찬 시8 손명섭 시8 김성태			시6 최종선 시8 임소라			시7 전정용 시8 김지원 시9 제성현 행9 김기수			시8 정미선 시8 노은수 청경 김태훈 공무 남광우			사7 박혜리 시9 한상천			시7 방진일 시9 김인규

□ 직급별 정ㆍ현원 현황

구 분	계	일 반 직						별정직	전문경력관	비고
		소계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	28	28	1	9	9	4	5	-	-
현 원	29	29	1	11	6	7	4	-	-
증 감	1	1	-	2	△3	3	△1	-	-

※ 기타 13명(청원경찰 1명, 공무직 12명)

□ 팀별 업무분장

팀 별	분 장 업 무	비 고
건설행정	❍ 과 서무·회계 ❍ 국·공유재산 관리 ❍ 건설기계·전문건설업·골재채취허가 관리 ❍ 지하안전관리 업무 ❍ 가로등관리
도로	❍ 군도 및 농어촌도로 유지 관리 ❍ 고속, 국·지방 도로 관련 민원 업무 ❍ 도로 관련 인허가 관리 ❍ 위험도로 및 위험교량 관리 ❍ 어린이 및 노인보호구역 관리
농촌기반	❍ 한발대비용수개발사업 ❍ 기계화경작로확포장사업 ❍ 수리시설개보수사업 ❍ 금강수원 정화 공급사업
도시재생	❍ 도시개발 및 도시재생사업 ❍ 군관리계획 수립 업무 ❍ 도시계획정보시스템(UPIS) 관리 ❍ 개발행위 인․허가 업무 ❍ 도시계획도로 유지관리 업무
지역개발	❍ 소규모 지역개발 및 마을시설물 관리 업무 ❍ 균형발전사업 및 정주환경개선사업 추진 ❍ 옥외광고물 인·허가 및 관리 업무
주택	❍ 주거종합계획 수립 및 공동주택 관리 ❍ 주택건설사업계획승인 및 사용검사 ❍ 농촌주거환경개선사업 추진 ❍ 주거복지 및 임대사업자 등록 관리
공공건축	❍ 공공건축사업 건축계획 수립 지원 ❍ 공공건축사업 설계용역 및 공사감독 지원 ❍ 공공건축사업 검사(준공,기성,하자) 업무 지원 ❍ 공공건축 디자인 자문단 운영

2022년 건설도시과 운영방향

□ 업무여건

❍ 대통령 선거 및 지방선거에 따른 다양한 주민 민원폭주 예상

❍ 코로나19 장기화에 따른 지역경제 위축 및 건설경기 침체

- 지역경제 활성화를 위한 다양한 대응 요구

❍ 기후변화에 대응하는 다목적 농촌용수개발 등 농업기반시설 마련

❍ 스마트시대에 부응하는 다양한 콘텐츠 발굴

- 도시재생 뉴딜사업, 간판개선사업, 스마트복합쉼터 등

❍ 각종 공모사업 확보에 따른 공공건축분야 중추적 역할 증대

- 가족문화센터 및 평생학습관, 정산다목적복지관 등

□ 중점추진방향

❍ 지역건설산업 활성화 제고를 위한 방안 모색

❍ 신속한 도로 정비 및 체계적인 도로망 구축

❍ 안정적인 농업용수 공급으로 영농환경 개선

❍ 도시재생 활성화 및 도시경쟁력 제고로 살기좋은 도시조성

❍ 지역에 활력을 불어넣을 맞춤형 지역개발사업 적극 추진

❍ 공공임대주택건립 등 주거환경개선으로 정주여건 개선

❍ 지역의 특성과 주변경관을 고려한 내실있는 공공건축 추진

1		지역안전 확보를 위한 가로등 및 보안등 관리

◈ 가로등(보안등)의 선제적 대응과 신속한 정비로 주민불편 해소

◈ 노후 보안등 LED 교체로 전기료 절감 및 에너지 효율성 증대

□ 현   황

❍ 가로등 및 보안등 현황                            (단위 : 등)

구분	계	청양	운곡	대치	정산	목	청남	장평	남양	화성	비봉
계	7,749	1,442	582	959	1,068	551	506	600	788	550	703
보안	6,841	1,258	582	681	879	424	506	600	788	550	573
가로	908	184	-	278	189	127	-	-	-	-	130

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	위치	사업량	사 업 비	사업기간	비고
계			285
신규가로등 설치	관내	160등	80	‘22.01.∼12.
농작물피해가로등 교체	관내	30등	15	‘22.01.∼12.
노후가로등 교체	관내	100등	50	‘22.01.∼12.
보안등 LED 교체사업	화성, 목면	700등	140	‘22.01.∼12.

※ 한국전기안전공사 부적합 가로등 조기 개수 : ‘22년 1회 추경 반영(2억)

□ 기대효과

❍ 주민들의 야간통행 불편 해소 및 사고예방

❍ 가로등 민원에 대한 신속한 대응으로 행정의 신뢰성 확보

2		도로확‧포장 및 유지관리 사업

◈ 도로 확·포장사업으로 교통사고 예방과 주민편익 증진

◈ 교통약자를 위한 안전시설물을 설치하여 보행불편해소

【1】 군도 및 농어촌도로 정비사업

사 업 명	위치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘22년	‘23년이후
계		6개 사업	16,750	4,560	3,500	8,690
소계(군도)		2개 사업	5,200	-	500	4,700
백곡리 군도9호 도로확포장	정산면 백곡리	L=2,000m, B=8.5m	4,800	-	100	4,700	‘22.01.∼ ‘24.12.	실 시 설계중
회전교차로 설치사업	비봉면 용천리	회전교차로 1개소	400	-	400	-	‘22.01.∼ ‘22.10.	-
소계(농어촌도)		4개 사업	11,550	4,560	3,000	3,990
매산리~군량리 면도 102호 도로확포장	화성면 매산리,청양읍 군량리	L=3,400m, B=8.5m	5,500	2,310	600	2,590	‘21.09.∼ ‘24.09.	5%
신정리 리도 201호 도로확포장	화성면 신정리	L=1,300m, B=8.5m	3,000	1,500	1,500	-	‘21.08.∼ ‘23.08.	40%
청수리 리도 201호 도로확포장	청양읍 청수리	L=1,200m B=6.5m	1,550	750	800	-	‘21.03.∼ ‘22.12.	50%
적누리 리도 205호 도로확포장	청양읍 적누리	L=1,100m B=6.5m	1,500	-	100	1,400	‘22.01.∼ ‘24.12.	실 시 설계중

【2】 군도 및 농어촌도로 유지관리 사업

사업명	위치	사업량	사 업 비(백만원)			사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘22년
계		2개 사업	2,255	0	2,255
군도정비	군내일원 (군도)	아스콘 덧씌우기 도로시설물 보수	1,453	-	1,453	‘22.01.∼ ‘22.12.	-
농어촌 도로정비	군내일원 (농어촌도로)	아스콘 덧씌우기, 도로시설물 보수	802	-	802	‘22.01.∼ ‘22.12.	-

□ 추진계획

군도 정비사업		․2022. 01. : 실시설계용역 발주 (아스콘 덧씌우기, 교량 보수보강, 호우피해복구 등) 상반기 시설물 안전점검 및 내진성능평가 발주 ․2022. 03. : 실시설계 완료 및 공사 착공 ․2022. 06. : 공사준공 ․2022. 07. : 하반기 시설물 안전점검 발주
농어촌도로 정비사업		․2022. 01. : 실시설계용역 발주(아스콘 덧씌우기, 정비사업 등) ․2022. 03. : 용역 완료 및 공사 발주 ․2022. 06. : 공사 준공

【3】 어린이 및 노인보호구역 정비사업

사업명	위치	사업량	사 업 비 (백만원)	사업 기간	비 고
보호구역 유지관리	군내일원	유지관리 1식	168	‘22.01. ~ ‘22.12.

□ 추진계획

어린이 및 노인보호구역 정비사업		․2022. 01. : 실시설계용역 발주 ․2022. 03. : 실시설계용역 완료 및 공사 발주예정 ․2022. 06. : 공사 준공예정

【4】 충남소방복합시설기반조성사업

사업명	위치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율
			계	기 투자	‘22년	‘23년이후
충남소방복합시설 기반조성사업	비봉면 록평리	1식	6,800	2,300	1,500	3,000	‘19.05. ∼ ‘24.03.	25%

□ 추진계획

충남소방 복합시설 기반조성사업		․2019. 05. : 실시설계 용역 착수 ․2021. 06. : 실시설계 용역 완료 ․2021. 10. : 공사 착공 ․2024. 04. : 공사 준공

3		금강수원 활용 시설하우스 정화공급사업

◈ 금강변 일원 시설영농구역에서 생산되는 농작물의 품질을 향상     시키기 위한 청정 용수 공급

□ 개   요

❍ 위    치 : 청남면, 장평면 일원 (대상면적 : 845ha)

❍ 사 업 량 : 양수장 1개소, 가압장 및 정수시설 1식, 용수관로 L=57.2km

❍ 사업내용 : 기본조사 및 실시설계, 정수시설 및 관로 설치공사 등

❍ 총사업비 : 37,700백만원(1차 19,000, 2차 18,700)

❍ 공사기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)

□ 추진실적 및 계획

❍ 2019년 : 주민설명회(3회) 개최, 예비타당성 조사 완료

❍ 2020년 : 기본계획수립·전략환경영향용역 착수, 선진지 견학, 금강홍수통제소 하천수 사용허가 협의

❍ 2021년 : 중앙부처 협의(4회), 기본계획수립·전략환경영향용역 완료

❍ 2022. 03. : 세부설계수립 및 소규모환경영향평가 완료

❍ 2022. 05. : 토지매입(정수장 부지)

❍ 2022. 06. : 사업 착공

❍ 2024. 02. : 사업 완료(1차)

□ 기대효과

❍ 맑은 물 공급으로 수경․양액재배 확대 및 안전한 먹거리 생산

→ 농가소득 증대 및 귀농인구 유입 기여

4		농업기반조성사업

◈ 농업기계화 영농기반을 조성하여 선진과학농업 실현 및

『활력 있는 농업기반』구축

□ 추진방향

❍ 생활환경, 생활기반 및 편익시설․복지시설 등을 종합적으로      정비하고 확충하여 농업인의 복지향상에 기여

□ 추진계획

❍ 사업개요                                     (단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비	비 고
계		5개 사업	5,206
농업기반시설관리	군내일원	1식	335	양·배수장 유지관리비 지하수 영양조사 저수지 정기점검용역
한발대비 용수개발	군내일원	1식	927	둠벙, 집수정, 저수지 수위측정기
대구획 경지정리	송방리	57ha	600	계속비사업 (총사업비 2,000)
기계화경작로확․포장	군내일원	7km, 26개소	900	경작로 및 교행차로 포장,
수리시설개보수사업	군내일원	16km, 60개소	2,444	용․배수로정비, 청남지구 등

❍ 추진계획

- 2022. 01. ～ 03. : 실시설계용역

- 2022. 03. ～ 12. : 사업시행 및 완료

□ 기대효과

❍ 농업기반 시설 확장․보강하여 안정적인 영농생산기반 조성

5		도시개발사업

◈ 청정 청양의 이미지 조성과 도시가로망정비 등 주거환경을

개선하여 주민생활편익 도모

□ 개   요

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘21년	‘22년
계	3개소		9,250	5,850	600	2,800
주공아파트∼구국도 29호간 도로개설	청양읍 송방리	L=545m B=25m	7,650	5,850	-	1,800	‘19.08.∼ ‘22.08.	55
정산도서관 앞 도로개설	정산면 서정리	L=140m B=8m	600	-	600	-	‘21.01.∼ ‘22.08.	20
정산면 서정리 진입도로 개설사업	정산면 서정리	L=500m B=6∼8m	1,000	-	-	1,000	‘21.06.∼ ‘23.12.

□ 추진실적 및 계획

주공아파트∼ 구국도29호간 도로 개설사업		․2020. 08. : 1차분 공사 착공(장기계속계약 이행) ․2021. 11. : 1차분 공사 준공 ․2022. 03. : 2차분 공사 착공 ․2022. 08. : 2차분 공사 준공
정산도서관 앞 도로개설사업		․2022. 02. : 미협의 토지보상 완료 ․2022. 03. : 공사 재착공 ․2022. 08. : 공사 준공
정산면 서정리 진입도로 개설사업		․2021. 12. : 실시설계용역 완료 ․2022. 08. : 토지보상 완료 ․2022. 10. : 공사 착공 ․2023. 12. : 공사 준공

6		도시재생사업

◈ 쇠퇴하고 있는 도심환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 도모

◈ 도시재생 활성화 및 도시경쟁력 제고로 살고 싶은 도시조성

【1】 도시재생 뉴딜사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 읍내 3, 4리 일원

❍ 공사기간 : 2023년 ∼ 2025년(3년)

❍ 사 업 비 : 14,400백만원(국비 8,000, 도비 1,600, 군비 3,800, 기금 1,000)

❍ 사업내용 : 도시재생사업(주거지지원형 A=94,500㎡)

구 분	사업비 (백만원)	사 업 내 용
3개분야	14,400
살고싶은 정주환경조성	2,800	⦁노후주거지 집수리 40호, 지붕개량 20호 ⦁보도 설치 L=250m, 골목길 정비 L=900m
소통 문화거점 조성	6,700	⦁다함께 어울림 센터(4층, 건축면적 240㎡) ⦁어울림공원(1,500㎡), 스토리텔링거리 L=600m
함께하는 공동체 조성	4,900	⦁청춘양성소(3층, 건축면적 150㎡) ⦁노노케어센터(2층, 건축면적 130㎡)

□ 추진실적

❍ 2021. 09. : 최종 공모선정(국토부)

❍ 2021. 12. : 활성화계획 확정 및 승인 고시(충남도)

□ 추진계획

❍ 2022. 01.∼06. : 집수리 1회 수요조사(착공 ‘22. 07.)

❍ 2022. 02. : 공공건축 기획용역 착수(완료 ‘22. 07.)

❍ 2022. 08. : 거점시설 3개소 등 실시설계 착수(완료 ‘23. 05.)

❍ 2023. 07. : 거점시설 3개소 등 공사 착공(완료 ‘25. 12.)

❍ 2024. 01.∼06. : 집수리 2회 수요조사(착공 ‘24. 07.)

【2】 도시 취약지역 생활여건 개조사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 교월2리 일원

❍ 공사기간 : 2022년 ∼ 2023년(2년)

❍ 사 업 비 : 5,560백만원(국비 3,701, 도비 476, 군비 1,110, 기타 273)

❍ 사업내용 : 면적(A=172,718㎡)

구 분	사업비 (백만원)	사 업 내 용
3개분야	5,560
주민안전확보	1,400	⦁CCTV, 옹벽, 화재방지시설 설치
생활인프라 개선	3,100	⦁마을회관 신축, 소방도로 개설, 가스공급시설 설치
주택정비지원	1,060	⦁빈집철거, 주택수리, 슬레이트지붕 개량

□ 추진실적 및 계획

❍ 2021. 10. : 실시설계용역 착수(완료 ‘22. 03.)

❍ 2022. 04. : 공사 착공(준공 ‘23. 12.)

【3】 범죄예방디자인 사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 벽천리 일원(충남도립대학교 앞)

❍ 공사기간 : 2022. 2 ~ 2022. 12.

❍ 사 업 비 : 510백만원(도비 153, 군비 357)

❍ 사업내용 : 면적(A=96,400㎡)

- 방범시설 : 안심벨, 안심반사경, 지능형 CCTV, 가로등

- 기반시설정비 : 노면도색, 도로표지병, 벽부 안심조명, 안내판

- 주민교류활성화 : 소공원 조성 및 역량강화 교육

□ 추진계획

❍ 2022. 02. : 실시설계용역 착수(완료 ‘22. 04.)

❍ 2022. 05. : 공사 착공(준공 ‘22. 12.)

7		지역균형개발 사업

◈ 소규모 마을 기반시설 및 편익시설 확충으로 주민 삶의 질 향상

◈ 주민 숙원사업 해결로 민원해소 및 지역균형 개발

◈ 관내 노후 마을회관 및 경로당 신·개축 추진으로 주민 복지 향상

【1】 소규모 지역개발 및 마을시설물 관리

□ 개   요

❍ 사 업 비 : 총9,250백만원(도비 295 / 군비 8,955)

❍ 사업기간 : 2022. 01. ∼ 12.

❍ 세부사업내역

(단위 : 백만원)
구 분		사업량	사업비	비고
총 계		401건	9,250
소규모 지역개발	소 계	291건	7,250
	마을안길포장	100건	2,000
	위험도로개선	10건	300
	아스콘 덧씌우기	50건	2,100
	세천정비	110건	2,000
	기반시설 유지보수	10건	300
	마을안길 교행차로(주민참여)	10건	250
	소규모공공시설 정비계획수립	1건	300
마을 시설물 관리	소 계	88건	1,428
	장평리 노인회관 리모델링	1건	200
	마을회관 정비	35건	850
	마을입구 야광안내판 설치	16건	28
	쉼터설치 및 보수 등	15건	200
	버스승강장 설치 및 보수	20건	130
	화성면 분회경로당 실시설계	1건	20
현수막게시대 및 마을게시판 정비		14건	112
정주환경개선사업(도비보조)		8건	460

□ 추진계획

❍ ‘21.12. ∼ ‘22. 2. : 합동설계반  운영(본청 및 읍면 시설직)

❍ ‘22. 3. ∼ ‘22.12. : 사업추진

【2】 마을회관 신·개축사업

□ 사업대상지

사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
계	5개소	1,860
청양읍 벽천2리 마을회관 개축	마을회관 개축 150㎡ (45평)	400	실시설계중(‘21.12)
장평면 화산리 경로당 신축	마을경로당 신축 150㎡ (45평)	400	신축부지 확보 협의 중
운곡면 분회경로당 개축	분회경로당 개축 118㎡ (36평)	320	실시설계중(‘21.12)
정산면 서정1리 마을회관 개축	마을회관 개축 265㎡ (80평)	720	실시설계중(‘21.12)
화성면 분회경로당 신축	분회경로당 신축 실시설계 1식	20	신축부지 확보 협의 중

□ 추진계획

❍ 2022. 01. : 실시설계 완료

❍ 2022. 02. : 보조금 내시 및 교부결정

❍ 2022. 03. : 사업발주

❍ 2022. 09. : 사업완료 및 보조금 정산

□ 기대효과

❍ 노후화 및 공간협소 등으로 이용에 불편이 있었던 주민편의시설      신·개축으로 주민 삶의 질 향상

8		청양군 간판 개선사업

◈ 청양군 상업 대표 거리에 불법적이고 노후된 간판정비로

도심환경 개선과 청양 이미지 제고

□ 개   요

❍ 사 업 명 : 머무르고 싶은 거리 청양읍 중앙로 간판개선사업

❍ 사 업 비 : 총5억원(국비3억, 군비2억)

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사업구간 : 청양군청 앞 ~ 십자로(약700m, 양방향거리)

❍ 사업대상 : 128개업소(건물 51개동)

❍ 사업내용 : 기존간판(벽면, 돌출, 창문이용간판 등) 교체 및 입면개선

□ 추진계획

❍ `22.  1. : 주민의견 수렴(주민설명회, 워크숍, 교육 등)

❍ `22.  3. : 사업발주

❍ `22.  5. : 디자인 컨설팅(한국옥외광고센터, 외부전문가)

❍ `22.  7. : 옥외광고정비시범구역 지정

❍ `22. 12. : 사업완료 및 정산

□ 기대효과

❍ 노후·불량간판 교체를 통한 안전하고 아름다운 거리 조성

❍ 특색있고 독창적으로 디자인된 간판을 제작·설치하여 바람직한 광고문화 확산 및 사회적 인식변화 도모

9		농촌주거환경개선사업

◈ 낡은 주택을 개량하여 주거환경개선 및 정주의욕 고취

◈ 방치된 빈집정비와 슬레이트 지붕재철거로 쾌적한 생활환경 제공

□ 개   요

구 분	사업량 (동)	사업비 (백만원)	지 원 내 용
계	258	599
농촌주택개량	60	-	연면적 150㎡이내 무주택자 (고정연리 2% 또는 변동금리 최대 2억 융자)
농촌빈집정비	50	50	1,000천원/동
슬레이트지붕 재철거	148	549	- 슬레이트철거 130동 3,520천원/동 - 지붕개량 5동, 4,369천원/동 - 비주택(창고, 축사) 5,400천원/동

* 농촌주택개량(융자)사업비는 NH농협은행 국비자금 활용

* 농촌빈집정비사업은 대상자 선정 이후 자가 철거하고 보상금 지급

* 슬레이트지붕재철거는 한국석면안전협회에 위탁 시행

□ 추진계획

❍ 2022. 01. : 농촌주거환경개선사업 공고

❍ 2022. 02. : 농촌빈집정비 및 농촌주택개량사업 신청서

접수 및 대상선정

❍ 2022. 03. : 슬레이트 지붕재철거사업 신청서 접수

❍ 2022. 04. : 슬레이트 지붕재철거사업 대상자 선정 및 조사 착공

❍ 2022. 11. : 동절기 이전 준공 목표 추진

□ 기대효과

❍ 정주여건 개선을 통한 삶의 질 향상

10		공공임대주택 건립 추진

◈ 다양한 공공임대주택(국민, 영구, 행복) 공급으로 안정적인 주거환경 조성

◈ 초고령사회 선제적 대응여건 조성을 위한 어르신 맞춤형 공공임대주택 건립

□ 개   요

구 분	사업비 (억원)	사업비 부담	세대수	공모 확정	준공 예정
계	680	-	427	-	-
교월1지구	160	10%	120	2016년	2022년
교월2지구	244	15%	180	2017년	2024년
고령자복지주택	276	38.5%	127	2019년	2022년

□ 추진계획

❍ 교월1지구 : 공사 진행 중(2022.12. 준공)

❍ 교월2지구 : 토지보상 완료 후 착공(2024.12. 준공)

❍ 고령자복지주택 : 공사 진행 중(2022.12. 준공)

	< 정산 서정지구>
▶ 개 요 - 위 치 : 정산면 서정리 187-6번지(9,030㎡) - 내 용 : 공공임대주택 100호[총사업비 210억원 (LH 170억, 군비 40억)] ▶ 추진실적 - 2019.08.26. : 국토교통부 ⌜2019년 마을정비형 공공주택사업⌟100호 응모 - 2019.11.01. : 국토교통부, LH 현장실사 - 2019.11.21. : 군비부담 협의 (당초 20억원 ⇒ 변경 58억원) - 2022.~ : 사업계획 승인 신청

□ 기대효과

❍ 수요자 특성을 고려한 주거공간 공급으로 삶의 질 향상

❍ 맞춤형 통합서비스(복지+주거) 제공으로 주거안정 및 생활여건 제고

11		맞춤형 주거급여 지원사업

◈ 기초주거급여 수급자에게 주거급여를 지급하여 주거안정 도모

◈ 임차가구는 임차료지원, 자가가구는 주택수선으로 실질적 주거지원

□ 개    요

❍ 지원대상 : 기준중위소득 46% 이하인 가구

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구	7인가구
기준금액 (원/월)	894,614	1,499,639	1,929,562	2,355,697	2,771,277	3,177,222	3,579,072

□ 추진계획

❍ 임차 급여 : 임차가구 기준임대료 내 임차료 지원

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구	7인가구
지원금액 (원/월)	163,000	183,000	218,000	254,000	262,000	310,000	310,000

- 사 업 량 : 330가구(매월 20일 지급)

- 사 업 비 : 763,840천원

❍ 수선유지 급여 : 자가 가구 주택 노후에 따라 주택개보수 지원

구 분	경보수	중보수	대보수
지원금액 (원)	4,570,000	8,490,000	12,410,000

- 사 업 량 : 35가구

- 사 업 비 : 200,000천원

- 사업시행 : 한국토지주택공사에 위탁

12		공공건축사업 추진

◈ 각 부서에서 추진하는 공공건축사업 기획·설계·공사감독 지원

◈ 청양군 디자인자문단 운영으로 공공건축 완성도 향상

□ 체계적인 공공건축사업 추진

사업기획	➱	사전행정절차추진	➱	설계공모	➱	기본 및 실시설계	➱	착공	➱	준공

❍ (건축기획업무) 건축물 기능, 규모 설정, 예산계획 등 건축기획업무 수행으로 효율성 있는 공공건축사업 추진

❍ (설계공모) 내실있는 설계공모 추진으로 우수한 디자인의 설계안 선정

❍ (감  독) 설계 및 공사의 감독업무 지원으로 사업추진 완성도 강화

사 업 명	규 모	사업비 (백만원)	‘22년도 추진계획	주관부서
가족문화센터 및 평생학습관	6,493㎡	27,884	‘22. 5. : 설계용역 완료 ‘22. 6. : 공사 발주	복지정책과 외 2
보건의료원 주차타워	2,550㎡	4,200	‘22. 4. : 설계공모 완료 ‘22. 5. ~ 8. : 실시설계 용역 ‘22. 9. : 공사발주	보건의료원
청양 다목적회관	1,949㎡	6,000	‘22. 2. : 설계공모 완료 ‘22. 3. ~ 7. : 실시설계 용역 ‘22. 8. : 공사발주	행정지원과
정산 다목적복지관	6,400㎡	24,506	‘22. 5. : 건축기획용역 완료 ‘22. 6. ~ 8. : 설계공모 ‘22. 9. : 기본 및 실시설계용역 발주	복지정책과 외 1
블루쉽하우스	390㎡	1,100	‘22. 5. : 공사 준공	미래전략과
정산의용소방대 청사	396㎡	1,200	‘22. 2. : 공사 발주 ‘22. 6. : 공사 준공	안전재난과
친환경에너지타운	1,520㎡	6,327	‘22. 3. : 건축기획용역 발주	환경보호과

□ 청양군 디자인자문단 운영

❍ (구  성) 민간전문가 4인

❍ (역  할) 청양군 공공건축 사업의 기획 및 설계, 시공 등 단계별 자문 수행 및 설계공모 참여로 디자인 향상

❖ 타 기관 사업 추진 현황

【1】도로사업 (대전지방국토관리청)

▣ 서부내륙 고속도로 건설사업 (고속국도)

❍ 위   치 : 경기 평택～청양～부여~전북 익산

❍ 사업기간

- 1단계 : 2019년 ~ 2024년(평택~예산~청양~부여)

- 2단계 : 2029년 ~ 2034년(부여~익산)

❍ 사 업 량 : 총 연장 L=137.7km, B=23.4m 4차로

- 1단계 : L=94.3km(평택-예산-청양-부여), 2단계 : L=43.4km(부여-익산)

※ 청양군 연장 : L=17.3km

❍ 총사업비 : 2조 6,694억원

- 공사비 : 1조 8,946억원(1단계 1조 3,757억원, 2단계 5,189억원)

- 조사/설계비 : 755억원       - 부대비 등 : 1,927억원

- 보상비 : 5,066억원

❍ 추진사항

- 2014. 11. 30. : 민간투자사업 적격성 조사완료

- 2015. 05. 06. : 우선협상대상자 지정(포스코건설)

- 2019. 12. 03. : 실시계획 승인

- 2019. 12. 09. : 공사착공

구분	추 진 현 황	보상진행률
6공구	용두리 : 터널 발파 추진중(‘22.2. 완료예정) 온직리 : 벌목 및 토공작업	88%
7공구	장승리 : 흙깎기, 문화재시굴조사 정좌리 : 청양2, 3교 장승천교 교대시공 용천리 : 비봉터널 발파진행 중	83%
8공구	양사리 : 양사1리 토공작업	60%

▣ 정산 ∼ 신풍 간 국도 확ㆍ포장사업 (위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 정산면 ~ 공주시 신풍면

❍ 사업기간 : 2018.  9. 10. ∼  2023. 8.(공정률 32%)

❍ 사 업 량 : L= 12.8km, B=10.5m, (우리군 6.3km)

❍ 사 업 비 : 441억원(시설비 362, 보상비 79)

- 기투자 46억원 / 2020년 70억원 / 2021년 이후 325억원

❍ 시 공 사 : 선엔지니어링 외 2개사

❍ 감 리 사 : 내경엔지니어링 외 2개사

❍ 진행사항

- 2018. 09. : 공사 착공

- 2020. 06. ~ 10. : 감정평가실시(청양)

- 2020. 11. ~ 2021. 11. : 보상절차추진(70% 완료, 수용절차추진중)

- 2021. 11. : 청양군 구간 공사착수(솔티터널부 배수공 작업중)

【2】도로사업 (충청남도 종합건설사업소)

▣ 정산지구 위험도로 개선사업 (위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 정산면 학암리 일원

❍ 사 업 량 : L=1.0km, B=13.0~15.0m 도로확포장

❍ 총사업비 : 8,000백만원

- 기투자 145 / 2020년 1,320 / 2021년 이후 6,535

❍ 시 공 사 : 일산종합건설(주) (논산)

❍ 사업기간 : 2018. 11. ∼  2023. 08. (공정률 30%)

❍ 추진사항 및 계획

- 2019. 12. : 실시설계 준공

- 2020. 08. 04. : 공사착공(현재 애경아파트 앞 토공작업 진행중)

- 2023. 12. : 공사준공

▣ 장평지구 위험도로 개선사업 (위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 장평면 은곡리 ~ 미당리 일원

❍ 사 업 량 : L=1.39km, B=19.5m, 도로확포장

❍ 총사업비 : 5,500백만원

- 기투자 20 / 2020년 1,000 / 2021년 이후 4,480

❍ 시 공 사 : 신화종합건설(주)

❍ 사업기간 : 2019. 03. ∼  2022. 06. (공정률 55%)

❍ 추진사항 및 계획

- 2019. 12. : 공사착공(공사중지 중 비탈면 안정성 검토중)

- 2022. 06. : 공사준공

▣ 청양∼신양IC 간 도로 확ㆍ포장사업 (국지도70호)

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 ∼ 예산군 신양면(신양IC)

❍ 사 업 량 : L=16.2km, B=10.0m 선형개량 (우리군 14.7km)

❍ 사 업 비 : 52,700백만원(공사비 38,700, 경비 및 보상비 14,000)

- 기투자 39,400 / 2020년 4,300 / 2021년 이후 9,000

❍ 사업기간 : 2017. 05. ∼ 2023. 06. (공정률 65%)

❍ 시 공 사 : 흥화건설 외 2개사

❍ 감 리 사 : 한맥기술 외 1개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2017. 05. : 공사착공 (운곡 위라리~효제리 아스콘포장, 신운곡교 가설)

- 2023. 06. : 공사준공

▣ 화성∼장곡 간 도로확‧포장 사업 (지방도609호)

❍ 위    치 : 청양군 화성면 화암리 ∼ 보령시 청라면 장현리

❍ 사 업 량 : L=2.4km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 13,306백만원(공사비 10,384, 경비 및 보상비 2,922)

- 기투자 330 / 2020년 505 / 2021년 이후 12,471

❍ 사업기간 : 2018. 06. ∼  2024. 12.

❍ 실시설계 용역사 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 06. : 실시설계용역 착수  - 2020. 04. : 실시설계완료

- 2021. 12. : 보상계획공고 완료

▣ 구룡∼용두 간 도로확‧포장 사업 (지방도610호)

❍ 위    치 : 청양군 남양면 구룡리 ∼ 용두리

❍ 사 업 량 : L=1.3km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 10,795백만원(공사비 8,321, 경비 및 보상비 2,474)

- 기투자 333 / 2020년 505 / 2021년 이후 9,957

❍ 사업기간 : 2018. 06. ∼ 2025. 12.

❍ 실시설계 용역사 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 06. : 실시설계용역 착수  - 2020. 04. : 실시설계완료

- 2021. 08. : 마을설명회 실시    - 2021. 12. : 보상절차 진행중

▣ 규암∼청남 간 도로확‧포장 사업(지방도625호)

❍ 위    치 : 청양군 청남면 인양리 ~ 부여군 규암면 호암리

❍ 사 업 량 : L=2.3km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 27,320백만원(공사비 21,884, 경비 및 보상비 5,436)

❍ 사업기간 : 2018. 03. ∼ 2022. 09. (공정률 80%)

❍ 시 공 사 : 신진종합건설㈜ 외 2개사

❍ 건설사업관리 : 도화엔지니어링 외 1개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 03. : 공사 착공

(지천대교 슬라브 철근배근, 인양교 슬라브타설 완료–2022년 포장계획)

- 2022. 09. : 공사 준공

【3】도로사업 (종합건설사업소 공주지소)

▣ 광금도로 선형개량사업 (지방도645호)

❍ 위    치 : 청양군 대치면 광금리 일원

❍ 사 업 량 : L=580m, B=12.5m

❍ 총사업비 : 3,400백만원 (기투자 600 / 향후 2,800)

❍ 사업기간 : 2017. 10. ∼  2022. 12.

❍ 공 정 율 : 10%

❍ 시 공 사 : 대륙건설산업㈜

❍ 추진실적 및 계획 :

- 2019. 12. 19. : 공사착공(토공 작업 진행중)

- 2022. 12. : 공사 준공 예정

▣ 장평사거리 회전교차로 설치공사 (국도39호)

❍ 위    치 : 청양군 장평면 중추리 일원

❍ 사 업 량 : 회전교차로 1개소

❍ 총사업비 : 1,000백만원

❍ 공사기간 : 2020. 12. ∼  2022. 3.

❍ 공 정 율 : 15%

❍ 시 공 사 : ㈜도시종합건설

❍ 추진실적 및 계획 :

- 2020. 12. : 공사착공(배수공 작업 중)

- 2022. 03. : 공사준공

【4】농촌기반시설사업 (한국농어촌공사)

▣ 장평지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 장평·청남·정산·운곡면 일원

❍ 총사업비 : 3,699백만원(기시행 1,049, 금회 800, 향후 1,850)

❍ 사업기간 : 2020. 12.  ∼ 2023. 12. 20.

❍ 주요공사 : 구조물(개거, 암거) 교체 L=6,501m

▣ 동강지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 동강리 일원

❍ 총사업비 : 3,320백만원(기시행 1,358, 금회 1,962)

❍ 사업기간 : 2021. 03.  ∼ 2022. 12. 20.(22년준공)

❍ 주요공사 : 배수장 2식(동강1, 동강2), 부대공사 1식

▣ 중산지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 중산리 일원

❍ 총사업비 : 3,340백만원(기시행 1,354, 금회 1,986)

❍ 사업기간 : 2021. 03.  ∼ 2023. 12. 20.(22년준공)

❍ 주요공사 : 배수장 2식(중산1, 중산2), 부대공사 1식

▣ 장평2지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 장평면 분향리 일원

❍ 총사업비 : 7,610백만원(기시행 70, 금회 800, 향후 6,740)

❍ 사업기간 : 2020. 11.  ∼ 2025. 12. 20.

❍ 주요공사 : 용·배수로 5조, 부대공사 1식

▣ 인양5지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 인양리 일원

❍ 총사업비 : 4,781백만원(기시행 80, 금회 1,300, 향후 3,401)

❍ 사업기간 : 2021. 03.  ∼ 2024. 12. 20.

❍ 주요공사 : 배수장 1식, 부대공사 1식

▣ 광암지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 운곡·비봉·정산·목면 일원

❍ 총사업비 : 4,330백만원(기시행 80, 금회 1,300, 향후 2,950)

❍ 사업기간 : 2021. 03.  ∼ 2024. 12. 20.

❍ 주요공사 : 취입보, 전동수문, 어도설치

▣ 적곡지구 배수개선사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 인양·대흥리 일원

❍ 총사업비 : 15,600백만원

❍ 사업기간 : 미정 (기본계획지구)

❍ 주요공사 : 배수장, 배수문 보강 및 배수로 5조 5.5㎞정비

▣ 시전지구 다목적농촌용수개발사업

❍ 위    치 : 청양군 대치면 시전·수석·농소리 일원

❍ 총사업비 : 14,500백만원(금회 240, 향후 14,260)

❍ 사업기간 : 2021. 06. ∼ 2025. 12. 20.

❍ 주요공사 : 저수지 조성, 이설도로 2조 1.1㎞, 용수로 5조 6.9㎞

▣ 공기관(농어촌공사) 대행사업비 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비	비 고
계		4지구	4,100
송방지구 대구획경지정리사업	청양읍 송방리	수혜면적 51ha	2,000	총사업비 2,000
청남지구 용배수로정비사업	청남면 중산리등	용배수로 17조, L=4,374km	400	총사업비 800 (금회 : 400)
광암지구 수해피해위험지역정비사업	운곡면 광암리	배수로정비 L=1.73km	1,200	총사업비 1,200
수리시설개보수사업	청양 군내	용배수로 개보수 7개소	500