맑은물사업소기획감사실

					목 차

□ 2022년 맑은물사업소 운영성과
□ 2022년 주요업무 추진실적
1. 수질오염 총량관리
2. 지방상수도 현대화사업
3. 스마트 관망관리 인프라 구축사업
4. 지방상수도 비상공급망 확충사업
5. 농어촌생활용수 개발사업
6. 광역 및 마을상수도 확충사업
7. 농촌마을 하수도정비사업
8. 청양공공하수처리장 확충사업
9. 공공하수도시설 기술진단
10. 하수관로 정비사업
11. 분뇨처리시설 개량사업

2022년 맑은물사업소 운영성과

□ 금년도에는

❍ 청양군 광역상수도 보급 확대로 깨끗하고 안전한 수돗물 제공

- 남양면 일부, 목면 화양2리, 대치면 탄정리 등 광역상수도 보급 개시

- 지방상수도 현대화사업, 비상공급망 확충 등 광역상수도 보급률 제고

- 대치지구, 장평지구 농촌생활용수개발사업 설계용역 착수

❍ 군민의 안정적인 상수도 공급을 위한 상수도 시설 확충

- 대치면 주정리, 화성면 농암리 등 가압장 설치

❍ 청양군 하수처리시설 확충으로 군민의 주민환경 개선

- 영양지구 소규모하수처리시설 가동개시 및 예비운전 실시

- 청양공공하수처리시설(300㎥/일)의 공사 착공로 처리장 운영의 효율화

□ 2023년에는

❍ 주민과 자연환경을 생각하는 수도행정 구현

❍ 상·하수도 각종 사업추진을 통해 군민의 깨끗하고
안전한 물 이용기회 확대

❍ 노후 상수도관 교체사업 등 지방상수도 현대화사업을

통한 유수율 제고 및 누수율 개선

❍ 광역 및 마을상수도 공급을 위한 기반시설 확충

❍ 하수처리시설 증설을 통한 군민 생활여건 개선도모

1		수질오염 총량관리

◈ 적정한 개발과 실현 가능한 삭감계획 추진을 통한 금강의

수질개선 도모

□ 개    요

❍ 대상유역 현황

단위유역	관할면적(㎢)	점유율	비고
군 면적	479.11	100%
합계	354.85	74.1%
금본I	19.98	5.6%
금본J	334.87	94.4%

※ 제외지역(운곡 일부와 화성, 비봉)

❍ 대상물질 : BOD(생물학적산소요구량), T-P(총인)

□ 그동안 추진실적

❍ 2022. 01. 제4단계 수질오염총량관리 시행계획 추가수립 연구용역 착수

❍ 2022. 04. 오염총량관리 시행계획 이행평가(2021∼2025) 연구용역 착수

❍ 2022. 02. 수질오염총량관리 배출․삭감시설 모니터링 연구용역 착수

❍ 2022. 07. 20. 제4단계 금강수계 수질오염총량관리 시행계획 승인

❍ 2022년 수질오염총량관리 협의 실적(1월~10월)

- 수질오염총량 할당요청 75건(할당 7건, 비할당 68건)

앞으로	☞ 2022. 12. - 제4단계 수질오염총량관리 시행계획 추가수립 연구용역 완료 - 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 1차년도 연구용역 완료 - 수질오염총량관리 배출․삭감시설 모니터링 연구용역 완료 ☞ 2023. 01. 이행평가 2차년도 및 모니터링 연구용역 발주

2		지방상수도 현대화사업

◈ 노후 상수도 개량을 통한 관망정비 및 유수율 제고로

안정적인 수돗물 공급 및 수질관리

□ 개   요

❍ 위    치: 정산면, 목면

❍ 사 업 량: 노후관로 34.53㎞ 교체, 블록구축(소블럭) 15개소,

유지관리 시스템 및 원격검침 시스템 1식

❍ 사업기간: 2020. 01. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 비: 14,365백만원(균 8,619, 도 2,298, 군 3,448)

(단위: 백만원)

구분	계	`20년	`21년	`22년	`23년	`24년	비고
사업비	14,365	1,958	1,273	3,542	3,796	3,796	균60%, 도16%, 군24%

□ 그동안 추진실적

❍ 2020. 10.  기본 및 실시설계 착수
❍ 2021. 03.  도상분할블록 계획 수립 및 블록구축공사

❍ 2021. 06.  노후수도미터 교체(379전)

❍ 2022. 04.  사전기술검토 완료(환경부)

❍ 2022. 06.  유지관리시스템 구축용역 발주

❍ 2022. 06.  노후수도미터 교체(136전)

❍ 2022. 09.  블록구축공사 및 관망정비공사 실시설계

※ 현 공정률 : 40%

앞으로	☞ 2023. 11. 관망정비공사 발주(배수관 14.3km, 급수관8.1km)

3		스마트 관망관리 인프라 구축사업

◈ 지방상수도 현대화사업과 연계한 관망관리 체계구축으로 유수율 제고 및 효율적 유지관리

□ 개   요

❍ 위    치: 청양읍, 정산면, 화성면, 비봉면, 남양면

※ 광역상수도 공급지역

❍ 사 업 량: 수질측정, 수압감시 시스템 및 RF관로 인식체계 구축

❍ 사업기간: 2021. 01. ～ 2022. 12.

❍ 사 업 비: 3,497백만원(국 2,448, 군 1,049)

(단위: 백만원)

구 분	계	`21년	`22년	비 고
사업비	3,497	1,093	2,404	국70%, 군30%

□ 그동안 추진실적

❍ 2020. 10.  충청남도 주관 15개 시·군 K-water 위탁 협약

❍ 2021. 01.  기본 및 실시설계용역 발주

❍ 2021. 05.  관급자재(유량계, 수압계) 발주

❍ 2021. 10.  원격검침 수도미터 교체(598전)

❍ 2022. 03.  사업추진 행정절차 이행

❍ 2022. 06.  원격검침 수도미터 교체(350전)

❍ 2022. 08.  사업대상지 행정절차 이행

※ 현 공정률 : 70%

앞으로	☞ 2022. 11. 기본계획 변경 신청(사업기간 연장) ☞ 2023. 03. 수질계측기 및 소규모 유출 및 수압 감시장치 설치

4		지방상수도 비상공급망 확충사업

◈ 보령댐 수원 부족, 수질오염, 관로 파손 등과 같은 비상상황

발생 시 신속한 대처를 위한 상수도 공급원 다변화

□ 개   요

❍ 위    치: 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면 일원

❍ 사 업 량: 송수관로 L=27.7㎞, 배수관로 L=31.4㎞, 급수관로 L=3.6㎞, 배수지 3개소, 가압장 4개소, 급수가구 181가구

❍ 사업기간: 2021. 01. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비: 16,700백만원(균 5,600, 도 4,720, 군 5,680,특교세700)

(단위: 백만원)

구 분	계	21년	22년	23년 이후	비 고
계	16,700	1,514	8,191	6,995
균특사업	8,000	857	4,291	2,852	균특70%,도9%,군21%
균형발전사업	8,700	657	3,900	4,143	도50%, 군50%

□ 그동안 추진실적

❍ 2021. 06.  기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2022. 04.  도로굴착심의 완료

❍ 2022. 09.  설계 경제성 및 안전성 검토 완료

❍ 2022. 10.  지방건설기술심의 완료

앞으로	☞ 2022. 11. 수도사업인가 및 총사업비 변경(환경부) ☞ 2022. 11. 공사 착공 ☞ 2025. 12. 공사 준공

5		농어촌생활용수 개발사업

◈ 면단위 농촌지역에 양질의 광역상수도 공급을 위한 기반     시설 확충으로 안전하고 깨끗한 생활환경 도모

□ 개   요

사업명	위치	사 업 량	사 업 비(백만원)				사 업 기 간	비 고
			계	기확보	22년	23년이후
계		4개 지구	106,604	43,097	8,190	55,317	도비 85%, 군비 15%
남 양 지 구	남양 일원	관로매설 L= 133.7㎞, 가정급수 1,261가구 (용마2,백금1,대봉1)	40,042	20,361	3,521	16,160	2017.01.∼ 2025.12.	공정률 53%
정 산 지 구	정산 일원	관로매설 L= 74.7㎞, 가정급수 459가구 (비상공급망 L= 7.6km)	29,655	21,936	3,130	4,589	2017.06.∼ 2024.12.	공정률 75%
장 평 지 구	장평 일원	관로매설 L= 48.4km 가정급수 900가구	28,907	800	1,160	26,947	2021.01 ∼ 2025.12	설계완료 행정절차중
대 치 지 구	대치 일원	관로매설 L= 23.5㎞, 가정급수 352가구	8,000	-	379	7,621	2022.01.∼ 2024.12.	설계중 (부여군 협업사업)

□ 그동안 추진실적

❍ 남양·정산지구

- 2022. 02.  차수분(22년도분) 공사 착공

❍ 장평지구

- 2021. 06.  기본 및 실시설계용역 착수

- 2022. 08.  설계 경제성 및 안전성검토 완료

- 2022. 10.  지방건설기술심의 완료

❍ 대치지구

- 2022. 05.  설계용역 착수

앞으로	☞ (남양·정산지구) 2022. 12. 차수분 준공 및 연차별 사업추진 ☞ (장평지구) 2022. 11. 행정절차이행 및 사업착공 ☞ (대치지구) 2023. 05. 설계완료 및 사업착공

6		광역 및 마을상수도 확충사업

◈ 면단위 농촌지역에 양질의 광역 및 마을상수도 공급을 위한

기반시설 확충으로 안전하고 깨끗한 생활환경 도모

□ 개   요

위 치	사업량	사 업 비 (백만원)	사업기간	공정률 (%)	비 고
계	3개 마을	1,850
대치면 탄정리	관로매설 5.4km 가정급수 76가구	800	2022.01. ∼ 2022.11.	100	광역상수도
목면 화양2리	관로매설 6.6km 가정급수 41가구	800	2022.01 ∼ 2022.11.	100	광역상수도
운곡면 추광리	관로매설 2.7km 가정급수 32가구	250	2022.01. ∼ 2022.09.	100	소규모수도시설

□ 그동안 추진실적

❍ 2022. 03.  설계용역 완료

❍ 2022. 04.  행정절차 이행(도로굴착 심의)

❍ 2022. 04.  공사 착공

❍ 2022. 10.  공사 준공

앞으로	☞ 광역상수도 급수 개시로 양질의 수돗물 공급 및 관리

7		농촌마을 하수도정비사업

◈ 집단거주지역 하수처리시설 및 하수관로 정비로 수질오염

방지 및 주민 생활환경 개선

□ 개   요

사업명	위치	사 업 량	사 업 비 (백만원)				사 업 기 간	비고
			계	기확보	`22년	`23년 이후
계		4개소	18,845	3,618	2,447	12,780
영양 지구	운곡	처리시설 25㎥/일 하수관로 L=1.06km	2,932	1,358	1,574	0	2019∼2022	계속 국70,지30
천장 지구	정산	처리시설 80㎥/일 하수관로 L=3.8km	5,548	1,646	249	3,653	2019∼2024	계속 국70,지30
광암 지구	운곡	처리시설 75㎥/일 하수관로 L=4.1km	5,180	315	309	4,556	2020∼2024	계속 국70,지30
녹평 지구	비봉	처리시설 230㎥/일 하수관로 L=5.6km	5,185	299	315	4,571	2020∼2024	계속 국70,지30

□ 그동안 추진실적 및 하반기 추진계획

❍ 영양지구

- 2021. 03.  공사착공

- 2022. 12.  공사준공 및 예비운전

❍ 천장지구

- 2020. 09.  공사착공

- 2024. 09.  공사준공 및 예비운전

❍ 광암·녹평지구

- 2022. 12.  실시설계 완료

- 2023. 03.  공사착공

- 2024. 09.  공사준공 및 예비운전

앞으로	☞ (영양지구) 2023. 03. 가동개시 ☞ (천장지구) 2023. 03. 4차분 착공 및 2024. 12. 가동개시 ☞ (광암,녹평지구) 2023. 03. 사업 착공 및 2024. 12. 가동개시

8		청양공공하수처리장 확충사업

◈ 하수처리시설 증설 및 총인처리시설 설치로 처리장 운영

효율 개선 및 주민 생활여건 개선

□ 개   요

구 분	사업비 (백만원)	사업기간	비고
계	12,843
청양공공하수처리장 (300톤)	3,830	2020 ~ 2023	도 13%, 군87%
청양공공하수처리장 (600톤*)	9,013	2022 ~ 2025	국50%,도25%,군25%

* 당초 600톤에서 300톤 또는 기존시설개량(1600톤) 변경가능 환경부 협의 중

□ 그동안 추진실적 및 하반기 추진계획

❍ 【300톤】

- 2020. 06.  공사착공

- 2022. 12.  사업준공 및 예비운전

❍ 【600톤】

- 2022. 04.  기본 및 실시설계용역 착공

- 2022. 07.  용량 결정 협의 완료(300톤)

- 2022. 10.  가동률 초과에 개선 방안 협의

☞ 300톤 증설 대신 우수 처리시설 개량(1600톤)으로 검토 요청

앞으로	☞ 2023. 03. 청양공공하수처리장(300톤) 가동개시 ☞ 가동률 초과 관련 기술진단 및 타당성 용역 진행 ☞ 하수도 기본계획(부분)변경

9		공공하수도시설 기술진단

◈ 하수도법 제20조(기술진단 등)제1항에 따라 5년마다 공공하수도     관리상태를 진단  ➡ 시설의 수명연장 및 처리효율 증대방안 마련

□ 개   요

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비 (백만원)		사업기간	비고
계		2개 사업	342
하수처리장 기술진단용역	화성면 산정리	합천지구 처리장 (150톤/일)	9		2022년
기술진단 개선사업	청양군 일원	청양처리장 등 11개소 23건	333		2022년

□ 그동안 추진실적 및 하반기 추진계획

❍ 하수처리장 기술진단용역

- 2022. 05.  용역착수

- 2022. 08.  용역완료

❍ 기술진단 개선사업

- 2022. 06.  사업검토

- 2022. 11.  사업착공

- 2022. 12.  사업완료

앞으로	☞ 2022. 11. 기술진단에 제시된 시설개선 확인 ☞ 2022. 11. 기술진단 사업 발주 및 착공

10		하수관로 정비사업

◈ 노후관로 현황 파악 및 보수공사를 통한 하수처리시설 효율

증대 및 불명수 차단

□ 개   요

사업명	위치	사 업 량	사 업 비(백만원)			사업 기간	비고
			계	기확보	`22년
계		2개 사업	1,743	432	1,311
노후관로 정밀조사	청양군 일원	하수관로 (총113km) 금회 40km	815	432	383	2020 ∼2022	국50%군50%
노후관로개량사업	청양군 일원	관로 L=1.06km	928	-	928	2022 ~2023	국50%군50%

□ 그동안 추진실적

❍ 노후하수관로 정밀조사

- 2022. 06.  정밀조사용역 착수

- 2022. 11.  용역완료

❍ 노후하수관로 개량사업

- 2022. 01.  실시설계용역 착수

- 2022. 06.  비굴착 공법심사 및 기타 인허가

- 2022. 10.  실시설계용역 완료

앞으로	☞ 2022. 12. 노후하수관로 개량사업 착공 ☞ 2023. 12. 노후하수관로 개량사업 준공

11		분뇨처리시설 개량사업

◈ 노후된 분뇨처리장 시설 축소·개량으로 환경기초시설 운영의

경제적 여건 개선

□ 개   요

위 치	사 업 량 (㎥/일)	사 업 비 (백만원)				사 업 기 간	비고
		계	기확보	`22년	`23년 이후
청양읍 정좌리	Q=20 (50 ⇒ 20)	2,507	302	1,000	1,205	2021 ∼2023

□ 그동안 추진실적

❍ 2021. 03.  하수도정비기본계획 변경 인가

❍ 2021. 04.  기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2022. 10.  충청남도 계약심사 완료

앞으로	☞ 2022. 10. 분뇨처리시설 개량사업 발주 ☞ 2023. 12. 분뇨처리시설 개량사업 준공