건설도시과

					목 차

□ 2022년 건설도시과 운영성과
□ 2022년 주요업무 추진실적
1. 지역안전확보를 위한 가로등 및 보안등 관리
2. 스마트복합쉼터 조성사업
3. 도로확·포장 및 유지관리사업
4. 청남지구 농촌용수개발사업
5. 농업기반조성사업
6. 도시개발사업
7. 도시재생사업
8. 지역균형개발사업
9. 청양군 간판개선사업
10. 농촌주거환경개선사업
11. 공공임대주택 건립
12. 맞춤형 주거급여지원사업
13. 공공건축사업 추진
❖ 타기관 사업 추진현황

2022년 건설도시과 운영성과

□ 금년도에는

❍ 가로등(보안등)의 선제적 대응과 신속한 유지관리로 주민불편 해소

- 보안등LED전환사업, 노후가로등 교체 등

❍ 체계적인 도로망 확충 및 안전한 도로 환경 조성

- 스마트복합쉼터 조성사업, 회전교차로 설치 등

❍ 가뭄, 집중호우 등 기후변화에 대응하는 농업기반시설 확충

- 한발대비 용수개발사업, 수리시설 개·보수사업 등

❍ 원도심 활성화를 통해 품격있고 살기 좋은 도시 조성

- 도시재생사업, 취약지역 생활여건 개조사업, 간판개선사업 등

❍ 지역의 특성과 주변경관을 고려한 내실있는 공공건축 추진

- 가족문화센터 및 평생학습관, 청양다목적복지관 등

□ 2023년에는

❍ 공정한 건설문화 정착과 건설산업 활성화 방안 모색

❍ 서부내륙고속도로 건설에 따른 발전잠재력 적극 모색

❍ 안정적인 농업용수 공급으로 영농환경 개선

- 다목적 농촌용수개발사업, 저수지 보수·보강 등

❍ 도시재생 활성화 및 도시경쟁력 제고로 살고 싶은 도시조성

❍ 지역에 활력을 불어넣을 맞춤형 지역개발사업 적극 추진

❍ 수요대응 맞춤형 주거지원으로 정주여건 개선

- 공공임대주택 건립, 충남형 리브투게더, 빈집이음사업 등

1		지역안전 확보를 위한 가로등 및 보안등 관리

◈ 가로등(보안등)의 선제적 대응과 신속한 정비로 주민불편 해소

◈ 노후 보안등 LED 교체로 전기료 절감 및 에너지 효율성 증대

□ 현    황

(단위 : 등)

구분	계	청양	운곡	대치	정산	목	청남	장평	남양	화성	비봉
계	7,905	1,447	577	968	1,101	582	519	622	800	563	726
보안	6,997	1,263	577	690	912	455	519	622	800	563	596
가로	908	184	-	278	189	127	-	-	-	-	130

□ 추진실적

(단위 : 건/ 천원)

사업명	사업량	사업비	비고
계		217,570
가로등(보안등)신규설치	◦신규가로등(보안등)설치 : 154개소	99,550
노후가로등(보안등)교체	◦노후가로등 교체 : 311건	78,020
고장가로등(보안등)수리	◦고장 수리 완료 : 810건	40,000

❍ 2022. 7. : 보안등 LED 교체공사(화성면,목면) 준공 / 140백만원

앞으로	☞ 가로등 및 보안등 유지보수 철저 ☞ 2023년 보안등 LED 교체공사 2년차(대치,정산)준비 ☞ 한전 부적합 가로등 보수공사 준비

2		스마트복합쉼터 조성사업

◈ 해저터널, 서부내륙고속도로 개통 등으로 교통량 증가가     예상되는 지점에 쉼터, 지역홍보관 및 로컬푸드 판매장      등을 설치하여 사고예방 및 지역경제 활성화 도모

□ 개   요

❍ (위    치) 화성면 구재리 179번지 일원(국도36호 구재교차로 인근)

❍ (사업내용) 부지면적 13,538㎡

- 지역홍보관, 주차장, 화장실, 조경·조명시설 등 설치

❍ (총사업비) 4,670백만원(국비2,000 군비 1,500 기타 1,170)

❍ (사업기간) 2022. 03. ~ 2023. 12.(2년)

□ 추진실적

❍ ‘21. 11. : 사업대상지 일제조사 및 공모사업 신청 관련 용역 시행

❍ ‘21. 12. : 업무제휴 협약체결(화성농협)

공모사업 신청서 제출(군→대전청)

❍ ‘22. 03. : 공모사업 선정

❍ ‘22. 04. : 스마트 복합쉼터 기본계획수립 및 유지관리 연구용역 착수

❍ ‘22. 08. : 스마트 복합쉼터 진출입 연결로 기본설계용역 착수

앞으로	☞ ‘22. 11. : 설계공모 및 실시설계용역 추진 ☞ ‘23. 04. : 공사 발주

3		도로확‧포장 및 유지관리 사업

◈ 도로 확·포장사업으로 교통사고 예방과 주민편익 증진

◈ 교통약자를 위한 안전시설물을 설치하여 보행불편해소

【1】 군도 및 농어촌도로 정비사업

사 업 명	위치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘22년	‘22년 이후
계		6개 사업	16,750	4,560	3,500	8,690	-	-
소계(군도)		2개 사업	5,200	-	500	4,700	-	-
백곡리 군도9호 도로확포장	정산면 백곡리	L=2.0km B=8.5m	4,800	-	100	4,700	‘21.11.∼ ‘25.12.	설계중
용천리 군도1호 회전교차로 설치	비봉면 용천리	회전 교차로 1개소	400	-	400	-	‘22.01.∼ ‘22.12.	공사중
소계(농어촌도)		4개 사업	11,550	4,560	3,000	3,990	-	-
매산리~군량리 면도 102호 확・포장	화성면 매산리,청양읍 군량리	L=3.4km, B=8.5m	5,500	2,310	600	2,590	‘21.09.∼ ‘24.09.	55
신정리 리도 201호 확・포장	화성면 신정리	L=1.3km, B=8.5m	3,000	1,500	1,500	-	‘21.08.∼ ‘23.03.	70
청수리 리도201호 확・포장	청양읍 청수리	L=1.2km B=6.5m	1,550	750	800	-	‘21.03.∼ ‘22.12.	80
적누리 리도205호 도로확포장	청양읍 적누리	L=1.1km B=6.5m	1,500	-	100	1,400	‘21.11.∼ ‘24.12.	설계중

□ 추진실적 및 계획

백곡리 군도9호 도로확포장		․2021. 11. : 실시설계용역 착수 ․2023. 03. : 공사 착공 ․2025. 12. : 공사 준공예정
용천리 군도1호 회전교차로 설치		․2022. 12. : 실시설계용역 착수 ․2022. 06. : 공사 착공 ․2022. 12. : 공사 준공예정
매산리~군량리 면도102호 확포장사업		․2021. 08. : 실시설계용역 완료 ․2021. 09. : 공사 착공 ․2023. 12. : 공사 준공예정
신정리 리도201호 확포장사업		․2021. 08. : 실시설계용역 완료 ․2021. 09. : 공사 착공 ․2023. 03. : 공사 준공예정
청수리 리도201호 확포장사업		․2021. 03. : 실시설계용역 완료 ․2021. 03. : 공사 착공 ․2022. 12. : 공사 준공예정

적누리 리도205호 확포장사업		․2021. 11. : 실시설계용역 착수 ․2022. 12. : 공사 착공 ․2024. 12. : 공사 준공예정

【2】 군도 및 농어촌도로 유지관리 사업

사업명	위치	사업량	사 업 비(백만원)			사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘22년
계		2개 사업	3,625	0	3,625
군도정비	군내일원 (군도)	아스콘 덧씌우기, 도로시설물 보수	2,553	-	2,553	‘22.01.∼ ‘22.12.	70
농어촌 도로정비	군내일원 (농어촌도로)	아스콘 덧씌우기, 도로시설물 보수	1,072	-	1,072	‘22.01.∼ ‘22.12.	70

□ 추진실적 및 계획

군도 정비사업		․2022. 01. : 실시설계용역 발주 (아스콘 덧씌우기, 교량 보수보강, 호우피해복구 등) 상반기 시설물 안전점검 및 내진성능평가 발주 ․2022. 04. : 실시설계 완료 및 공사 착공 ․2022. 07. : 하반기 시설물 안전점검 발주 ․2022. 12. : 공사 준공
농어촌도로 정비사업		․2022. 01. : 실시설계용역 발주(아스콘 덧씌우기, 정비사업 등) ․2022. 04. : 용역 완료 및 공사 착공 ․2022. 12. : 공사 준공

【3】 어린이 및 노인보호구역 정비사업

사업명	위치	사업량	사 업 비 (백만원)	사업 기간	비 고
보호구역 유지관리	군내일원	유지관리 1식	168	‘22.01. ~ ‘22.12.

□ 추진실적 및 계획

어린이 및 노인보호구역 정비사업		․2022. 05. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공 ․2022. 12. : 공사 준공

【4】 충남소방복합시설기반조성사업

사업명	위치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율
			계	기 투자	‘22년	‘22년이후
충남소방복합시설 기반조성사업	비봉면 록평리	1식	6,800	2,300	2,500	2,000	‘21.10. ∼ ‘24.04.	35

□ 추진실적 및 계획

충남소방 복합시설 기반조성사업		․2021. 06. : 실시설계 용역 완료 ․2021. 10. : 공사 착공 ․2024. 04. : 공사 준공

4		청남지구 농촌용수개발사업

◈ 금강변 일원 시설영농구역에서 생산되는 농작물의 품질을 향상     시키기 위한 청정 용수 공급

□ 개   요

❍ 위    치 : 청남면, 장평면 일원 (대상면적 : 845ha)

❍ 사 업 량 : 양수장, 가압장 및 정수장 신설, 용수관로 L=49.75km

❍ 사업내용 : 기본조사 및 실시설계, 정수시설 및 관로 설치공사 등

❍ 총사업비 : 37,700백만원 (국비 26,600 / 군비 11,100)

❍ 공사기간 : 2020년 ~ 2027년(8년)

□ 추진실적

❍ 2019년 : 주민설명회(3회) 개최, 예비타당성 조사 완료

❍ 2020년 : 기본계획수립·전략환경영향용역 착수, 선진지 견학, 금강홍수통제소 하천수 사용허가 협의

❍ 2021년 : 국회 방문(2회), 중앙부처 협의(4회), 기본계획수립 완료

❍ 2022. 01. : 충남도청(3회), 한국농어촌공사 본사(나주) 방문 협의

❍ 2022. 08. : 정수시설 부지 매입 (3필지 / 8,323㎡)

❍ 2022. 09. : 국회방문 협의

❍ 2022. 10. : 국회방문 협의

앞으로	☞ 2023. 01. : 다목적 농촌용수개발사업 기본조사 지구 선정 ☞ 2024. 01. : 기본계획수립 및 세부설계 실시 ☞ 2025. ~ 2027. : 다목적 농촌용수개발사업 추진

5		농업기반조성사업

◈ 농업기계화 영농기반을 조성하여 선진과학농업 실현 및

『활력 있는 농업기반』구축

□ 개   요

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)			비고
			계	‘22년	‘22년이후
계		5개 사업	7,716	6,516	1,200
농업기반 시설관리	군내일원	1식	335	335	-
한발대비 용수개발	군내일원	1식	927	927	-
대구획 경지정리	송방리	57ha	1,500	300	1,200
기계화경작로 확․포장	군내일원	7km, 26개소	1,100	1,100	-
수리시설개보수사업	군내일원	16km, 89개소	3,854	3,854	-

□ 추진실적

❍ 농업기반시설관리(지하수 영향조사용역, 저수지 정기점검용역 등) 추진- 255백만원

❍ 한발대비용수개발(관정유지보수,둠벙설치 등) 추진-- 123건 / 737백만원

❍ 대구획경지정리(송방지구) 세부설계 추진 중 --- 57ha / 300백만원

❍ 기계화경작로 확․포장 추진--------------- 53건 / 864백만원

❍ 수리시설개보수사업 추진--------------- 89건 / 3,716백만원

앞으로	☞ 주민 건의사항을 적극 검토·반영하여 추진토록 하고 미완료 사업에 대하여는 연내 마무리

6		도시개발 사업

◈ 청정 청양의 이미지 조성과 도시가로망정비등 주거환경을

개선하여 주민생활 편익 도모

□ 개   요

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘21년	‘22년
계	3개소		9,250	5,850	600	2,800
주공아파트∼구국도 29호간 도로개설	청양읍 송방리	L=545m B=25m	7,650	5,850	-	1,800	‘19.08.∼ ‘22.09.	100
정산도서관 앞 도로개설	정산면 서정리	L=140m B=8m	600	-	600	-	‘21.01.∼ ‘23.05.	50
정산면 서정리 진입도로 개설사업	정산면 서정리	L=500m B=6∼8m	1,000	-	-	1,000	‘21.06.∼ ‘23.12.	0

□ 추진실적 및 계획

주공아파트∼ 구국도29호간 도로개설사업		․2020. 08. : 1차분 공사 착공(장기계속계약 이행) ․2021. 11. : 1차분 공사 준공 ․2022. 03. : 2차분 공사 착공 ․2022. 09. : 2차분 공사 준공(최종)
정산도서관 앞 도로개설사업		․2022. 04. : 공사 재착공 ․2023. 05. : 공사 준공
정산면 서정리 진입도로 개설사업		․2021. 12. : 실시설계용역 완료 ․2022. 08. : 토지보상 완료 ․2022. 10. : 공사 착공 ․2023. 10. : 공사 준공

7		도시재생 사업

◈ 쇠퇴하고 있는 도심환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 도모

◈ 도시재생 활성화 및 도시경쟁력 제고로 살고 싶은 도시조성

【1】 도시재생 뉴딜사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 읍내 3, 4리 일원

❍ 공사기간 : 2023 ∼ 2025(3년)

❍ 사 업 비 : 14,400백만원(국비 8,000, 도비 1,600, 군비 3,800, 기금 1,000)

❍ 사업내용 : 도시재생사업(주거지지원형 A=94,500㎡)

구 분	사업비 (백만원)	사 업 내 용
3개분야	14,400
살고싶은 정주환경조성	2,800	⦁노후주거지 집수리 40호, 지붕개량 20호 ⦁보도 설치 L=250m, 골목길 정비 L=900m
소통 문화거점 조성	6,700	⦁다함께 어울림 센터(4층, 건축면적 240㎡) ⦁어울림공원(1,500㎡), 스토리텔링거리 L=600m
함께하는 공동체 조성	4,900	⦁청춘양성소(3층, 건축면적 150㎡) ⦁노노케어센터(2층, 건축면적 130㎡)

□ 추진실적 및 계획

❍ 2022. 05. : 읍내 3, 4리 도시재생 활성화계획 승인 및 고시

❍ 2022. 06. : 거점시설 3개소 기획용역 착수

❍ 2022. 12. : 거점시설 3개소 기획용역 완료

❍ 2023. 03. : 도시재생사업 실시설계용역 착수 (완료 ’23. 09.)

❍ 2023. 10. : 공사착공(완료 ’25. 12.)

【2】 도시 취약지역 생활여건 개조사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 교월2리 일원

❍ 공사기간 : 2022 ∼ 2023(2년)

❍ 사 업 비 : 5,560백만원(국비 3,701, 도비 476, 군비 1,110, 기타 273)

❍ 사업내용 : 면적(A=172,718㎡)

구 분	사업비 (백만원)	사 업 내 용
3개 분야	5,560
주민안전확보	1,400	⦁CCTV, 옹벽, 화재방지시설 설치
생활인프라 개선	3,100	⦁마을회관 신축, 소방도로 개설, 가스공급시설 설치
주택정비지원	1,060	⦁빈집철거, 주택수리, 슬레이트지붕 개량

□ 추진실적 및 계획

❍ 2021. 10. : 실시설계용역 착수(완료 ’22. 10.)

❍ 2022. 11. : 공사착공(완료 ’23. 12.)

【3】 범죄예방디자인 사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 벽천리 일원(충남도립대학교 앞)

❍ 공사기간 : 2022. 10. ∼ 2023. 05.

❍ 사 업 비 : 510백만원(도비 153, 군비 357)

❍ 사업내용 : 면적(A=96,400㎡)

- 방범시설 : 안심벨, 안심반사경, 지능형 CCTV, 가로등

- 기반시설정비 : 노면도색, 도로표지병, 벽부 안심조명, 안내판

- 주민교류활성화 : 소공원 조성 및 역량강화 교육

□ 추진실적 및 계획

❍ 2022. 04. : 실시설계용역 착수(완료 ’22. 11.)

❍ 2022. 11. : 공사 착공(완료 ’23. 05.)

8		지역균형개발 사업

◈ 소규모 마을 기반시설 및 편익시설 확충으로 주민 삶의 질 향상

◈ 주민 숙원사업 해결로 민원해소 및 지역균형 개발

◈ 관내 노후 마을회관 및 경로당 신·개축 추진으로 주민 복지 향상

□ 개   요

❍ 사 업 비 : 총10,030백만원(도비 295 / 군비 9,735)

❍ 사업기간 : 2022. 01. ∼ 12.

❍ 세부사업내역

(단위 : 백만원)
구 분		사업량	사업비	완료	추진중	진도(%)
총 계		400건	10,030	372건	28건	93%
소규모 지역개발	소 계	291건	8,050	279건	12건	96%
	마을안길포장	100건	2,400	95건	5건	95%
	위험도로개선	10건	300	10건	-	100%
	아스콘 덧씌우기	50건	2,300	48건	2건	96%
	세천정비	110건	2,200	105건	5건	95%
	기반시설 유지보수	10건	300	10건	-	100%
	마을안길 교행차로(주민참여)	10건	250	10건	-	100%
	소규모공공시설 정비계획수립	1건	300	1건	-	100%
마을 시설물 관리	소 계	109건	1,408	93건	16건	85%
	장평리 노인회관 리모델링	1건	200	1건	0건	100%
	마을회관 정비	35건	850	30건	5건	86%
	마을입구 야광안내판 설치	16건	28	16건	0건	100%
	쉼터설치 및 보수 등	15건	200	12건	3건	80%
	버스승강장 설치 및 보수	20건	130	17건	3건	85%
현수막게시대 및 마을게시판 정비		14건	112	11건	3건	79%
정주환경개선사업(도비보조)		8건	460	6건	2건	75%

□ 추진실적

❍ 2022. 05. : 총10,030백만원(400건) 중 9,328백만원(372건) 사업 완료

❍ 2022. 10. : ‘23년 소규모 지역개발사업 실시설계용역 발주

【2】 마을회관 신·개축사업

□ 추진실적 및 계획

사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	추진실적 및 계획
계	5개소	2,240
청양읍 벽천2리 마을회관 개축	121.91㎡	400	· ‘22. 2. : 실시설계용역 완료 · ‘22. 5. : 계약심사 완료 · ‘22. 5. : 공사발주 · ‘22. 11. : 사업완료 예정
화산리 마을회관 신축	132㎡	400	· ‘22. 11. : 실시설계용역 완료 · ‘22. 12. : 공사발주 · ‘23. 5. : 사업완료 예정
덕성리 마을회관 신축	89.82㎡	400	· ‘22. 10. : 실시설계완료 · ‘22. 11. : 공사발주 예정 · ‘23. 5. : 사업완료 예정
운곡면 분회경로당 신축	120.16㎡	320	· ‘22. 1. : 실시설계완료 · ‘22. 3. : 공사발주 · ‘22. 10. : 사업완료
서정1리 마을회관 개축	278.62㎡	720	· ‘22. 4. : 실시설계완료 · ‘22. 9. : 철거공사 발주 · ‘22. 11. : 공사발주 · ‘23. 5. : 사업완료 예정

앞으로	☞ 상갑리 마을회관 개축(40평) / 400백만원 ☞ 화성면 분회경로당 신축(40평) / 500백만원

9		청양군 간판 개선사업

◈ 청양군 상업 대표 거리에 불법적이고 노후된 간판정비로

도심환경 개선과 청양 이미지 제고

□ 개   요

❍ 사 업 명 : 머무르고 싶은 거리 청양읍 중앙로 간판개선사업

❍ 사 업 비 : 총5억원(국비3억, 군비2억)

❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2022. 12.

❍ 사업구간 : 청양군청 앞 ~ 십자로(약750m, 양방향거리)

❍ 사업대상 : 128개업소(건물 51개동)

❍ 사업내용 : 기존간판(벽면, 돌출, 창문이용간판 등) 교체 및 입면개선

□ 추진실적

❍ 2022. 1. ~ 3. : 예산편성 및 주민의견 수렴

❍ 2022. 5. : 평가위원회 구성 및 제안서 평가 등 수행업체 선정

❍ 2022. 6. : 사업착수 ☞ 주민 사업설명회(개별방문 7. 18.)

❍ 2022. 7. ~ 10. : 간판디자인 개발 완료(128개 업소)

☞ 최종 동의 완료 86개소 (간판 제작중 45개업소, 디자인 시안 협의 41개소)

구 분	간판개선사업 디자인 컨설팅 추진 현황
	컨설팅완료	의뢰기관	외부전문가	비고
1차 디자인심의	2022. 08. 12	한국옥외광고센터	순천향대학교 고은희교수	100개 디자인 완료
2차 디자인심의	2022. 09. 06	한국옥외광고센터	순천향대학교 고은희교수
3차 디자인심의	2022. 10. 25	한국옥외광고센터	순천향대학교 고은희교수
공공디자인 심의	2022. 11. 03	충남공공디자인센터 오병찬센터장	청주대학교 정용진교수

앞으로	☞ ‘22. 11 : 디자인 컨설팅 4차(28개업소) ☞ ‘22. 12 : 간판 제작 설치 추진(‘23. 4. 사업완료 예정) ☞ ‘23. 3. : 2024년 행안부 간판개선사업 공모 추진

10		농촌주거환경개선사업

◈ 낡은 주택을 개량하여 주거환경개선 및 정주의욕 고취

◈ 방치된 빈집정비와 슬레이트 지붕재철거로 쾌적한 생활환경 제공

□ 개   요

구 분	사업량 (동)	사업비 (백만원)	지 원 내 용
계	263	604
농촌주택개량	60	-	연면적 150㎡이내 무주택자 (고정연리 2% 또는 변동금리 최대 2억 융자)
농촌빈집정비	55	55	1,000천원/동
슬레이트지붕재철거	148	549	- 슬레이트철거 130동 3,520천원/동 - 지붕개량 5동, 4,369천원/동 - 비주택13동(창고,축사) 5,400천원/동

* 농촌주택개량(융자)사업비는 NH농협은행 국비자금 활용

* 농촌빈집정비사업은 대상자 선정 이후 자가 철거하고 보상금 지급

* 슬레이트지붕재철거는 한국석면안전협회에 위탁 시행

□ 추진실적

❍ 2022. 02. : 농촌주거환경개선사업 공고 및 신청접수

❍ 2022. 05. : 농촌주거환경개선사업 대상선정

❍ 2022. 10. : 농촌주거환경개선사업 추가모집 홍보

구 분	신 청	선 정	비 고
계	316동	254동	10월 말 기준
농촌주택개량	55동	55동	완료
농촌빈집정비	77동	49동	추가모집중
슬레이트지붕재 철거	184동	150동	추가모집중

앞으로	☞ 동절기 이전 사업추진 완료

11		공공임대주택 건립

◈ 다양한 공공임대주택(국민, 영구, 행복) 공급으로 안정적인 주거환경 조성

◈ 초고령사회 선제적 대응여건 조성을 위한 어르신 맞춤형 공공임대주택 건립

□ 개   요

구 분	사업비 (억원)	사업비 부담	세대수	공모 확정	준공 예정
계	880	-	527	-	-
교월1지구	160	10%	120	2016년	2023년
교월2지구	244	15%	180	2017년	2025년
고령자복지주택	276	38.5%	127	2019년	2023년
정산서정지구	200	35%	100	2019년	2025년

□ 추진실적

❍ 교월1지구 : 입주자 모집 신청 및 선발 완료(7. 8. 발표)

❍ 고령자복지주택 : 입주자 모집 신청 및 선발 완료(7. 8. 발표)

❍ 교월2지구 : 토지보상 중

❍ 정산서정지구 : 100세대, 실시설계 중

앞으로	☞ 교월1지구, 고령자복지주택 : 2023. 05. 준공 ☞ 교월2지구 : 2023. 10. 착공 ☞ 정산서정지구 : 2023. 03. 사업계획 승인 완료 (2023. 10.착공)

12		맞춤형 주거급여 지원사업

◈ 기초주거급여 수급자에게 주거급여를 지급하여 주거안정 도모

◈ 임차가구는 임차료지원, 자가가구는 주택수선으로 실질적 주거지원

□ 개   요

❍ 지원대상 : 기준중위소득 46% 이하인 가구

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구	7인가구
기준금액 (원/월)	894,614	1,499,639	1,929,562	2,355,697	2,771,277	3,177,222	3,579,072

□ 추진실적

❍ 임차료(보증금, 임차료) 지원

- 일반·청년가구 : 매월 20일 지급 / 470여명 / 468,865천원

❍ 주택수선(자가)지원 : 한국토지주택공사(LH)위탁 / 35가구 / 250,000천원

앞으로	☞ 2023년 기준중위소득 47% 이하인 가구로 기준 완화 ☞ 급여 기준 완화에 따른 수급자 지원 홍보 강화

13		공공건축사업 추진

◈ 각 부서에서 추진하는 공공건축사업 기획·설계·공사감독 지원

◈ 청양군 디자인자문단(민간전문가) 운영으로 공공건축 완성도 향상

□ 공공건축사업 추진개요

사업기획	➱	사전행정절차추진	➱	설계공모	➱	기본 및 실시설계	➱	착 공	➱	준 공

❍ (건축기획) 건축물 기능, 규모 설정, 예산계획 등 건축기획업무 수행으로 내실있는 공공건축사업 추진

❍ (설계공모) 건축설계공모 추진으로 우수한 디자인의 설계안 선정

❍ (감  독) 설계 및 공사의 감독업무 지원으로 사업추진 완성도 향상

□ 청양군 디자인자문단 운영

❍ (구  성) 민간전문가 4인

❍ (역  할) 청양군 공공건축 사업의 기획 및 설계, 시공 등 단계별 자문 수행 및 설계공모 참여로 공공건축물 디자인 향상

⇒ 가족문화센터 등 5개 사업 자문 및 설계공모 참여 中 (22년도)

□ 사업별 추진실적

사 업 명	규 모	사업비 (백만원)	추진실적 및 향후 추진계획	주관부서
가족문화센터 및 평생학습관	8,418㎡	30,338	·10월 : 기본 및 실시설계용역 완료 ·11월 : 조달청 공사원가 사전검토 및 발주의뢰	복지정책과 외 2
			(향 후) ‘22. 12. : 공사 착수
보건의료원 주차타워	2,074㎡	4,200	·4월 : 설계공모 완료 ·5월 ~ 11월 : 실시설계 용역 中	보건의료원
			(향 후) ‘22. 12. : 공사 발주
청양군 다목적회관	2,454㎡	6,000	·2월 : 설계공모 완료 ·3월 ~ 12월 : 실시설계 용역 中	행정지원과
			(향 후) ‘23. 1. : 공사 발주
정산 다목적복지관 (복지관, 체육관)	5,710㎡	28,725	· 4월 : 사업계획 사전검토 완료 · 8월 : 道 공공건축심의 완료 · 10월 : 건축설계공모 공고	복지정책과 외 1
			(향 후) ‘23. 1. : 설계공모 완료 및 설계용역 착수
블루쉽하우스	390㎡	1,100	· 6월 : 공사 준공	미래전략과
정산 의용소방대청사	396㎡	1,200	· 5월 : 공사 재개 (10월 공정률 50%)	안전재난과
			(향 후) ‘22. 12. : 공사 준공
정산 보건지소	608㎡	2,100	· 5월 : 道 공공건축심의 완료 · 6월 : 기획업무용역 완료 · 9월 : 기본 및 실시설계용역 착수	보건의료원
			(향 후) ‘22. 12 : 설계완료 및 공사착수
내일이U센터 (청년지원센터 등 청년공유시설)	736㎡	3,540	· 6월 : 건축기획용역 착수 · 10월 : 사업계획 사전검토 수행	미래전략과
			(향 후) ‘22. 12. : 공공건축심의 수행
자원순환처리장 사무실 신축	470㎡	2,300	· 7월 : 君 공공건축심의 완료 · 8월 : 기획업무용역 완료 · 9월 : 기본 및 실시설계용역 착수	환경보호과
			(향 후) ‘23. 4. : 설계용역 완료
청년 셰어아우스 (함께살아U)	920㎡	6,180	· 9월 : 공공건축 사업계획 수립 · 10월 : 건축기획용역 발주	미래전략과
			(향 후) ‘23. 1. : 공공건축심의 수행
청소년 복합힐링공간 (담다)	1,980㎡	12,850	· 10월 : 공공건축 사업계획 수립	복지정책과
			(향 후) ‘22. 11. : 사업부지 검토

앞으로	☞ 설계가 완료되어 착수하는 각종 공사에 대하여 민간전문가와 협업을 통한 관리‧감독 강화로 부실시공 및 안전사고 예방 도모 ☞ 신규사업에 대한 최초 소요예산 산출, 부지선정에서부터 사전검토 지원으로 사업의 문제점 발생 최소화

❖ 타 기관 사업 추진 현황

【1】도로사업 (대전지방국토관리청)

▣ 서부내륙 고속도로 건설사업 (고속국도)

❍ 위   치 : 경기 평택～청양～부여~전북 익산

❍ 사업기간

- 1단계 : 2019년 ~ 2024년(평택~예산~청양~부여)

- 2단계 : 2029년 ~ 2034년(부여~익산)

❍ 사 업 량 : 총 연장 L=137.7km, B=23.4m 4차로

- 1단계 : L=94.3km(평택-예산-청양-부여), 2단계 : L=43.4km(부여-익산)

※ 청양군 연장 : L=17.3km

❍ 총사업비 : 2조 6,694억원

- 공사비 : 1조 8,946억원(1단계 1조 3,757억원, 2단계 5,189억원)

- 조사/설계비 : 755억원       - 부대비 등 : 1,927억원

- 보상비 : 5,066억원

❍ 추진사항

- 2014. 11. 30. : 민간투자사업 적격성 조사완료

- 2015. 05. 06. : 우선협상대상자 지정(포스코건설)

- 2019. 12. 03. : 실시계획 승인

- 2019. 12. 09. : 공사착공

구분	추 진 현 황	보상진행률
6공구	용두리 : 터널 발파 완료(내부 배수로 작업) 온직리 : 남양1터널 갱구 조성(11월발파예정)	100%
7공구	용천리 : 터널 발파 완료(내부 배수로 작업) 금정리 : 남양3터널 갱구 조성(9월 발파) 교량 15개소 중 11개소 추진 중	98% (분묘 8개소 수용재결)
8공구	양사리 : 양사2리 마을회관 앞 수로박스 설치 비봉3교(완료),4교(슬라브타설)공사 중 문화재지표조사 발굴	100%

▣ 정산 ∼ 신풍 간 국도 확ㆍ포장사업 (위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 정산면 ~ 공주시 신풍면

❍ 사업기간 : 2018.  9. 10. ∼  2023. 8.(공정률 50%)

❍ 사 업 량 : L= 12.8km, B=10.5m, (우리군 6.3km)

❍ 사 업 비 : 511억원(시설비 371, 보상비 94, 기타 46)

- 기투자 242억원 / 2022년 193억원 / 이후 76억원

❍ 시 공 사 : 선엔지니어링 외 2개사

❍ 감 리 사 : 내경엔지니어링 외 2개사

❍ 진행사항

- 2018. 09. : 공사 착공

- 2020. 06. ~ 10. : 감정평가실시(청양)

- 2020. 11. ~ 2021. 11. : 보상절차추진(97% 완료)

- 2021. 11. : 청양군 구간 공사착수(솔티터널 부)

- 2023.  4. : 공사 준공

【2】도로사업 (충청남도 종합건설사업소)

▣ 정산지구 위험도로 개선사업 (위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 정산면 학암리 일원

❍ 사 업 량 : L=1.0km, B=13.0~15.0m 도로확포장

❍ 총사업비 : 8,000백만원

- 기투자 1,905 / 2022년 2,580 / 2023년 이후 3,515

❍ 시 공 사 : 일산종합건설(주) (논산)

❍ 사업기간 : 2018. 11. ∼  2023. 12. (공정률 70%, 보상 99%)

❍ 추진사항 및 계획

- 2019. 12. : 실시설계 준공

- 2020. 08. 04. : 공사착공

(도로확장부, 애경아파트 맞은편 사면 토공 작업)

- 2023. 08. : 공사준공

▣ 장평지구 위험도로 개선사업 (위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 장평면 은곡리 ~ 미당리 일원

❍ 사 업 량 : L=1.39km, B=19.5m, 도로확포장

❍ 총사업비 : 5,500백만원

- 기투자 1,437 / 2022년 3,980 / 2023년 이후 85

❍ 시 공 사 : 신화종합건설(주)

❍ 사업기간 : 2019. 03. ∼  2022. 12. (공정률 55%)

❍ 추진사항 및 계획

- 2019. 12. : 공사착공(공사중지 중 비탈면 안정성 검토완료)

- 2022. 06. : 4차분 공사 착공(본격적 공사시공)

- 2023. 04. : 공사준공

▣ 청양∼신양IC 간 도로 확ㆍ포장사업 (국지도70호)

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 ∼ 예산군 신양면(신양IC)

❍ 사 업 량 : L=16.2km, B=10.0m 선형개량 (우리군 14.7km)

❍ 사 업 비 : 52,700백만원(공사비 38,700, 경비 및 보상비 14,000)

- 기투자 47,225 / 2022년 2,913 / 2021년 이후 5,085

❍ 사업기간 : 2017. 05. ∼ 2023. 06. (공정률 65%)

❍ 시 공 사 : 흥화건설 외 2개사

❍ 감 리 사 : 한맥기술 외 1개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2017. 05. : 공사착공

(광암, 백천교, 효제1 교차로 완료, 미량, 위라2, 효제리 기층)

- 2023. 06. : 공사준공

▣ 효제리~위라리 위험도로 개량공사(국지도96호)

❍ 위    치 : 청양군 운곡면 효제리 효제교차로 일원(국지도96호)

❍ 사 업 량 : 연장=0.74㎞, 폭=10.0m

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(공사비 3,000)

- 기투자 1,200 / 2022년 100 / 2023년 이후 1,700

❍ 사업기간 : 2021. 01. ~2023. 12.

❍ 설 계 사 : 강호엔지니어링

❍ 추진사항 및 계획

- 2021. 10. : 실시설계용역 착수(12월 주민설명회 완료)

▣ 화성∼장곡 간 도로확‧포장 사업 (지방도609호)

❍ 위    치 : 청양군 화성면 화암리 ∼ 보령시 청라면 장현리

❍ 사 업 량 : L=2.4km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 13,306백만원(공사비 10,384, 경비 및 보상비 2,922)

- 기투자 900 / 2022년 500 / 2023년 이후 11,906

❍ 사업기간 : 2018. 06. ∼  2024. 12.

❍ 실시설계 용역사 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 06. : 실시설계용역 착수  - 2020. 04. : 실시설계완료

- 2021. 12. : 보상절차진행중(감정평가 완료)

- 2022.  1. ~ 현재 : 손실보상 협의중

▣ 구룡∼용두 간 도로확‧포장 사업 (지방도610호)

❍ 위    치 : 청양군 남양면 구룡리 ∼ 용두리

❍ 사 업 량 : L=1.3km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 10,795백만원(공사비 8,321, 경비 및 보상비 2,474)

- 기투자 609 / 2022년 800 / 2023년 이후 9,686

❍ 사업기간 : 2018. 06. ∼ 2025. 12.

❍ 실시설계 용역사 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 06. : 실시설계용역 착수

- 2020. 04. : 실시설계완료

- 2021. 08. : 마을설명회 실시

- 2022. 10. : 보상 협의 진행 중

▣ 규암∼청남 간 도로확‧포장 사업(지방도625호)

❍ 위    치 : 청양군 청남면 인양리 ~ 부여군 규암면 호암리

❍ 사 업 량 : L=2.3km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 30,024백만원(공사비 24,466, 보상비 5,558)

- 기투자 23,802 / 2022년 3,518 / 2023년 이후 2,704

❍ 사업기간 : 2018. 03. ∼ 2023. 04. (공정률 90%)

❍ 시 공 사 : 신진종합건설㈜ 외 2개사

❍ 건설사업관리 : 도화엔지니어링 외 1개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 03. : 공사 착공 / 2023. 04. : 공사 준공

▣ 광시~운곡 지방도 도로확‧포장 사업 (지방도604호)

❍ 위    치 : 예산군 광시면 ~청양군 운곡면(지방도604호)

❍ 사 업 량 : 연장=6.74㎞, 폭=10.0m (2차로)

❍ 총사업비 : 46,500백만원(공사비 39,100, 보상비 7,400등 )

- 기투자 290 / 2022년 700 / 2023년 이후 45,510

❍ 설계기간 : 2021. 10. ∼ 2025. 12.

❍ 실시설계 용역사 : ㈜경호엔지니어링 외 2개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2021. 09. : 실시설계 용역 착수

- 2022. 07. : 관계기관 협의

- 2023. 10. : 실시설계용역 완료

【3】도로사업 (종합건설사업소 공주지소)

▣ 광금도로 선형개량사업 (지방도645호)

❍ 위    치 : 청양군 대치면 광금리 일원

❍ 사 업 량 : L=580m, B=12.5m

❍ 총사업비 : 3,266백만원 (공사비 3,032, 보상비 등 234)

- 기투자 1,496 / 2022년 1,770

❍ 사업기간 : 2021. 1. ∼  2023. 2.

❍ 공 정 율 : 80%

❍ 시 공 사 : 대륙건설산업㈜

❍ 추진실적 및 계획

- 2019. 12. : 공사착공(토공 및 일부구간 포장 작업 진행중)

- 2023. 02. : 공사 준공

▣ 장평사거리 회전교차로 설치공사 (국도39호)

❍ 위    치 : 청양군 장평면 중추리 일원

❍ 사 업 량 : 회전교차로 1개소

❍ 총사업비 : 1,000백만원

- 기투자 480 / 2022년 520

❍ 공사기간 : 2020. 12. ∼  2022. 8.

❍ 공 정 율 : 60%

❍ 시 공 사 : ㈜도시종합건설

❍ 추진실적 및 계획

- 2020. 12. : 공사착공(경계석 타설 완료)

- 2022. 10. : 공사준공

▣ 금정삼거리 회전교차로 설치공사 (국도29호)

❍ 위    치 : 청양군 남양면 금정리 일원

❍ 사 업 량 : 회전교차로 1개소

❍ 총사업비 : 300백만원(2022년)

❍ 사업기간 : 2021. 9. ∼  2024. 12.

❍ 공 정 율 : 10%

❍ 용 역 사 : 수성이앤씨

❍ 추진실적 및 계획 :

- 2021. 09. : 실시설계 용역 착수

- 2022. 10. : 실시설계 용역 완료

- 2023. 01. : 공사 착공

- 2024. 12. : 공사 준공

▣ 지방도606호 갓길정비공사(1차, 2차)

❍ 위    치 : 청양군 남양면 용마리 98번지 일원(지방도606호)

(1차 대봉리~용마리, 2차 용마리~흥산리)

❍ 사 업 량 : 갓길정비공사 1식(L=2.8㎞, B=2.0m)

❍ 총사업비 : 1,060백만원

- 기투자 500 / 2022년 300 / 2023년 이후 260

❍ 공사기간 : 2021. 6. ∼  2023. 12.

❍ 시 공 사 : ㈜로하스건설(1차분)

❍ 추진실적 및 계획

- 2021. 06. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- 2022. 07. : 1차분 공사 완료 및 2차분 공사 발주

- 2023. 03. : 공사 준공

▣ 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사

❍ 위    치 : 청양군 남양면 대봉리 64번지 일원(지방도606호)

❍ 사 업 량 : 오르막차로 설치(L=1.0㎞ B=3.25m)

❍ 총사업비 : 1,500백만원(공사비 1,300, 보상비 등 200)

- 기투자 80 / 2022년 520 / 2023년 이후 900

❍ 사업기간 : 2021. 04. ~ 2023. 12.(실시설계 용역 중)

❍ 용 역 사 : ㈜한경기술공사

❍ 추진실적 및 계획

- 2021. 04. : 실시설계 용역 착수

- 2023. 04. : 공사 발주예정

【4】농촌기반시설사업 (한국농어촌공사)

▣ 장평지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 장평·청남·정산·운곡면 일원

❍ 총사업비 : 3,699백만원(기시행 1,049, 금회 930, 향후 1,720)

❍ 사업기간 : 2020. 12.  ∼ 2023. 12. 20.

❍ 주요공사 : 구조물(개거, 암거) 교체 L=6,501m

▣ 동강지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 동강리 일원

❍ 총사업비 : 3,110백만원(기시행 1,358, 금회 1,752)

❍ 사업기간 : 2021. 03.  ∼ 2022. 12. 20.(22년준공)

❍ 주요공사 : 배수장 2식(동강1, 동강2), 부대공사 1식

▣ 중산지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 중산리 일원

❍ 총사업비 : 3,150백만원(기시행 1,354, 금회 1,796)

❍ 사업기간 : 2021. 03.  ∼ 2022. 12. 20.(22년 준공)

❍ 주요공사 : 배수장 2식(중산1, 중산2), 부대공사 1식

▣ 장평2지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 장평면 분향리 일원

❍ 총사업비 : 4,000백만원(기시행 90, 금회 850, 향후 3,080)

❍ 사업기간 : 2022. 03.  ∼ 2025. 12. 20.

❍ 주요공사 : 용·배수로 5조, 부대공사 1식

▣ 인양5지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 인양리 일원

❍ 총사업비 : 6,900백만원(기시행 80, 금회 1,136, 향후 5,684)

❍ 사업기간 : 2022. 03.  ∼ 2024. 12. 20.

❍ 주요공사 : 배수장 1식, 부대공사 1식

▣ 광암지구 수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 청양군 운곡·비봉·정산·목면 일원

❍ 총사업비 : 4,150백만원(기시행 80, 금회 1,020, 향후 3,050)

❍ 사업기간 : 2022. 03.  ∼ 2024. 12. 20.

❍ 주요공사 : 취입보, 전동수문, 어도설치

▣ 적곡지구 배수개선사업

❍ 위    치 : 청양군 청남면 인양·대흥리 일원

❍ 총사업비 : 15,720백만원(금회 50, 향후 15,670)

❍ 사업기간 : 2022. 05. ~ 2026. 12.

❍ 주요공사 : 배수장, 배수문 보강 및 배수로 5조 5.5㎞정비

▣ 시전지구 다목적농촌용수개발사업

❍ 위    치 : 청양군 대치면 시전·수석·농소리 일원

❍ 총사업비 : 14,499백만원(기시행 556, 금회 2,500, 향후 11,393)

❍ 사업기간 : 2021. 03. ∼ 2026. 12. 20.

❍ 주요공사 : 저수지 조성, 이설도로 2조 1.1㎞, 용수로 5조 6.9㎞

▣ 공기관(농어촌공사) 대행사업비 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비	비 고
계		4지구	2,850
송방지구 대구획경지정리사업	청양읍 송방리	수혜면적 51ha	1,500	총사업비 1,500 (금회 : 300)
청남지구 용배수로정비사업	청남면 중산리등	용배수로 17조, L=4,374km	400	총사업비 800 (금회 : 400)
광암지구 수해피해위험지역정비사업	운곡면 광암리	배수로정비 L=1.73km	450
수리시설개보수사업	청양 군내	용배수로 개보수 7개소	500