건설정책과

	목 차

□ 2023년 건설정책과 운영성과
□ 2023년 주요업무 추진실적
1. 지역안전 확보를 위한 가로등 및 보안등 관리
2. 도로확‧포장 및 유지관리 사업
3. 스마트복합쉼터 조성사업
4. 청남지구 농촌용수개발사업
5. 농업기반조성사업
6. 지역균형개발 사업
7. 마을시설물 관리
8. 청양군 간판 개선사업
❖ 타 기관 사업 추진 현황

2023년 건설정책과 운영성과

□ 금년도에는

❍ 체계적인 도로망 확충 및 안전한 도로 환경 조성

- 스마트복합쉼터 조성사업, 회전교차로 설치 등

❍ 집중호우 등 기후변화에 대응하는 농업기반시설 확충

- 한발대비 용수개발사업, 수리시설 개·보수사업 등

❍ 마을시설물 관리 및 주민숙원사업 해결로 삶의 질 향상

- 소규모 지역개발 사업, 정주환경 개선사업

❍ 가로등(보안등) 유지관리 및 옥외간판 정비로 안전하고       쾌적한 생활환경 조성

- 보안등 LED전환사업, 간판 개선사업 등

□ 2024년에는

❍ 공정한 건설문화 정착과 건설산업 활성화 방안 모색

❍ 서부내륙고속도로 건설에 따른 발전잠재력 적극 모색

❍ 협소한 도로 확장으로 주민편의 증대

❍ 농업기계화 조성으로 선진과학농업 실현

- 다목적 농촌용수개발사업, 저수지 보수·보강 등

❍ 지역에 활력을 불어넣을 맞춤형 지역개발사업 적극 추진

1		지역안전 확보를 위한 가로등 및 보안등 관리

□ 가로등(보안등)의 선제적 대응과 신속한 정비로 주민불편 해소

□ 노후 보안등 LED 교체로 전기료 절감 및 에너지 효율성 증대

□ 현    황

(단위 : 등)

구분	계	청양	운곡	대치	정산	목	청남	장평	남양	화성	비봉
계	8,087	1,463	592	984	1,117	604	536	641	820	591	739
보안	7,179	1,279	592	706	928	477	536	641	820	591	609
가로	908	184	-	278	189	127	-	-	-	-	130

□ 추진실적

(단위 : 천원)

사업명	예산액	건수	사업비	비고
계	630,000		587,270
읍면 가로등 신규	120,000	182등	119,567
노후 가로등 교체	100,000	130등	82,175
고장 가로등 수리	120,000	1,158등	119,982	재료비
보안등 LED 교체	200,000	1,003등	195,171
한전 부적합 가로등 보수	90,000	23개소	70,375

향후 계획		□ 가로등 및 보안등 유지보수 철저 □ 2024년 보안등 LED 교체공사 3년차(청양읍,청남면) □ 한국전기안전공사 부적합 가로등 개수공사

2		도로확‧포장 및 유지관리 사업

◈ 도로 확·포장사업으로 교통사고 예방과 주민편익 증진

◈ 교통약자를 위한 안전시설물을 설치하여 보행불편해소

【1】 군도 및 농어촌도로 정비사업

【진행사업】

사 업 명	위치	사업량	사 업 비 (백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘23년	‘24년이후
계		3개 사업	12,200	3,810	3,700	4,690
소계(군도)		1개 사업	4,800	100	1,600	3,100
백곡리 군도9호 도로확포장	정산면 백곡리	L=2,000m, B=8.5m	4,800	100	1,600	3,100	‘22.01.∼ ‘25.12.	5%
소계(농어촌도로)		2개 사업	7,400	3,710	2,100	1,590
매산리~군량리 면도 102호 도로확포장	화성면 매산리,청양읍 군량리	L=3,400m, B=8.5m	5,500	2,910	1,500	1,090	‘21.09.∼ ‘24.09.	70%
적누리 리도 205호 도로확포장	청양읍 적누리	L=900m, B=6.5m	1,900	800	600	500	‘22.01.∼ ‘25.06.	10%

□ 그동안 추진실적 및 추진계획

백곡리 군도9호 도로확포장		․2021. 11. : 실시설계용역 착수(완료 ‘23. 06.) ․2023. 11. : 공사 착공 ․2025. 12. : 공사 준공예정
매산리~군량리 면도102호 확포장		․2021. 08. : 실시설계용역 완료 ․2021. 09. : 공사 착공 ․2024. 09. : 공사 준공예정
적누리 리도205호 확포장		․2021. 11. : 실시설계용역 착수(완료 ‘23. 06.) ․2023. 06. : 공사 착공 ․2025. 06. : 공사 준공예정

【계획사업】

사 업 명	위치	사업량	사 업 비 (백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	기투자	‘24년	‘25년이후
계		6개 사업	23,200	660	2,100	20,440
소계(군도)		1개 사업	18,000	470	-	17,530
군도 5호 도로개량	청양읍 정좌리, 구룡리	L=4,500m, B=10m	18,000	470	-	17530	‘24.01.∼ ‘26.12.	0%
소계(농어촌도로)		5개 사업	5,200	190	2,100	2,910
비봉면 양사리 리도 201호 확포장	비봉면 양사리	L=1,700m, B=8.5m	3,800	190	700	2,910	‘24.01.∼ ‘25.12.	0%
운곡면 위라리 리도 201호 정비	운곡면 위라리	L=400m, B=6.5m	600	-	600	-	‘24.01.∼ ‘24.12.	0%
남양면 봉암리 농도 305호 정비	남양면 봉암리	L=150m, B=4.0m	200	-	200	-	‘24.01.∼ ‘24.12.	0%
정산면 덕성리 리도 208호 정비	정산면 덕성리	L=100m, B=0.6m	100	-	100	-	‘24.01.∼ ‘24.12.	0%
상습결빙구간 예고시스템 설치	대치면 광대리, 정산면 마치리	보안카메라 설치 4개소	500	-	500	-	‘24.01.∼ ‘24.12.	0%

□ 그동안 추진실적 및 추진계획

군도 5호 도로개량		․2023. 11. : 실시설계용역 착수(완료예정 ‘24. 10.) ․2024. 11. : 공사 착공 ․2026. 12. : 공사 준공예정
비봉면 양사리 리도 201호 확포장		․2023. 11. : 실시설계용역 착수(완료 ‘24. 10.) ․2024. 10. : 공사 착공 ․2025. 12. : 공사 준공예정
운곡면 위라리 리도201호 정비		․2023. 11. : 실시설계용역 착수(완료 ‘24. 03.) ․2024. 04. : 공사 착공 ․2024. 12. : 공사 준공예정
남양면 봉암리 농도305호 정비		․2023. 11. : 실시설계용역 착수(완료 ‘24. 03.) ․2024. 04. : 공사 착공 ․2024. 12. : 공사 준공예정
정산면 덕성리 리도208호 정비		․2023. 11. : 실시설계용역 착수(완료 ‘24. 03.) ․2024. 04. : 공사 착공 ․2024. 12. : 공사 준공예정
상습결빙구간 예고시스템 설치		․2024. 03. : 공사 착공 ․2024. 06. : 공사 준공예정

【2】 충남 소방복합시설 기반조성사업

사업명	위치	사업량	사 업 비 (백만원)				사업 기간	공정율
			계	기투자	‘23년	‘24년이후
충남소방복합시설 기반조성	비봉면 록평리	1식	6,800	4,800	2,000	-	‘19.05. ∼ ‘24.03.	80%

□ 그동안 추진실적 및 추진계획

충남소방 복합시설 기반조성사업		․2019. 05. : 실시설계 용역 착수(완료 ‘21. 06.) ․2021. 10. : 공사 착공 ․2024. 03. : 공사 준공

【3】 어린이 및 보호구역 정비사업

사업명	위치	사업량	사 업 비 (백만원)	사업 기간	비 고
보호구역 유지관리	군내일원	어린이 1개소, 노인 5개소	420	‘23.01. ∼ ‘23.12.

□ 그동안 추진실적 및 추진계획

어린이 및 노인보호구역 정비사업		․2023. 01. : 실시설계용역 착수(완료 ‘23. 05.) ․2023. 06. : 공사착공(완료 ‘23. 09.)

【4】 회전교차로 설치사업

사 업 명	위 치	사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	비고
용천사거리 회전교차로 설치사업	비봉면 용천리	회전교차로 1식	400	‘22.01. ∼ ‘23.5.	준공
청남삼거리 회전교차로 설치사업	청남면 청소리	회전교차로 1식	600	‘23.01. ∼ ‘23.12.

□ 그동안 추진실적 및 추진계획

용천사거리 회전교차로		․2022. 05. : 공사착공 ․2023. 05. : 공사준공
청남삼거리 회전교차로		․2023. 05. : 실시설계용역 완료 ․2023. 06. : 공사 착공 (완료‘23. 12.)

3		스마트복합쉼터 조성사업

◈ 졸음쉼터, 지역홍보관 및 로컬푸드 판매장 등을 설치하여 교통사고를 예방하고, 지역 일자리 창출과 경제 활성화 도모

□ 개   요

❍ (위    치) 화성면 구재리 179번지 일원

❍ (기    간) 2021년 ~ 2024년(3년간)

❍ (사 업 비) 4,670백만원(국비 2,000 / 군비 1,500 / 기타 1,170)

❍ (사업내용) 지역홍보관, 주차장, 화장실, 조경 등 설치 (부지면적 13,538㎡)

□ 추진실적

❍ 2022. 03. : 공모사업 선정

❍ 2022. 07. : 사업추진 관련 MOU체결

❍ 2023. 02. : 건축기획(스마트쉼터 및 화장실) 용역 착수 (완료 `23. 05.)

❍ 2023. 04. : 공공건축 심의 (청양군 도시건축과)

❍ 2023. 04. : 토목 및 조경 설계착수

❍ 2023. 05. : 건축 관련 설계공모 (완료 `23. 07.)

❍ 2023. 07. : 건축 관련 실시설계 착수(완료예정 ‘24. 01.)

❍ 2023. 10. : 도로관리청 진출입로 협의

❍ 2023. 10. : 진출입로 및 교통성평가 용역 착수(완료예정 ‘24. 01.)

향후 계획		□ ‘24. 03. : 토목 및 조경공사 발주 □ ‘24. 12. : 토목 및 조경공사 준공

4		청남지구 농촌용수개발사업

□ 금강변 일원 시설영농구역에서 생산되는 농작물의 품질

향상을 위한 용수체계구축

□ 개   요

❍ (위    치) 청양군 청남면, 장평면(수혜면적 735ha)

❍ (기    간) 2023년 ~ 2027년(5년간)

❍ (사 업 비) 37,700백만원(국비 80% / 군비 20%)

❍ (사업내용) 양수장 및 정수 ․ 가압장 1개소, 급수관로 105조 49.8㎞

□ 추진실적

❍ 2022. 12. :‘23년 청남지구 논범용화용수공급 기본조사지구(3억원) 선정

❍ 2023. 04. : 논범용화용수공급사업 신규 기본계획지구 선정

❍ 2023. 05. : 농식품부 담당자 현장 방문(청남면)

❍ 2023. 07. : 기본계획수립 용역 착수(농어촌공사 충남본부)

❍ 2023. 08. : 중앙부처 방문 건의(‘24년 착수지구 선정 건의)

❍ 2023. 11. : 기본계획수립용역 중간보고회 및 선진지견학

향후 계획		□ 2024. 07. : 기본계획 완료 및 승인(충남도청) □ 2024. 07. : 세부설계지구 신청(농어촌공사→ 충남도청→ 농식품부) □ 2024. 07. : 착수지구 선정 및 세부설계 착수 ➠ 세부설계지구 및 착수지구로 선정될 수 있도록 적극 건의

5		농업기반조성사업

□ 농업기계화 영농기반을 조성하여 선진과학농업 실현 및

『활력 있는 농업기반』 구축

□ 개   요

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)			비고
			계	‘23년	‘23년이후
계		5개 사업	9,499	8,999	500
농업기반 시설관리	군내일원	1식	430	430	-
한발대비 용수개발	군내일원	1식	2,315	2,315	-
대구획 경지정리	송방리	57ha	1,200	700	500
기계화경작로 확․포장	군내일원	7km, 26개소	1,700	1,700	-
수리시설개보수	군내일원	16km, 89개소	3,854	3,854	-

□ 추진실적

❍ 농업기반시설관리(지하수 영향조사용역, 저수지 정기점검용역 등) 추진 - 430백만원

❍ 한발대비용수개발(관정유지보수,둠벙설치 등) 추진-- 175건 / 2,080백만원

❍ 대구획경지정리(송방지구) 추진 ---------- 51ha / 700백만원

❍ 기계화경작로 확․포장 추진--------------- 51건 / 1,530백만원

❍ 수리시설개보수사업 추진--------------- 123건 / 3,400백만원

향후 계획		□ 주민 건의사항을 적극 검토·반영하여 추진토록 하고 미완료 사업에 대하여는 연내 마무리

6		지역균형개발 사업

□ 소규모 기반시설 및 편익시설 확충으로 주민 삶의 질 향상

□ 주민 숙원사업 해결로 민원해소 및 지역균형 개발

□ 개   요

❍ 사 업 비 : 총9,705백만원(도비 344 / 군비 9,361)

❍ 사업기간 : 2023. 01. ∼ 12.

❍ 세부사업내역

(단위 : 백만원)
구 분		사업량	사업비	완료	추진중	진도(%)
총 계		341건	9,705	325건	16건	95%
소규모 지역 개발	소 계	332건	9,018	317건	11건	98%
	마을안길포장	110건	2,500	105건	5건	95%
	위험도로개선	10건	300	10건	0건	100%
	아스콘 덧씌우기	40건	2,400	40건	0건	100%
	세천정비	150건	2,800	140건	10건	93%
	기반시설 유지보수	10건	300	10건	0건	100%
	마을안길교행차로(주민참여)	10건	200	10건	0건	100%
	어재울 당산나무 주변 정비사업(주민참여)	1건	28	1건	0건	100%
	소규모공공시설 정비계획수립(2차분)	1건	490	1건	0건	100%
정주환경개선사업(도비보조)		9건	687	8건	1건	88%

□ 추진실적 및 추진계획

❍ 2023. 05. : 총9,705백만원(319건) 중 7,055백만원(250건) 사업 완료

❍ 2023. 06. :‘23년 소규모 지역개발(2차) 하반기 사업대상지 발주

❍ 2023. 07~08. :‘24년 소규모 지역개발사업 대상지 조사

❍ 2023. 11. : 총9,705백만원(341건) 중 9,345백만원(325건) 사업 완료

❍ 2023. 10. :‘24년 소규모 지역개발사업 용역발주

❍ 2023. 12. :‘23년 사업 완료

7		마을시설물 관리

□ 관내 마을회관, 경로당 신축⦁유지보수로 주민불편

해소 및 주민 복지 증진 및 삶의 질 향상

□ 개   요

❍ 사 업 비 : 3,180백만원(도비 675 / 군비 2,505)

❍ 사업기간 : 2023. 01. ∼ 12.

❍ 사업내역

(단위 : 백만원)
구 분		사업량	사업비	비고
총 계		113건	3,180
마을시설물 관리	소 계	111건	2,280
	마을회관 정비(보수, 리모델링 등)	23건	1,830
	쉼터설치 및 보수	28건	200
	버스승강장 설치 및 보수	15건	130
	마을입구 야광안내판(주민참여)	45건	120
민간자본보조	소 계	2건	900
	화성면 분회경로당 신축	1건	500
	대치 상갑리 회관[보수+공동급식시설]	1건	400

□ 추진실적 및 추진계획

❍ 2023. 5. : 총3,180백만원(113건) 중 1,981백만원(88건) 사업완료

❍ 2023. 8.~11. : 하반기 마을시설물 관리사업 대상지조사 및 사업추진

❍ 2023. 12. : 총3,180백만원(113건) 중 2,280백만원(111건) 사업완료

구 분	공사량	공사비	착공					준공
			2월	3월	6월	7월	10월	7월	9월	12월
계	6건	2,842
장평 화산2리 회관 [신축]	148㎡ (44평)	392	○						◉ 준공
정산 덕성1리 회관 [신축]	95.58㎡ (28평)	343		○					◉ 준공
정산 서정1리 회관 [개축]	278.62㎡ (84평)	707			○					○
청남 왕진1리 회관 [개축]	101㎡ (30평)	500					○			○
화성 분회경로당 [신축]	136.02㎡ (40평)	500				○		‘24. 4. 준공
대치 상갑리 회관 [보수+공동급식시설]	130㎡ (40평)	400	‘24. 2. 공사착공(23. 12. 공사발주)

8		청양군 간판 개선사업

□ 청양군 상업 대표 거리에 불법적이고 노후된 간판

정비로 도심환경 개선과 청양 이미지 제고

□ 개   요

❍ 사 업 명 : 품격있는 거리 조성을 위한 청양읍 중앙로 간판개선사업

❍ 사 업 비 : 총5억원(국비2.5억, 군비2.5억)

❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.

❍ 사업구간 : 십자로 ~ 시내버스터미널 방향

❍ 사업대상 : 120개업소(건물 44개동)

❍ 사업내용 : 기존간판(벽면, 돌출, 창문이용간판 등) 교체 및 입면개선

□ 추진실적 및 추진계획

❍ 2023. 01. : 사업대상지 현장조사 및 자료 수집

❍ 2023. 03. : 주민의견 수렴

❍ 2023. 03. ~ 05. : 제안서 평가 및 협상에 의한 계약

❍ 2023. 05. 31. : 사업착수

❍ 2023. 07. ~ 11. : 디자인 컨설팅 7회 추진

☞ 한국옥외광고센터 3회, 외부전문가 4회

❍ 2023. 11. : 옥외광고정비 시범구역 지정

❍ 2023. 12. : 간판개선사업 40개소 정비완료(공정율 33%)

❍ 2024. 03. : 간판개선사업 120개소 전체 정비완료

❖ 타 기관 사업 추진 현황

【1】도로사업 (대전지방국토관리청)

▣ 서부내륙 고속도로 건설사업(고속국도)

❍ 위   치 : 경기 평택∼청양∼부여∼전북 익산

❍ 사업기간

- 1단계 : 2019년 ∼ 2024년(평택∼예산∼청양∼부여)

- 2단계 : 2025년 ∼ 2030년(부여∼익산)

❍ 사 업 량 : 총 연장 L=137.7km, B=23.4m 4차로

- 1단계 : L=94.3km(평택∼예산∼청양∼부여), 2단계 : L=43.4km(부여∼익산)

※ 청양군 연장 : L=17.3km

❍ 총사업비 : 2조 6,694억원

- 공사비 : 1조 8,946억원(1단계 1조 3,757억원, 2단계 5,189억원)

- 조사/설계비 : 755억원       - 부대비 등 : 1,927억원

- 보상비 : 5,066억원

❍ 추진사항 및 계획

- 2019. 12. 03. : 실시계획 승인

- 2019. 12. 09. : 공사착공(전체공정율 60%)

- 2024. 12. : 공사준공

구분	터널	교량	추진사항
계	8 소 (완료2)	25개소 (완료11)
6공구	2개소 (완료1)	6개소 (완료3)	터널	- 완료 1(남양2), 공사중 1(남양1)
			교량	- 완료 3(남양2, 남양3, 매암천), 공사중 3(남양1, 온직천, 구룡천)
7공구	5개소 (완료1)	14개소 (완료5)	터널	- 완료 1(비봉), 공사중 4(남양3, 장승, 청양1,2생태)
			교량	- 완료 5(청양 1,2,3, 봉암천, 승천), 공사중 9(군량천, 장승천 등)
			청양IC	- 공사중(토공작업)
8공구	1개소	5개소 (완료3)	터널	- 공사중 1(봉수산터널 1,050m 굴착중)
			교량	- 완료 3(비봉3교, 비봉4교, 무한천교), 공사중 2(비봉 2, 5교)

▣ 정산 ∼ 신풍 간 국도 확ㆍ포장사업(위임 국도39호선)

❍ 위    치 : 청양군 정산면 ∼ 공주시 신풍면

❍ 사업기간 : 2018.  9. 10. ∼  2024. 12.(공정률 60%)

❍ 사 업 량 : L=12.8km, B=10.5m(우리군 6.3km)

❍ 사 업 비 : 51,100백만원(시설비 37,100, 보상비 9,400, 기타 4,600)

- 기투자 242 / 2022년 193 / 2023년 35  / 2023년 이후 41

❍ 시 공 사 : 선엔지니어링 외 2개사

❍ 감 리 사 : 내경엔지니어링 외 2개사

❍ 진행사항

- 2018. 09. : 공사 착공

- 2020. 11. ~ 2021. 11. : 보상 추진

- 2021. 11. : 청양군 구간 공사착수(솔티터널 부)

※ 청양구간 배수공 공사 진행중

- 2024. 12. : 공사 준공

【2】도로사업(충청남도 건설본부)

▣ 청양∼신양 IC 간 도로 확ㆍ포장사업(국지도70호)

❍ 위    치 : 청양군 청양읍 ∼ 예산군 신양면(신양IC)

❍ 사 업 량 : L=16.2km, B=10.0m 선형개량(우리군 14.7km)

❍ 사 업 비 : 52,700백만원(공사비 38,700, 경비 및 보상비 14,000)

- 기투자 44,702 / 2022년 2,913 / 2023년 3,300 / 2023년 이후 1,785

❍ 사업기간 : 2017. 05. ∼ 2023. 12.(공정률 85%)

❍ 시 공 사 : 흥화건설 외 2개사

❍ 감 리 사 : 한맥기술 외 1개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2017. 05. : 공사착공

- 2023. 12. : 공사준공

▣ 청양 운곡∼공주 신풍 국지도 도로확포장사업(국지도 96호)

❍ 위    치 : 청양군 운곡면 효제리 ∼ 공주시 신풍면 봉갑리 일원(국지도96호)

❍ 사 업 량 : 도로 확포장 L= 2.55km(효제∼위라 0.6km), B=10.0m

❍ 사 업 비 : 37,900백만원(운곡 효제리 ∼ 위라리, 30억 포함)

❍ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2033. 12.

❍ 추진사항 및 계획

【운곡 효제~위라리】

❍ ‘21. 10. : 실시설계 용역 착수(‘23. 11. 준공)

❍ ‘23. 12. : 공사착공(‘25. 12.)

※ ‘21. 09. : ｢제5차 국도‧국지도 건설 5개년 계획(‘21∼‘25)｣ 반영

대치면 상갑리 ~ 신풍면 봉갑리 구간 추가 반영

【대치 상갑 ~ 공주 신풍 봉갑】

❍ ‘24. ∼ ‘25. : 실시설계 용역 추진

❍ ‘26. ∼ ‘33. : 공사 추진

▣ 화성∼장곡 간 도로확‧포장 사업(지방도 609호)

❍ 위    치 : 청양군 화성면 화암리 ∼ 보령시 청라면 장현리

❍ 사 업 량 : L=2.4km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 13,306백만원(공사비 10,384, 경비 및 보상비 2,922)

- 기투자 900 / 2022년 500 / 2023년 3,000 / 2023년 이후 8,906

❍ 사업기간 : 2018. 06. ∼  2026. 12.(공정률 5%)

❍ 시 공 사 : ㈜도담종합건설

❍ 감 리 사 : ㈜천일

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 06. : 실시설계용역 착수

- 2020. 04. : 실시설계완료

- 2022.  1. ~ 현재 : 손실보상 진행중

- 2023.  06. : 공사착공

- 2026.  12. : 공사준공

▣ 구룡∼용두 간 도로확‧포장 사업(지방도 610호)

❍ 위    치 : 청양군 남양면 구룡리 ∼ 용두리

❍ 사 업 량 : L=1.3km, B=10.0m

❍ 총사업비 : 10,795백만원(공사비 8,321, 경비 및 보상비 2,474)

- 기투자 609 / 2022년 800 / 2023년 3,000 / 2023년 이후 6,386

❍ 사업기간 : 2018. 06. ∼ 2025. 12.(공정률 5%)

❍ 시 공 사 : ㈜현성종합건설

❍ 감 리 사 : ㈜천일

❍ 추진사항 및 계획

- 2018. 06. : 실시설계용역 착수

- 2020. 04. : 실시설계완료

- 2022. 10. ~ 현재 : 손실보상 진행중

- 2023. 06. : 공사착공

- 2026. 12. : 공사준공

▣ 광시~운곡 지방도 도로확‧포장 사업(지방도 604호)

❍ 위    치 : 예산군 광시면 ~청양군 운곡면(지방도 604호)

❍ 사 업 량 : 연장=6.74㎞, 폭=10.0m(2차로)

❍ 총사업비 : 46,500백만원(공사비 39,100, 보상비 7,400등)

- 기투자 300 / 2022년 700 / 2023년 1,000 / 2023년 이후 44,500

❍ 설계기간 : 2021. 10. ∼ 2026. 12.

❍ 실시설계 용역사 : ㈜경호엔지니어링 외 2개사

❍ 추진사항 및 계획

- 2021. 09. : 실시설계 용역 착수

- 2022. 07. : 관계기관 협의

- 2023. 10. : 실시설계용역 완료

▣ 대봉∼흥산 지방도 도로확포장사업(지방도606호)

❍ 위    치 : 청양군 남양면 흥산리∼대봉리(지방도606호)

❍ 사 업 량 : 연장 L=4.6㎞, 폭 B=10.0m(2차로 개량)

❍ 총사업비 : 19,400백만원(공사비 18,400, 부대비 1,000)

- 2023년 1,000 / 2023년 이후 18,400

❍ 사업기간 : 2023. ∼ 2029.

❍ 추진사항 및 계획

- 2022. 12. : 예산확보

- 2023. 07. : 실시설계용역 착수

- 2025. 07. : 실시설계용역 완료

【3】도로사업 (충청남도 건설본부 동부사업소)

▣ 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사

❍ 위    치 : 청양군 남양면 대봉리 64번지 일원(지방도 606호)

❍ 사 업 량 : 오르막차로 설치(L=1.0㎞ B=3.25m)

❍ 총사업비 : 1,500백만원(공사비 1,300, 보상비 등 200)

- 기투자 80 / 2022년 520 / 2023년 이후 900

❍ 사업기간 : 2021. 04. ~ 2024. 12.

❍ 용 역 사 : ㈜한경기술공사

❍ 추진실적 및 계획

- 2021. 04. : 실시설계 용역 착수

- 2023. 06. : 실시설계 용역 완료

- 2023. 07. : 공사 발주예정