투자유치과

	목 차

□ 2023년 투자유치과 운영성과
□ 2023년 주요업무 추진실적
1. 맞춤형 홍보 활동 및 전략적 기업유치 추진
2. 청양 일반산업단지 조성
3. 기업환경 개선으로 경영활력 및 고용창출 제고

2023년 투자유치과 운영성과

□ 금년도에는

❍ 투자유치 활성화 환경 조성 및 온․오프라인 유치활동 강화

- 투자유치협력관 위촉(14명) 및 성과금 확대(민간 최대 1.5억원 ➠ 2억원)

- 유관기관 협력 네트워크 구축 및 투자설명회･맞춤형 투자제안(7회)

- 기업유치 홈페이지 제작･운영, 주요 타겟지역 대상 홍보활동 집중 전개

❍ 청양 일반산업단지 조성 본격 추진

- 인허가 사항 등 협의 완료 및 산단계획 道 심의위원회 제출

- 청양일반산단의 안정적인 공업용수 확보 및 공급을 위한 지하수 저류댐 개발사업 및 관로 개설사업 확정

❍ 관내 기업체 경영･근로환경 개선 및 지원

- 기업체 SOC 지원(21건/2.3억원), 농공단지 노후기반시설 확충(10건/12.3억원)

- 근로자 주거비 지원 확대, 근로자 작업복 공동세탁소 운영(주 2회/80벌)

□ 2024년에는

❍ 차별화된 투자상품 개발 등 전략적 유치 활동 추진

- (투자상품 개발) 인력공급시스템 구축 및 공모사업 연계 산업인프라 개선

- (산학협력) 충남도립대 및 전문인력 공급을 위한 도내 대학 협력관계 구축

- (인적자원 조직화) 투자유치협력관 활성화를 통한 기업유치 활동 내실화

- (홍보강화) 기업유치 네트워크를 활용한 전략적 홍보 활동 전개

❍ 청양 일반산단 기반 시설 적기 조성 및 주민소통 창구 마련

- (인프라 확충) 공업용수 공급, 진입도로 개설 등 산업기반 인프라 구축

- (주민소통) 토지보상, 유치업종 등 주민 소통 창구 운영

❍ 중소기업 성장 지원 및 기업 육성 활동 강화

- (기업지원) 기업체 SOC사업 지원 및 근로자 근로환경 개선사업 확대

1		맞춤형 홍보 활동 및 전략적 기업유치 추진

□ 산업단지(청양 일반산업단지, 정산 2 농공단지)의 선 입주수요 확보를 위한 맞춤형 홍보 및 전략적 기업유치 활동 추진

□ 추진실적

❍ 투자유치 관련 타겟지역 유관기관 협력 네트워크 구축

한국중견기업연합회(온‧오프라인 홍보), 대전상공회의소(홈페이지 홍보 2회, 온라인 뉴스레터 발송), 한국산업단지공단(투자설명회 1회, 리플릿 배포), 중소기업융합중앙회(투자설명회 2회), 서울경제진흥원 등 각종 산업별 협회 등과 연계한 유관 기관 협력사업 발굴 추진

❍ 홍보자료 제작 및 CEO 대상 인지도 제고를 위한 전략적 홍보

- 기업유치 전용 홈페이지 제작(온라인 홍보 시 링크 활용, 배너광고 연계 등)

- 청양 산업단지 홍보리플릿 제작(5,000부)및 유관기관 등 배포(1,000부)

- 잠재 투자기업(종업원 수 100명 이상/약 2천개) 대상 리플릿 배포(2,000부)

- 중앙일간지 뉴스기사 송출(6회) 및 포털사이트 검색어 광고(연중)

- 경기도내 기업 밀집지역 현수막 게첨을 통한 청양산업단지 홍보(3개 도시)

❍ 업종별 지역별 소규모 투자설명회 개최 및 맞춤형 투자제안

- 투자설명회 개최(4회)*, 맞춤형 투자제안(3회)** 시행

* 당진 석문산단(‘23.4.) / 대전･충남 경제단체장(‘23.6.) / 대전중소기업융합중앙회(’23.9./‘23.10.)

** 서울 마곡산단 W사 / 경남 창원 B사 / 충남 논산 K사 협의 진행 중

❍ 투자유치 활성화를 위한 관련 자치법규 개정

- 대규모 투자기업 지원대상 기준 세분화 및 지원 상한액 상향

- 기업유치 활성화를 위한 기업유치 포상금 지급액 상향(최대 2억원)

- 인적 네트워크 조직화를 위한 투자유치협력관 위촉 및 유치 활동 개시(14명)

향후 계획		□ 선입주수요 확보를 위한 전략적 투자상품 개발 □ 산학협력을 통한 인력공급시스템 구축(전문직, 생산직) □ 타겟지역 집중홍보, 유관기관 등 네트워크 활용 기업유치 활동강화

2		청양 일반산업단지 조성

□ 개   요

❍ 위치/면적 : 비봉면 신원리 일원 / 732,640㎡ (약 22만평)

❍ 사 업 비 : 약 1,086억원 / 민간개발방식 (청양일반산업단지㈜)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2026년 (’23년 하반기 산업단지계획 승인목표)

□ 그동안 추진실적

❍ 2022년 1분기 국토부 산업단지 지정계획 고시 (’22.4)

❍ 일반산업단지계획 승인 신청 및 주민설명회 개최 (’22.12)

❍ 관계기관·부서 협의 완료(49개소) 및 심의위원회 안건 제출 (’23.10)

※ 심의위원회 추진계획

’23. 10.		’23. 11.		’23. 12.	⇨	산업단지계획 승인‧고시
산단계획 심의 위원회 안건제출		전문가 자문 및 조치계획 작성		道 내부검토 및 심의위원회 개최

□ 현안사항 (토지보상절차 추진)

❍ (토지보상계획 일정)

’23. 12.		’24. 2.		’24. 3.		’24. 4.		‘24. 5.		‘24. 6.
사업계획승인		기본조사 (토지, 지장물)		보상계획공고		보상협의회 구성		감정평가		토지보상실시

❍ (보상협의회)「토지보상법」제82조에 따라 보상협의회 설치 의무대상

<보상협의회 구성(안) - 면적 10만㎡ 이상, 소유자 50인 이상인 공익사업 설치 의무>

∘ 설치주체: 청 양 군         ∘ 설치시기: 보상계획 열람기간 만료 후 30일 이내

∘ 구 성 원: 위원장(부군수), 간사, 서기(공무원), 위원 8~16인(토지소유자, 관계인, 변호사, 감정평가 또는 보상업무 5년 이상 경험자, 사업시행자)  ※ 토지소유자, 관계인은 1/3이상으로 구성

향후 계획		□ 산업단지계획 승인 및 토지보상절차 착수 □ 기반시설(지하수저류댐, 관로) 예산확보 및 실시설계용역 시행

3		기업환경 개선으로 경영활력 및 고용창출 제고

【1】 기업체 SOC 지원사업【군 자체 / 270백만원(군148, 자부담122)]

◈ 기업체 노후 기반시설(도로, 주차장 등) 보수·설치 ➠ 기업체 자생력 강화

❍ (추진실적)

업 체 명	사업내용	사 업 비(백만원)			비고
		계	군비	자부담
9개사		270	148	122
㈜예은	작업로 아스콘포장	48	24	24	완료
㈜남영산업	공장지붕 물받이 보수	20	12	8	완료
㈜대하산업	작업로 콘크리트포장	38	19	19	완료
대한상사(주)	배수로 정비	17	12	5	완료
㈜영수식품	배수로 정비	5	3	2	완료
㈜우리에프엔비	작업로 아스콘포장	36	18	18	완료
㈜나무들	공장 및 사무실 누수보수	12	6	6	완료
계룡환경(주)	작업로 콘크리트포장	48	24	24	완료
㈜보람	작업로 콘크리트포장	32	16	16	완료
실시설계	실시설계	14	14	-

※ 근로자 전입률에 따른 차등지원 (50~70%, 25백만원/업체별)

【2】농공단지 기반시설 정비․확충 : 12억원(도비보조사업)

◈ 농공단지 노후기반시설 개선·확충 ➠ 기업인프라 구축 지원

❍ (추진실적)

구분	사 업 명	사업내용	사업비(백만원)			비고
			계	도비	군비
합계	10건		1,234	360	874
비봉	지하관정 개발 및 관로설치	관정 1공, 송수관로 L=300m	223	67	156	추진중
학당	지하관정 개량	양수시설, 상부 보호공 정비	30	9	21	완료
화성	노후관로 교체	송배수관로 L=700m	184	55	129	완료
	물탱크 보수	사수처리장치 설치	80	24	56	완료
	공공폐수처리시설	폐수처리공정 후단 분리막 설치, 불명수 처리	375	102	273	추진중
운곡2	정수시설 증설	정수시설 증설 (600㎥/일 → 1,000㎥/일)	217	65	152	완료
	지하관정 개량	수중모터펌프 교체	19	6	13	완료
	정수장 유지보수	전처리 여과기 설치	30	9	21	추진중
정산	정수장 유지보수	전처리 여과시설 여재교체	31	9	22	추진중
	공공폐수처리시설	중계펌프 보수	45	14	31	추진중

【3】근로자 작업복 공동세탁소 운영 : 1억원(특교세 80, 군비 20)

◈ 기업체 근로자 생활여건 개선 → 근로자 건강권 보장 확립

❍ (설치위치) 비봉농공단지 관리사무소 1층(기존 체력단련실)

❍ (운영방법) 청양군지역자활센터 위탁 수거·배송(사용료 1벌당 500~1,000원)

❍ (추진실적) 세탁소 시 운전(3월) 및 위탁운영 협약체결(7월)

【4】기업체 근로자 주거비 지원 : 0.54억원(30명)

◈ 근로자 주거비 지원 ➠ 고용 유지·창출 지원 및 전입 유도

❍ (지원내용) 월세* 또는 전세자금대출** 이자 지원

* 월세의 50%(최대 월 16.4만원) / ** 전세 대출금 이자의 50%(최대 연 100만원)

❍ (지원대상) 군내 주민등록·중소기업 재직, 월세·전세 임차, 기준중위소득 150% 이하

❍ (추진실적) 신청 공고(3월), 2명 2,826천원 지원(월세)

【5】농공단지 환경기초시설 설치 및 증설

◈ 폐수량과 오염농도 증가 ➠ 폐수처리 용량 증설 및 시설개선

❍ (사업개요)

구 분	사 업 량	사 업 비	기 간	공정율	비고
정산농공단지 공공폐수처리시설	1,200㎥/일 (증설 400㎥/일, 개량 800㎥/일)	9,155백만원 (국 5,773, 군 2,014, 원인자 1,368)	2017.01. ~ 2023.11.	99%
운곡2농공단지 공공폐수처리시설	400㎥/일 (증설 200㎥/일, 개량 200㎥/일)	2,505백만원 (국 1,971, 원인자 534)	2020.04. ~ 2023.10.	100%

향후 계획		□ ‘24년 노후기반시설 개선사업 및 기업체 SOC 지원사업 확대 추진 □ 관내 근로자 작업복 공동세탁소 운영 및 주거비 지원 상향을 통한 기업체 근로환경 개선 □ 농공단지 환경기초시설의 효율적 운영을 통한 쾌적한 환경 조성