도시건축과

	목 차

□ 2023년 도시건축과 운영성과
□ 2023년 주요업무 추진실적
1. 청양군 기본계획․관리계획 수립
2. 맞춤형 주거급여 지원사업 추진
3. 공공임대주택 건립사업 추진
4. 빈집과 주민을 잇는 빈집이음사업 추진
5. 농촌주거환경개선사업 추진
6. 도시가로망 정비사업 추진
7. 도시재생사업 추진
8. 모두가 만족하는 건축민원 처리
9. 공공건축사업 추진

2023년 도시건축과 운영성과

□ 금년도에는

❍ 체계적·종합적인 도시계획 수립을 위한 용역 발주

❍ 도시재생 활성화, 환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 도모

❍ 공공임대주택사업 및 각종 주택·주거복지사업의

원활한 추진

❍ 신속·정확한 민원 처리로 신뢰성 있는 건축행정 추진

❍ 각 부서에서 추진하는 공공건축사업 기획·설계·

공사감독 지원

□ 2024년에는

❍ 「인구 5만 자족도시」 달성을 위한 중장기 계획 수립

❍ 주거약자 및 환경 등을 고려한 맞춤형 주거지원으로

주거안정 강화

❍ 지속적인 도시재생사업 추진으로 원도심 활성화 추진

❍ 체계적인 공공건축사업 추진으로 공공건축의 품격 향상

❍ 정확하고 신속한 건축 인·허가 처리로 군민 편익 증대

1		청양군 기본계획․관리계획 수립

□ 도시의 기본적인 공간구조와 장기발전방향 제시

□ 도시의 개발, 정비, 보전을 위한 계획을 수립하여 도시의

제반 기능 조화 및 주민의 안전한 생활 도모

【1】 2040 청양 군기본계획 및 공업지역 기본계획수립

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양군 행정구역(A=479.1㎢)

❍ 용역기간 : 2023. 6. ~ 2025. 4.(22개월)

※ 건설기술위원회 심의 및 사업수행능력평가 절차로 지연

❍ 사 업 비 : 1,500백만원

❍ 사업내용 : 2040 청양 군기본계획 및 공업지역 기본계획 수립

□ 추진실적

❍ ‘23. 02. : 충청남도 건설기술위원회 심의

❍ ‘23. 03. : 심의의견 조치계획 제출

❍ ‘23. 04. : 사업수행능력평가 접수 (㈜도화 외 9개사)

❍ ‘23. 05. : 사업수행능력평가 완료 및 통지

❍ ‘23. 06. : 적격심사 및 착수

❍ ‘23. 08. : 착수보고회 개최

❍ ‘23. 09. : 기초조사 진행

❍ ‘23. 10. : 토지적성평가 평가지표 선정 자문

❍ ‘23. 11. : 토지적성평가 및 재해취약성분석 검증

❍ ‘23. 12. : 군기본계획 초안 수립

향후 계획		□ 저탄소 녹색도시계획, 공업지역기본계획 수립 □ 도시경관 및 도시교통계획 수립 □ 기초계획 완료에 따른 군기본계획(안) 작성 및 입안 □ 군민의견 수렴 및 군의회 의견 청취

【2】 2030 청양 군관리계획(재정비) 수립

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양군 행정구역

❍ 용역기간 : 2023. 6. ~ 2025. 12.(30개월)

※ 건설기술위원회 심의 및 사업수행능력평가 절차로 지연

❍ 사 업 비 : 1,700백만원

❍ 사업내용 : 2030 청양 군관리계획(재정비) 수립

□ 추진실적

❍ ‘23. 02. : 충청남도 건설기술위원회 심의

❍ ‘23. 03. : 심의의견 조치계획 제출

❍ ‘23. 04. : 사업수행능력평가 접수 (㈜동명 외 7개사)

❍ ‘23. 05. : 사업수행능력평가 완료 및 통지

❍ ‘23. 06. : 적격심사 및 착수

❍ ‘23. 09. : 착수보고회 개최

❍ ‘23. 11. : 기초조사 진행

❍ ‘23. 12. : 관리계획 및 성장관리계획 초안 협의

※ 주거지역 확장 관련 충남도 사전의견 청취 후 초안 작성

향후 계획		□ 기초조사 및 정보체계 구축 완료 □ 단계별 집행계획 및 성장관리계획 수립 □ 기초계획 완료에 따른 군관리계획(안) 작성 및 입안 □ 군민의견 수렴 및 군의회 의견 청취

2		맞춤형 주거급여 지원사업 추진

□ 기초주거급여 수급자에게 주거급여 지급으로 주거안정 도모

□ 임차가구는 임차료 지원, 자가가구는 주택 수선으로 실질적 주거 지원

□ 개   요

❍ 지원대상 : 기준중위소득 47% 이하인 가구

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구	7인가구
기준금액 (원/월)	894,614	1,499,639	1,929,562	2,355,697	2,771,277	3,177,222	3,579,072

□ 지원기준

❍ 임차급여(소득별차등지원)

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구	7인가구
지원금액	164,000	185,000	220,000	256,000	264,000	313,000	344,000

구 분	경보수	중보수	대보수
수선주기	3년	5년	7년
보수범위	도배, 장판교체 등	창호, 단열, 난방공사 등	지붕, 욕실, 주방공사 등
지원액	457만원	849만원	1,241만원

❍ 주택수선급여(자가)

□ 추진실적

❍ 임차료(보증금, 임차료) 지원

- 일반·청년가구 : 매월 20일 지급 / 500여명 / 505,332천원

❍ 주택수선(자가)지원 : 한국토지주택공사(LH)위탁 / 14가구 / 115,000천원

향후 계획		□ 2024년 기준중위소득 48% 이하인 가구로 기준 완화 □ 급여 기준 완화에 따른 수급자 지원 홍보 강화

3		공공임대주택 건립사업 추진

□다양한 공공임대주택(국민, 영구, 행복) 공급으로 안정적인 주거환경 조성

□초고령사회 선제적 대응여건 조성 위한 어르신 맞춤형 공공임대주택 건립

□ 개   요

구 분	사업비(억원)	군비(부담율)	세대수	공모 확정	준공 예정
계	822	217	527	-	-
교월1지구	160	16(10%)	120	2016년	2023년(준공)
교월2지구	217	34(16%)	180	2017년	2027년
고령자복지주택	276	106(38.5%)	127	2019년	2023년(준공)
정산서정지구	169	61(36%)	100	2019년	2027년

□ 추진실적

구분	교월1지구	교월2지구	고령자복지주택	정산서정지구
공정률	100%	토지보상 예정	100%	협의 중
2017	12. 사업계획 승인	8. 사업선정
2018	11. 보상	8. 협약 체결 8. 사업계획 승인신청
2019	10. 사업인정 고시		4. 사업선정 10. 협약 체결	12. 사업선정
2020	10. 토지수용 (법원 공탁 완료)	12. 사업계획승인 보완	6. 보상 10. 사업계획 승인	10. 협약 체결
2021	4. 착공	11. 사업계획 승인	4. 착공
2022	4. 입주자 모집	6. 주민설명회	4. 입주자 모집	5. 설계
2023	10. 준공 및 입주	12. 토지보상 예정	10. 준공 및 입주	12. 사업계획승인 신청 예정
2027		12. 준공 예정		12. 준공 예정

※ 일정 변동될 수 있음

□ 문제점

❍ LH에서 교월2지구 및 정산서정지구에 대하여 재무악화 등의     이유로 당초 협약과는 다르게 사업비 증액 요청하여 사업지연

향후 계획		□ 교월2지구, 정산서정지구 건립 관련 LH와 협의 조정

4		빈집과 주민을 잇는 빈집이음 사업 추진

□ 관내 빈집대상, 리모델링 공사를 통해 도시미관 개선‧슬럼화 방지

□ 빈집정비 효과와 주거약자 등에게 공간제공하여 주거안정 도모

□ 개   요

❍ 사업규모 : 年 5개소 빈집 리모델링

❍ 소요예산 : 10년간 50억원(지방소멸대응기금) / 年 5억원 소요예상

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2031년

❍ 사업내용 : 1억원 한도 내에서 리모델링 지원(5년간 무상임대 조건)

❍ 활용방안 : 예비귀촌인, 한달살기 체험희망자, 주거취약계층에게 리모델링된 빈집 제공, 안정적 주거확보와 정착 연계

□ 추진실적

❍ ‘22. 08. : 지방소멸대응기금 공모사업 선정(빈집이음사업)

❍ ‘22. 12. : 빈집이음(리모델링)사업 기본계획 수립

❍ ‘23. 02.~07. : 빈집이음사업 사업대상자 모집 공고(1~3차) 및 선정

- 모집결과 : 총 7건 신청(3건 적합(남양면, 정산면, 목면), 4건 부적합)

❍ ‘23. 08. : 빈집이음사업 리모델링 설계용역

❍ ‘23. 11.~12. : 착공 및 준공, 입주자 모집·운영관리

□ 문제점

❍  5년 무상임대에 따른 재산권행사 불가에 따른 신청기피

❍ 사업에 적합한 1~2등급(양호한 집) 건축물 부족에 따라 신청률 저조

향후 계획		□ 빈집이음사업의 장점 및 좋은 사례를 적극 홍보하여 신청률 고취 □ 빈집이음사업 홍보, 읍면별 활용가능한 빈집 발굴조사

5		농촌주거환경개선사업 추진

□ 낡은 주택을 개량하여 주거환경개선 및 정주의욕 고취□ 방치된 빈집정비와 슬레이트 지붕재 철거로 쾌적한 생활환경 제공

□ 개   요

구 분	사업량 (동)	사업비 (백만원)	지 원 내 용
계	272	673
농촌주택개량	60	-	연면적 150㎡이내 무주택자 (고정연리 2% 또는 변동금리 최대 2억 융자)
농촌빈집정비	50	50	1,000천원/동
슬레이트 지붕재 철거	162	623	- 슬레이트철거 135동(3,520천원/동) - 지붕개량 3동(6,280천원/동) - 비주택(창고, 축사) 24동(5,400천원/동)

* 농촌주택개량(융자)사업비는 NH농협은행 국비자금 활용

* 농촌빈집정비사업은 대상자 선정 이후, 자가 철거하고 보상금 지급

* 슬레이트지붕재 철거는 한국석면안전협회에 위탁 시행

□ 추진실적

❍ ‘23. 01. : 농촌주거환경개선사업 공고

❍ ‘23. 02.~11. : 농촌주거환경개선사업 신청서 접수 및 사업진행

(주택개량 39호 진행 / 빈집정비 24호 철거 / 슬레이트 127호 철거)

❍ ‘23. 12. : 농촌주거환경개선사업 목표량 달성 예정

향후 계획		□ 수시 추가신청 접수 및 철거 독려 □ 농번기 이후 동절기 이전 사업 목표 달성

6		도시가로망 정비사업 추진

□ 청정 청양의 이미지 조성과 도시가로망정비 등 주거환경을개선하여 주민생활편익 도모

□ 개   요

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간	공정율 (%)
			계	‘21년	‘22년	‘23년
계	3개소		2,400	600	1,000	800
정산도서관 앞 도로개설	정산면 서정리	L=140m B=8m	600	600	-	-	‘21.01.∼ ‘23.11.	90
서정리 진입도로 (소로3-12)개설사업	정산면 서정리	L=500m B=6m	1,000	-	1,000	-	‘21.06.∼ ‘23.12.	85
서정리 진입도로 (소로3-11)개설사업	정산면 서정리	L=350m B=6m	800	-	-	800	‘22.08.∼ ‘24.10.	5

□ 추진실적 및 계획

정산도서관 앞 도로개설사업		․‘23. 02. : 미협의 토지보상 완료 ․‘23. 03. : 공사 재착공 - 한국전력공사 전주 이설 지연으로 인한 사업 지연 ․‘23. 11. : 공사 준공
서정리 진입도로 (소로3-12) 개설사업		․‘21. 12. : 실시설계용역 완료 ․‘22. 08. : 토지보상 완료 ․‘22. 10. : 공사 착공 ․‘23. 12. : 공사 준공
서정리 진입도로 (소로3-11) 개설사업		․‘22. 08. : 실시설계용역 착수 (~ ‘23. 2.) ․‘23. 02. : 관련법 검토 및 토지보상 협의 ․‘23. 06. : 토지보상 완료 ․‘23. 06. : 공사 착공(농번기 공사중지) ․‘23. 11. : 공사 재착공 ․‘24. 10. : 공사 준공

7		도시재생사업 추진

◈ 쇠퇴하고 있는 도심환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 도모

◈ 도시재생 활성화 및 도시경쟁력 제고로 살고 싶은 도시 조성

【1】 읍내 3·4리 도시재생 사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 읍내 3․4리 일원

❍ 공사기간 : 2023년 ∼ 2025년(3년)

❍ 사 업 비 : 14,400백만원 (국비 8,000, 도비 1,600, 군비 3,800, 기금 1,000)

❍ 사업내용 : 도시재생사업 (주거지지원형 A=94,500㎡)

구 분	사업비 (백만원)	사 업 내 용
3개 분야	14,400
살고싶은 정주환경 조성	2,800	⦁노후주거지 집수리 40호, 지붕개량 20호 ⦁보도 설치 L=250m, 골목길 정비 L=900m
소통 문화거점 조성	6,700	⦁다함께 어울림 센터 (4층, 건축면적 240㎡) ⦁어울림공원(1,500㎡), 스토리텔링거리 L=600m
함께하는 공동체 조성	4,900	⦁청춘양성소 (3층, 건축면적 150㎡) ⦁노노케어센터 (2층, 건축면적 130㎡)

□ 추진실적

❍ ‘22. 05. : 활성화계획 승인 및 고시(충청남도)

❍ ‘22. 06. : 공공건축(거점시설 3개소) 기획용역 착수(’23. 6. 완료)

❍ ‘23. 02. : 활성화계획(변경) 수립용역 착수(’23. 12. 완료)

- 변경내용 : 거점시설(어울림센터, 청춘양성소) 병합, 보행로 조성 변경 등

❍ ‘23. 07. : 거점시설(노노케어센터) 실시설계용역 착수(’23. 11. 완료)

❍ ‘23. 10. : 집수리 지원사업(1차) 착공

- 1차 수요조사 결과 : 19개소 신청(공동주택 2, 일반주택 17)

❍ ‘23. 10. : 소통어울림공원 및 거리조성사업 착공(’24. 12. 완료)

향후 계획		□‘24. 01. : 청춘어울림센터 공공건축기획용역 착수 □‘24. 03. : 거점시설(노노케어센터)공사 착공(‘24. 12. 완료) □‘24. 07. : 청춘어울림센터 실시설계용역 착수 □‘25. 12. : 사업 완료

【2】 도시 취약지역 생활여건 개조사업

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 교월2리 일원

❍ 공사기간 : 2022년 ∼ 2023년

❍ 사 업 비 : 5,416백만원 (국비 3,701, 도비 476, 군비 1,110, 기타 129)

❍ 사업내용 : 면적 (A=172,718㎡)

구 분	사업비 (백만원)	사 업 내 용
계	5,416
주민안전확보	741	⦁CCTV, 옹벽, 화재방지시설 설치
생활인프라 개선	1,907	⦁마을회관 신축, 소방도로 개설, 가스공급시설 설치
주택정비지원	1,014	⦁빈집 철거, 주택 수리, 슬레이트지붕 개량
기타 비용	1,754	⦁주민공동체 지원, 설계, 토지보상비 등

□ 추진실적

❍ ‘20. 04. : 공모 선정

❍ ‘20. 05. : 위․수탁 협약 체결(한국농어촌공사 청양지사)

❍ ‘21. 08. : 기본계획 승인(국토부)

❍ ‘21. 10. : 실시설계용역 착수

❍ ‘22. 08. : 기본계획 변경승인(국토부)

- 변경내용 : 주민 추가 요구사항(마을주차장 신설 등) 반영

❍ ‘22. 11. : 세부설계 완료 및 공사 착공

❍ ‘23. 02. : 지역역량강화 용역 착수

향후 계획		□‘23. 12. : 사업 기간 연장 신청(’23 → ’24년, 1년 연장) □‘24. 12. : 사업 완료

【3】 범죄예방디자인 사업

기준 년도	위 치	사업내용	사업비(백만원)			사업 기간	공정율 (%)
			계	‘22년	‘23년
계	2개소		1,020	510	510
2022년	청양읍 벽천리	방범시설, 기반시설정비 등	510	510	-	‘22.01.∼ ‘23.10.	100
2023년	청양읍 읍내,송방리	안심보행로, 침입차단시설 등	510	-	510	‘23.01.∼ ‘24.12.	-

□ 추진실적 및 계획

청양읍 벽천리		․‘22. 04. : 실시설계용역 착수(‘22. 12. 완료) ․‘22. 05. : 지역역량강화 착수(‘22. 10. 완료) ․‘22. 12. : 공사 착공 ․‘23. 10. : 사업 완료
청양읍 읍내‧송방리		․‘23. 04. : 제1회 추경예산 편성 ․‘23. 04. : 기본계획 및 실시설계 착수 ․‘23. 06. : 주민 사업설명회 실시 ․‘23. 06. : 지역역량강화 추진(‘23. 10. 완료) ․‘23. 09. : 기본계획(안) 수립 ․‘23. 11. : 충청남도 공공디자인진흥위원회 심의 ․‘23. 12. : 실시설계 완료 및 공사 착공 ․‘24. 12. : 사업 완료

8		모두가 만족하는 건축민원 처리

【1】 공정･신속･정확한 건축 인･허가 처리

□ 건축 관련 각종 인·허가 신청 시 친절하고 자세한 상담과 공정‧신속‧정확한 업무처리로 군민의 삶의 질 향상에 기여

□ 개   요

❍ 각종 건축민원의 신속 처리 및 즉시 현지 확인을 통한 행정 신뢰성 제고

❍ 건축 민원의 전문적이고 친절한 상담을 통한 군민 만족도 향상

❍ 건축민원(가설건축물 연장) 사전안내문 발송 등 군민 중심 건축 행정 추진

□ 추진실적

❍ 건축물 인·허가 현황

(2023. 10. 27. 기준)                                                 (단위 : 건)

구분 합계	건축 허가	건축 신고	사용 승인	가설건축물 신고	공작물 축조신고	건축물대장 민원처리	건축물 해체	비고
2,332	45	220	149	1,228	5	580	105

향후 계획		□ 협의부서(복합민원 등)와 유기적 협력으로 민원처리기간 단축 □ 민원인의 시간적·경제적 절감 효과로 만족도 향상 □ 건축물의 준공 후 정확한 건축물대장 관리로 건축행정 신뢰도 제고

【2】 2023년 소규모 공동주택 관리 지원사업

□ 소규모 공동주택 단지의 공용시설에 대한 보수비용 지원

□ 개   요

❍ 대    상 : 건축허가를 받은 공동주택 중 8세대 이상으로 사용승인일로부터 10년이 경과된 공동주택

❍ 지원범위 : 사업비의 70% 이내, 최대 3천만원 이내

❍ 지원사업

1. 공동주택의 옥상의 공용부분 유지·보수사업(증축, 대수선 제외)

2. 단지 내 도로와 가로(보안)등 보수와 개선 등

❍ 2023년 사업비 : 60,000천원

□ 추진실적

❍ 상반기 지원사업 추진현황

- ‘23. 4. : 사업시행 접수결과(2개단지 : 현대하이츠빌라, 로얄아파트)

- ‘23. 8. ~ 9. : 보조금 교부 결정

- 현재공정 : 공사완료(정산서류 준비 중)

※ 현대하이츠빌라 : 공용옥상 난간 전면보수(158.04㎡, 15,307천원 지원)

※ 로얄아파트 : 외벽 균열보수 및 방수(310㎡, 15,287천원 지원)

❍ 하반기 지원사업 추진현황

- ‘23. 8. : 사업시행 접수결과(2개단지 : 의성연립, 에코빌101동)

- ‘23. 10. : 지방보조금 사업자 선정 심의(원안가결) ⟹ 실시설계중

※ 의성연립 : 단지내 우수관로 및 포장공사(관로120m, 포장56㎥, 21,000천원 지원)

※ 에코빌101동 : 옥상 및 외벽방수공사(옥상54㎡ 등, 8,008천원 지원)

향후 계획		□ 하반기 선정단지 지원결정 통보 및 단지별 사업착수 □ 단지별 완료에 따른 사업준공검사 및 지원금(정산)지급

9		공공건축사업 추진

◈ 각 부서에서 추진하는 공공건축사업 기획·설계·공사감독 지원

◈ 군 디자인자문단(민간전문가) 운영으로 공공건축 완성도 향상

□ 개   요

사업기획	➱	사전행정절차추진	➱	설계공모	➱	기본 및 실시설계	➱	착공	➱	준공

❍ (건축기획) 건축물 기능, 규모 설정, 예산 계획 등 건축기획업무 수행으로 내실있는 공공건축사업 추진

❍ (설계공모) 건축설계공모 추진으로 우수한 디자인 설계안 선정

❍ (감    독) 설계 및 공사의 감독업무 지원으로 사업추진 완성도 향상

□ 사업별 추진실적                     (‘23. 11월 초 기준)

사  업  명

규 모

사업비

(백만원)

추진실적 및 향후추진계획

주관부서

가족문화센터 및

평생학습관

8,418㎡

30,338

· 현 공정 : 지하층 골조 공사(공정률10%)

복지정책과 외 2

(향후) 25년 5월 : 공사 준공

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

보건의료원

주차타워

2,074㎡

4,200

· 현 공정 : 골조 완료, 마감공사 (공정률80%)

보건의료원

(향후) 24년 12월 : 공사 준공

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

청양군 다목적회관

2,457㎡

8,400

· 현 공정 : 흙막이 공사, 터파기 준비 (공정률5%)

행정지원과

(향후) 24년 11월 : 공사 준공

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

정산

다목적복지관

5,710㎡

28,725

· 12월 : 설계용역 완료 예정

복지정책과 외 1

(향후) 24년 3월 : 공사 발주 (26년 3월 준공)

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

정산 보건지소

608㎡

2,100

· 11월 말 : 공사 준공 및 개원 준비

보건의료원

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축심의	입 찰	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

내일이U센터

(청년지원센터 등 청년공유시설)

430㎡

3,580

·청소년 복합힐링 공간과 복합화 추진 중

행정지원과

(향후) 24년 2월 : 설계공모 추진

10월 : 공사 발주

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

자원순환처리장

사무실 신축

470㎡

2,300

· 12월 : 공사 착수

환경보호과

(향후) 24년 7월 : 공사 준공

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축심의	입 찰	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

청년 셰어하우스

(함께살아U)

970㎡

6,180

· 11월 : 설계공모 추진

· 12월 : 기본 및 실시설계 착수

행정지원과

(향후) 24년 7월 : 기본 및 실시설계 완료

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

농업근로자 기숙사

910㎡

4,100

· 12월 : 기본 및 실시설계 진행

농업정책과

(향후) 24년 1월 : 설계용역 완료

3월 : 공사 발주

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

청소년 복합

힐링공간(담다)

1,980㎡

12,850

· 11월 : 건축기획 및 사전행정절차 진행중

복지정책과

(향후) 24년 2월 : 설계공모 추진

10월 : 공사 발주

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

친환경

에너지타운

1,520㎡

6,327

· 11월 : 건축기획 및 사전행정절차 진행중

환경정책과

(향후) 12월 : 저온창고동 기본 및 실시 설계

24년 3월 : 주민 복지동 설계공모 추진

기본구상	예산확보	투자심사	공공건축사업 사전검토	공공건축심의	설계공모	기본 및 실시설계	사전행정절차 (건설기술심의 등)	공사시행	운영 및 관리

향후 계획		□각종공사에 대한 관리‧감독 강화로 부실시공 및 안전사고 예방 □신규 공공건축사업의 소요예산 산출, 부지선정에서부터 사전검토 지원으로 사업추진시 문제점 발생 최소화