환경정책과

	목 차

□ 2023년 환경정책과 운영성과		1
□ 2023년 주요업무 추진실적
1. 환경교육 기반 구축 및 환경교육 활성화 추진		2
2. 무공해 수소충전소 설치사업		3
3. 야생동물에 농작물 피해 사전예방 및 지원		4
4. 환경오염물질 배출사업장 지도·점검		5
5. 악취 배출사업장 관리 강화		6
6. 읍·면 재활용 선별장 휴게시설 현대화 사업		7
7. 아이스팩 등 고부가가치 재생원료 선별수거		8
8. 생활쓰레기 배출공간 클린화 사업		9
9. 청양군 생활폐기물 소각시설 설치사업		10
10. 청양군 친환경에너지타운 조성사업		11
11. 자원순환처리장 복합센터 신축사업		12
12. 운행차 배출가스 저감을 위한 군민 지원 확대		13

2023년 환경정책과 운영성과

□ 금년도에는

❍ 기후변화 및 탄소중립 사회로 전환을 위한 선제적 준비

- 노후경유차 저공해조치, 친환경차 보급을 통한 대기오염 완화

- 군민과 함께하는「탄소중립 실천‧확산대회」운영, 환경리더 양성교육

❍ 환경오염물질 및 악취관리 강화로 민원발생 최소화

- 환경오염물질 배출사업장 정기점검으로 사업장 관리 강화

- 축사 등 상습 악취민원 발생지역 모니터링 및 악취감시시스템 구축

❍ 생활폐기물 수거확대를 위한 분리배출 거점공간 조성

- 클린하우스 조성, 재활용 가능자원 수거함(아이스팩, 페트병) 설치

❍ 환경기초시설 건립 사전 행정절차 이행 등 착공 준비 추진
- 소각시설 설치사업 금강청 ｢소규모환경영향평가｣ 완료(9월)

- 친환경 에너지타운 조성사업 편입 토지 10,101㎡ 매입 완료(6월)

- 자원순환처리장 복합센터 신축사업 기본 및 실시설계 완료(3월)

□ 2024년에는

❍ 2045 탄소중립 실현을 위한 기후변화 대응정책 추진

- 공공시설 전기자동차 충전시설 설치 확충 및 친환경차 보급‧확대

- 청양군 환경교육계획 수립 및 군민 맞춤형 환경교육‧홍보

❍ 환경오염발생 사업장 집중관리로 주민과 사업자의 상생 도모

- 악취·소음 등 생활불편 해소를 통한 군민 생활 환경개선

❍ 재활용품 분리배출 활성화를 통한 자원이 순환하는 환경 조성

- 재활용품 거점 수거시설 정비 및 재활용품 수거함 확충

❍ 환경기초시설 확충 및 안정적 운영관리로 쾌적한 환경 조성

1		환경교육 기반 구축 및 환경교육 활성화 추진

□ 기후변화 대응과 탄소중립에 대한 사회적 요구 증대로    미래를 준비하는 장기적 환경 로드맵 수립 필요

□ 개   요

❍ 탄소중립 실현을 위한 환경계획 수립과 군민 맞춤형 환경교육 과정 마련

❍ 지역환경교육센터 지원‧운영을 통한 기후변화 대응인식 제고

□ 추진실적

❍ 환경교육 네트워크 기반 구축 및 전문인력 역량강화

- 지역환경교육센터를 중심으로 환경교육 활동 및 지원

- 환경교육프로그램 개발·보급, 환경교육지도자 양성(22명)

❍ 환경의 중요성 및 인식 제고를 위한 군민 맞춤형 환경교육 추진

- 찾아가는 환경교육 프로그램 운영(3개 마을, 200명)

- 읍면 주민자치 환경리더 양성교육(5회, 20명)

- 친환경 농법확산 및 탄소중립 실현을 위한 퍼머컬쳐 텃밭교육(’23.9./15명)

❍ 군민 주도 탄소중립 생활 실천문화 조성

- (주민리더) 일상 속 탄소중립 실천(쓰레기 분리배출 등) , 군 탄소중립 정책 참여

- (실천‧확산) 탄소중립 실천‧인식확산을 위한 탄소포인트제 시행

- (정책‧행사) 주민‧기관‧단체 등 모두가 참여하는 탄소중립 실천‧확산대회 개최

향후 계획		□ 환경교육 네트워크 구축 및 교육을 통한 환경교육도시 지정 추진 □ 군민이 중심이 되는 탄소중립 이행 문화 정착

2		무공해 수소충전소 설치사업

□ 수소연료전지차 충전 인프라 구축으로 주민편의 제공,

대기환경 개선 및 탄소중립 실천

□ 개   요

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 10.

❍ 사업위치 : 청양스마트복합쉼터휴게소(화성면 구재리)

❍ 사 업 비 : 60억원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6)

❍ 사 업 량 : 특수형 수소충전소 1개소

조감도		건축구성	◾설비동:	저장설비(튜브트레일러), 압축가스설비(고압저장용기), 처리설비(압축기) 등
			◾캐노피:	충전기
			◾사무동:	모니터링 및 제어시스템 등 운영설비
			◾기타설비:	냉각설비 등

□ 그동안 추진실적

❍ 2023. 1. ~ 3. : 수소충전소 기초조사 및 벤치마킹(청주, 보령)

❍ 2023. 4. : ① 부지 제공 및 운영사업자 모집(화성단위농협)

② 사업대행 공공기관 선정(한국가스기술공사)

❍ 2023. 6. ~ 9. : 구축사업 시공계획 수립 (한국가스기술공사)

❍ 2023. 11. : 주요 기자재(압축패키지, 고압저장용기) 입찰 중

향후 계획		□ 2024. 01. : 실시설계 완료 및 행정절차 이행(기술검토 및 인허가 등) □ 2024. 03. : 공사 착공 □ 2024. 10. : 공사 준공 및 충전소 운영 개시

3		야생동물 농작물 피해 사전예방 및 지원

◈ 야생동물 농작물 피해 예방대책 수립 및 피해보상금

지원으로 안정적인 영농활동 보장과 농가 손실 최소화

□ 개   요

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 305.3백만원

❍ 사업내용 : 야생동물에 의한 농작물 피해 사전예방 및 지원

□ 그동안 추진실적                      (단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	재원별 비율(%)			집행액	사 업 량	사업내용	비고
		국비	도비	군비
합 계	305.3				253.0
피해예방시설 지원(보조)	37.2	50	15	35	36.8	13농가	철망울타리(11), 포획틀(1) 태양광전기목책기(1)	농가당 최대 3백만원 지원
피해예방시설 지원(자체)	60	-	-	100	37.2	23농가 (5농가 추진중)	철망울타리(12),포획틀(1) 태양광전기목책기(7) 방조망(1), 경광등(2)	농가당 최대 3백만원 지원
피해방지단 운영	35	-	-	100	35.0	44명	포획 민원처리(181회)
							폐사체 처리(5건)
							야생멧돼지 포획(423마리)
포획포상금 운영	150	-	-	100	122.2	4,750마리	멧돼지(423), 고라니(2,331) 까치 등(1,996)
농작물피해 보상금 지원	20	-	5	95	18.7	14농가	인명 피해(청남 2) 농작물 피해 (대치1, 남양3, 화성7, 비봉1)
야생동물 기피제 보급	3.1	-	30	70	3.1	157포	대치면, 정산면

향후 계획	~	□ 피해방지단 안전사고 예방을 위한 총기 안전장비, 포획틀 지원 □ 야생동물에 의한 인적‧물적피해 최소화 및 아프리카돼지열병 확산 방지

4		환경오염물질 배출사업장 지도·점검

□ 폐수·대기배출시설 및 방지지설의 정상가동과 적정처리    유도로 쾌적한 환경보전 및 환경오염사고 사전 예방

□ 개   요

❍ 폐수·대기 등 환경오염물질 배출사업장 지도·점검

구분	지도․점검대상 사업장 수
	합 계	폐수	대기	공통 (폐수+대기)
청 양 군	50	20	17	13

□ 추진실적

❍ 정기점검 및 위반업소 행정처분

(단위:개소, 10월말 기준)

점검업소	위반업소	행정처분			사법조치
		합 계	과태료	행정명령
36	9	9	0	9 (경고2, 폐쇄명령6, 과징금 1)	1

- 경고 : 배출시설 및 방지시설 운영일지 미비치 - 폐쇄명령 : 사업장 폐쇄로 배출시설 미가동

- 과징금 : 조업정지(10일)에 갈음 하는 처분 (46백만원 부과)

❍ 연도 내 미점검 사업장 정기점검 및 환경관련법 위반 사업장 집중관리로 위반사항 재발 방지

향후 계획		□ 지속적인 지도‧점검으로 사업장 정상가동과 적정관리 유도 □ 가뭄, 장마철 등 환경오염 취약시기 집중관리로 환경오염 예방

5		악취배출사업장 관리 강화

□ 악취저감에 필요한 컨설팅, 악취방지시설 지원사업 추진

□ 악취 자동측정 시스템 운영으로 사업장 관리 강화

□ 개   요

❍ 악취배출 사업장 대상 악취저감 집중관리 및 악취방지시설 설치지원

❍ 악취민원 발생지역에 악취 측정기 설치·운영으로 악취관리 강화

□ 추진실적

❍ 악취자동측정기 설치‧운영(13개소)   ※ ’20년(8), ’22년(3), ’23년(2)

- 상시 모니터링으로 악취저감에 필요한 시설 개선 유도

- 고농도 악취 발산 시 탈취제 살포 등 신속 대응

❍ 악취저감시설 설치 지원사업(비봉면 소재 돈사)

- 지원시설 : 바이오커튼

- 지원규모 : 31백만원(도 30%, 군70%)  ※ 자부담 별도

❍ 축사, 폐기물 등 악취배출사업장 주·야간 순찰 및 악취포집

			(단위: 건수)
포집수	검사결과		행정처분
	기준이내	기준초과	개선권고	개선명령	조치명령
21	17	4	3	0	2

- 개선권고: 폐기물처리업 1개소, 축사 2개소 / 조치명령* : 공장 1개소, 축사 1개소

※ 22년 개선권고 미이행 사업장(공장) 1개소 → 23년 조치명령

향후 계획		□ 전문기관과 연계한 맞춤형 악취저감 컨설팅 및 교육 ⇨ 축산환경관리원의 분기별 점검으로 맞춤형 악취컨설팅 □ 고정식 악취측정기 설치 사업장 외 차량형 악취측정기 신규 운영으로 민원다발 악취배출사업장 집중 관리

6		읍·면 재활용 선별장 휴게시설 현대화 사업

□ 읍·면 재활용 선별장 휴게시설 현대화 사업을 통해 안전한    근무환경 조성과 근로자 복지 개선

□ 개   요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

❍ 총사업비 : 2,335백만원

❍ 사업내용 : 선별장 휴게시설 신축 및 개선(9개소)

□ 추진실적

❍ 2022. 01.~ 12. : 휴게실 신축 및 리모델링(2개소, 운곡면‧화성면)

❍ 2023. 01.~ 12. : 남‧여 휴게실, 화장실 및 샤워실 신축(3개소)

- (청양읍) 실시설계 완료(4월), 건축공사 착공(5월), 준공(12월말)

- (청남면) 실시설계 완료(4월), 건축공사 착공(5월), 준공(11월말)

- (장평면) 실시설계 완료(4월), 건축공사 착공(5월), 준공(9월말)

향후 계획		□ 2024.1.~12. : 재활용선별장 휴게시설 이전 및 리모델링(3개소) - (비봉면) 선별장 인근 부지매입 후 이전 설치 - (대치면‧남양면) 부지 지목변경 후 사업 추진 □ 2025.1.~12. : 재활용선별장 휴게시설 신축(1개소,목면)

7		아이스팩 등 고부가가치 재생원료 선별 수거사업

□ 종량제봉투에 혼합 배출되어 버려지는 아이스팩 재사용을 통한

폐기물 감량 및 수요처에 무상배부로 소상공인 경영활동 지원

□ 개   요

❍ 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 33백만원(도비 10, 군비 23)

❍ 설치장소 : 20개소(공동주택, 마을회관 앞 등)

※ 2022년 : 42개소 설치(종교시설 9, 공동주택 등 33)

❍ 사업내용 : 전용 수거함 설치를 통한 아이스팩 별도 수거 및

재사용 시스템 구축

□ 추진실적

❍ 2023. 01. : 아이스팩 수거 및 세척 용역계약(충남청양지역자활센터)

→ 4,877개 수거, 1,119개 재사용(705개 수요처 납품)

❍ 2023. 01. : 아이스팩 수거함 추가 수요 조사

❍ 2023. 06. : 아이스팩 수거함 추가 설치 완료(20개소, 각 읍·면 2개소)

❍ 2023. 08. : 아이스팩 수거 사업 홍보물 제작 및 배부

< 2023년도 아이스팩 재사용 사업 추진 현황>

배 부 일	배부처	수량(개)	비고
계		1,792
2023.08.30	청양축산업협동조합	110	2023.10월 기준 아이스팩 수거량 : 9,263개 (재사용 1,535개, 폐기 7,606개)
2023.08.04.	인생극장 청양점	20
2023.07.27.	㈜우유생각	26
2023.07.11.	청양군 지역활성화재단	680
2023.07.06.	㈜우양	100
2023.06.23.	청양축산업협동조합	151
2023.05.15.	청양농협하나로마트	115
2023.01.29.	보령수산업협동조합	590

향후 계획		□ 기존 수거함 수거율 파악 후 위치 조정 등 수거 시스템 재구축 □ 재활용품 인센티브제 홍보를 통한 분리배출 수거율 제고 - 군 SNS, 전광판, 학교 및 공공기관 대상 별도 분리배출제 홍보

8		생활쓰레기 배출공간 클린화 사업

□ 무질서하게 배출되는 생활쓰레기 취약지역에 재활용품거점    수거시설인 클린하우스 설치‧운영

➠ 올바른 분리 배출 및 자원재활용 실천 문화 조성

□ 개   요

❍ 사 업 명 : 생활쓰레기 배출공간 클린화(재활용 동네마당) 사업

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 210백만원

( 단위: 천원)

사 업 명	계	국비	도비	군비	사업규모
계	210,000	75,000	40,500	94,500
생활쓰레기 배출공간 클린화	60,000	-	18,000	42,000	4개소
재활용 동네마당 설치지원	150,000	75,000	22,500	52,500	10개소

❍ 설치대상 : 14개소

사업명	계	청양	운곡	대치	정산	목	청남	남양	화성	비봉
계	14	2	-	3	4	-	1	1	3	-
생활쓰레기 배출공간 클린화	4	1	-	-	1	-	-	1	1	-
재활용 동네마당 설치지원	10	1	-	3	3	-	1	-	2	-

□ 추진실적

❍ 2023. 06. : 클린하우스 11개소* 준공

* 청양읍 1, 대치면 3, 정산면 2, 청남면 1, 남양면 1, 화성면 3

❍ 2023. 07. : 사업대상지 변경(운곡면→청양읍)

❍ 2023. 09. : 읍면 생활폐기물 운영 실태 현장점검(9.12.~9.26.)

❍ 2023. 10. : 청양읍 클린하우스 1개소(장안아파트) 준공

❍ 2023. 12. : 정산면 2개소(대박리 마을회관, 역촌2리 마을회관) 준공 예정

향후

계획

□ 클린하우스 운영 개선 종합대책 수립(‘23.12.)

- 시설개선 및 관리인력 확충 등 운영방법 개선

□ 불법투기 CCTV 위치 조정하여 클린하우스 주변 사각지대 최소화

□ 노인일자리 연계 관리인력 확대  □ 상습 투기구역 내 동작 감지 시 안내멘트 송출

- 올바른 쓰레기 분리배출을 위한 주민환경교육 강화

9		청양군 생활폐기물 소각시설 설치사업

□ 기존 소각시설 내구연한 도래 및 처리용량 부족에 따른 신규 설치

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 벽천리 109-4 일원

❍ 총사업비 : 12,159백만원(국 3,648, 도 851, 조 500, 군 7,160)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비						비 고
	합 계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,060	1,000	1,117	2,000	2,733	5,210	국비(30%) 도비(7%) 군비(63%) * 특별조정부과금(5억원)
국 비	3,648	300	335	600	700	1,713
도 비	1,251.2	70	78.2	140	563	400
군 비	7,160.8	630	703.8	1,260	1,470	3,097

* 환경부 재원 협의에 따라 사업비 변경 가능

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 25톤/일(現 15톤/일)

❍ 위·수탁 협약 : 한국환경공단(2019.12.23.)

□ 그동안 추진실적

❍ 2021. 07. : 폐기물처리(소각)시설 입지 결정 고시

❍ 2022. 06. : 경제성 검토(설계 VE) 완료

❍ 2023. 08. : 총사업비 등록 보완자료 제출(기재부 요청/환경부 제출)

❍ 2023. 09. : 소규모 환경영향평가 협의 완료(금강청)

❍ 2023. 10. : 총사업비 조정요구 및 재원협의 신청(금강청)

❍ 2023. 11. : 비점오염저감시설 설치 공사 착공

향후 계획		□ 2024. 01. : 재원협의 완료 및 총사업비 등록 신청 □ 2024. 02. ~ 04. : 설계 적정성 검토(조달청) □ 2024. 05. : 지방재정투자심사(중앙) 및 통합환경허가(변경) 완료 □ 2024. 06. : 공사원가 검토 및 계약심사 □ 2024. 08. : 시설공사 계약 및 착공 □ 2026. 12. : 공사 준공(공기 28개월-시운전 3개월 포함)

10		청양군 친환경에너지타운 조성사업

□ 폐자원 처리 과정에서 발생하는 소각 폐열을 활용하여

혐오·기피 시설 인근 주민의 수익 창출 및 복지 확대 도모

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 벽천리 108 일원

❍ 총사업비 : 6,327백만원(국 3,000, 도 900, 군 2,427)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비					비 고
	합 계	2021년	2022년	2023년	2024년~
계	6,327	200	-	2,000	4,127	국비(50%) 도비(15%) 군비(35%)
국 비	3,000	100	-	1,000	1,900
도 비	900	10	-	300	590
군 비	2,427	90	-	700	1,637

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

❍ 내    용 : 헬스케어센터(2층/664㎡), 저온창고(660㎡) 설치

* 친환경에너지타운 조성사업 추진단 구성 및 운영 : 13명

□ 그동안 추진실적

❍ 2020. 07. : 친환경에너지타운 후보지 선정

❍ 2021. 07. : 친환경에너지타운 타당성 용역 완료 및 공모 확정

❍ 2023. 01. : 편입토지 매입(7필지)

❍ 2023. 05. : 추진단 회의 및 편입토지 매입(2필지)

❍ 2023. 06. : 편입토지(9필지) 매입

❍ 2023. 08. : 건축기획업무 용역 착수(~’24.2.)

❍ 2023. 10. : 친환경에너지타운 조성 사업 추진단 회의

향후 계획		□ 2023. 12. : 저온창고 기본 및 실시설계 발주 □ 2024. 03. : 헬스케어센터 설계 공모 □ 2024. 11. : 공사 계약 및 착공 □ 2025. 12. : 공사 준공

11		자원순환처리장 복합센터 신축사업

□ 열악한 근무 여건 개선과 직원 복지향상 및 기간제

근로자의 휴게시설 공간 마련을 위한 복합센터 신축

□ 개   요

❍ 위    치 : 청양읍 벽천리 98 일원

❍ 총사업비 : 2,700백만원(군 100%) <토지매입비 5억원 포함>

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 복합센터 신축(446㎡) 및 주차장 조성(약 3,200㎡)

□ 그동안 추진실적

❍ 2023. 02. : 공유재산관리계획 변경 승인

❍ 2023. 03. : 복합센터 기본 및 실시설계 완료(기존 지장물 철거 완료)

❍ 2023. 06. : 소규모 재해영향영향 평가 완료

❍ 2023. 07. : 공사 착공(’23.7.21.~현재 공사중지 : 소규모환경영향평가 협의)

❍ 2023. 08. :장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 발급

❍ 2023. 09. : 소규모 환경영향평가 완료(금강유역환경청)

향후 계획		□ 2023. 11. : 군 계획시설 실시계획 인가 완료 □ 2023. 12. : 공사 재개 □ 2024. 07. : 공사 준공

12		운행차 배출가스 저감을 위한 군민 지원 확대

□ 대기오염 유발 노후 경유차(5등급) 오염물질 저감을 위한    조기폐차 지원사업 등 배출가스 저감사업 추진

□ 친환경차 구매 주민에게 보조금 지원으로 친환경차 보급

확대를 통한 탄소중립 이행 및 대기환경 개선

□ 개   요

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 2,907백만원

【1】 운행차 배출가스 저감사업                   (단위 : 백만원)

구 분	세 부 사 업	사 업 비		비고
합 계	6개 사업	1,323
운행차 배출가스 저감사업	노후경유차 조기폐차 지원사업	1,106
	배출가스 저감장치 부착사업	66
	건설기계 엔진교체 지원사업	116
	LPG 화물차 신차구입사업	20
	보증기간 경과장치 성능유지관리	1
	어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	14

【2】 친환경자동차 보급 사업                    (단위 : 백만원)

구 분	세 부 사 업	사 업 비		비고
합 계	4개 사업	1,584
친환경 자동차 보급사업	전기자동차 보급사업	615
	전기화물차 보급사업	888
	전기이륜차 보급사업	48
	수소연료전지차 보급사업	33

□ 그동안 추진실적

(단위 : 대, 백만원)

구 분	세 부 사 업	사업량	사업비	비 고 (집행예정)
합 계	합 계	204	1449.6	175명, 687백만원
운행차 배출가스 저감사업 (6개사업)	소 계	121	401.6	153명, 319백만원
	노후경유차 조기폐차	113	292	134명, 239백만원
	배출가스 저감장치 부착	-	-	16명, 65백만원
	건설기계 엔진교체	7	109	사업완료
	LPG 화물차 신차구입	-	-	1명 , 1백만원
	보증기간 경과장치 성능유지관리	1	0.6	사업완료
	어린이 통학차량 LPG차 전환지원	-	-	2명, 14백만원 신차 출고 지연
친환경 자동차 보급사업 (4개사업)	소 계	83	1,048	22명, 368백만원
	전기자동차 보급사업	33	422	8명, 91백만원
	전기화물차 보급사업	26	588	12명, 274백만원
	전기이륜차 보급사업	24	38	2명, 3백만원
	수소연료전지차 보급사업	-	-	수요 없음

향후 계획		□ 공공시설물 친환경자동차 충전시설 인프라 구축 - 관내 주차면 50면 이상 공공건물 및 공영주차장(22개소, 47대) - 민간사업자 선정 및 업무협약 체결(’23.12.), 시설 준공 및 운영(’24.상반기) □ 기후변화 대응을 위한 대기환경 개선사업 확대 추진 - 운행차 배출가스 저감사업 : 319백만원(153건) 집행 예정 - 친환경 자동차 보급사업 : 368백만원( 22건) 집행 예정